COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  153 DEL  01-09-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA DI VA=
RIANTE  AL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "ADE= 
GUAMENTO  TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMI=
NATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTI=
VITÀ PUBBLICHE"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese
di settembre alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	A seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi, gli spazi di proprietà pubblica destinati ad ospitare eventi ed attività pubbliche siti nel Comune di Castelraimondo (Cinema Manzoni e teatro comunale) hanno subìto danni tali da renderli non più utilizzabili;
-	È fondamentale individuare uno spazio per organizzare eventi ed attività pubbliche a valenza sociale, culturale e didattica capace di accogliere le sopra menzionate attività, attorno al quale aggregare e consentire alla popolazione colpita dal sisma di ritrovare un minimo di coesione sociale in un ambiente sicuro ed attrezzato; 
-	Il Comune di Castelraimondo dispone di un edificio in località Lanciano, perfettamente fruibile e con struttura antisismica, che non ha subìto alcun danno a seguito del sisma del 2016, che potrebbe essere utilmente utilizzato per eventi ed attività pubbliche senza finalità di lucro da parte del Comune di Castelraimondo, dei Comuni limitrofi di Gagliole e Pioraco nonché dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino, i quali hanno già stipulato un accordo con questo Comune per la temporanea delocalizzazione delle attività in precedenza svolte presso gli edifici lesionati dal sisma e fino alla loro sistemazione;
-	In data 30/09/2017 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Regione Marche una proposta progettuale, per un importo totale di € 663.671,66 a valere su fondi donazione relativi a strutture culturali, sociali e ricreative, avente come oggetto il miglioramento ed implementazione della struttura con l’obbiettivo finale di creare un centro polifunzionale modulabile di 1300 mq costituito da due sale attigue utilizzabili anche in maniera singola mediante pannelli scorrevoli. 
-	In data 29/11/2017 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Regione Marche la documentazione progettuale relativa all’intervento di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE", al fine di ottenere la prescritta autorizzazione. La documentazione trasmessa comprendeva la verifica della convenienza economica dell’adeguamento funzionale (costo complessivo di € 515.309,03) rispetto a una soluzione alternativa che prevedeva la realizzazione di una struttura prefabbricata temporanea, in base all’art.2 dell’OCDPC n.408/2016 (costo complessivo di € 749.845,18);
-	In data 09/02/2018 la Regione Marche ha preso atto che l’intervento di adeguamento funzionale dell’edificio esistente è certamente inferiore all’acquisto dei moduli, determinando anche un risparmio del consumo di suolo, con salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Inoltre ha espresso parere favorevole al progetto presentato a condizione che interventi di adeguamento impiantistico e di finitura interna siano limitati esclusivamente alla sala polifunzionale già esistente.;
-	In data 04/04/2018, con D.G.M. n. 67 è stato approvato il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall’Ing. Carmine Calafiore per il Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e per gli aspetti impiantistici, che prevede un importo totale di € 432.434,27, di cui € 199.218,44 per lavori ed € 233.215,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 123 del 19.04.2018, rettificata con Determinazione del Settore Tecnico n. 131 del 02.05.2018, è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE"  ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 140 del 11.05.2018 si è preso atto delle risultanze dell’indagine di mercato, approvando il verbale di sorteggio pubblico, sulla base del quale sono state sorteggiate n. 20 (venti) ditte, e lo schema di lettera di invito con i relativi allegati;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 156 del 31/05/2018 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa ELETTROCUPRA S.R.L., con sede in 60034 Cupramontana (AN), Via Ponte Magno n.14, con un ribasso del 26,654% rispetto all’importo posto a base di gara, corrispondente ad € 51.378,88, per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 147.839,56, di cui € 6.456,09 per Oneri per la Sicurezza;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 171 del 08/06/2018 la somma di € 432.434,27 è stata impegnata al capitolo 2620/5 del Bilancio 2018;
-	I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, per ragioni di urgenza, in data 09/07/2018;

CONSIDERATO CHE:
-	per implementare la versatilità delle attività socio-culturali organizzabili, emerge la necessità di dotare la sala polifunzionale di idonei spazi di servizio riservati agli operatori, promotori di dette attività, da destinare a bagni, spogliatoi e depositi, in aggiunta a quelli già presenti riservati al pubblico;
-	per non diminuire la superficie per attività socio culturali dell’attuale sala polivalente detti locali di servizio possono essere posizionati nel contiguo locale ad uso deposito;

VISTA la D.G.M. n. 150 del 22/08/2018, con la quale è stato dato l’indirizzo di:
-	redigere una variante migliorativa al progetto esecutivo approvato con DGM n. 67/2018, prevedendo la realizzazione di idonei spazi di servizio per i promotori di attività socio-culturali da destinare a bagni, spogliatoi e depositi;
-	realizzare con fondi dell’Amministrazione l’ampliamento dell’attuale sala polifunzionale, mediante l’utilizzo dell’attigua sala deposito;
-	realizzare con fondi dell’Amministrazione una seconda sala polifunzionale di circa mq. 300 in una porzione del deposito comunale, lato blocco servizi;
-	destinare una porzione del deposito protezione civile al posizionamento di spazi per servizi (bagni, spogliatoi, depositi);

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto dell’Art. 106 d.Lgs. 50/2016 – c. 1 lett. b, c. 7 e c. 12;

CONSIDERATO CHE:
-	a seguito delle variazioni introdotte l’importo netto contrattuale passa da € 147.839,56 ad € 169.341,33, con un incremento pari a circa il 14,54 % (quattordici virgola cinquantaquattro %);
-	l’importo del progetto finanziato con fondi della Regione Marche passa da € 421.130,92 ad € 473.056,68, con un incremento di € 51.925,76;
-	i lavori finanziati con fondi comunali ammontano ad € 24.635,24, oltre somme a disposizione per € 34.555,16, così per un totale di € 59.190,40;
-	l’importo complessivo dell’intervento ammonta pertanto ad € 532.247,08;

VISTI gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante migliorativa;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante migliorativa;
•	Elenco prezzi unitari di perizia delle opere a carico del Comune;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante migliorativa;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;
•	Tav. 1: PLANIMETRIA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRACCIATO ESTERNO FOGNATURE;
•	Tav. 2: PIANTE STATO DI PROGETTO;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

PRESO ATTO CHE il Quadro Tecnico economico di Perizia di variante prevede:

 				 Regione 	 Comune 	
 a 	 IMPORTO LAVORI VARIANTE  	 €  228 192,50 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 €     40 008,59 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA	 €     58 824,87 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 €     16 387,29 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 €     36 124,23 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 €     16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 €     36 631,83 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 €     23 875,36 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI  	 	 €   228 192,50 	 	 	
 a.08 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €       7 395,72 	 	 	
 a.09 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €  220 796,78 	 	 	
 a.10 	 Ribasso offerto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	26,654%	 €     58 851,17 	 	 	
 	 Importo netto contratto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	 	 €  169 341,33 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €       4 563,85 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €          250,68 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €     19 532,75 	 	 	
 b.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 	 €       7 591,56 	 	 	
 b.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €       5 967,35 	 	 	
 b.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €     37 255,09 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti   IVA compresa 	 €     25 970,82 	 	 	
 b.08 	 Fornitura materiale elettrico    IVA compresa 	 €     40 872,33 	 	 	
 b.09 	 Fornitura unità esterna trattamento aria   IVA compresa 	 €     47 698,34 	 	 	
 b.10 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 €     27 590,48 	 	 	
 b.11 	 Fornitura porte e sanitari locali a servizio sala polifunzionale  IVA compresa 	 €       3 029,98 	 	 	
 b.12 	 Imprevisti 5%    IVA compresa 	 €     11 409,63 	 	 	
 b.13 	 Ribasso d'asta 	 €    58 851,17 	 	 	
 b.14 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       6 752,16 	 	 	
 b.15 	 Realizzazione fognatura locali a servizio sala polifunzionale 	 €       5 228,82 	 	 	
 b.16 	 IVA realizzaz. fognatura locali a servizio sala  polifunzionale 	 €       1 150,34 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 €  303 715,35 	 	
				 	 	
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE   (FINANZIATO DALLA REGIONE) 	 €  473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 €       1 282,52 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 €       2 520,30 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 €     16 655,11 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 €       4 177,31 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €          798,43 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 €    23 836,81 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto  	0,000%	 €                    -   	 	 	
 	 Importo netto contratto   	 €     24 635,24 	 	 € 24 635,24 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €          492,70 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €            27,06 	 	 	
 d.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €       2 415,41 	 	 	
 d.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 €          938,77 	 	 	
 d.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €          737,92 	 	 	
 d.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €       5 419,75 	 	 	
 d.07 	 Fornitura porte e sanitari WC protezione civile  (IVA compresa) 	 €       1 422,03 	 	 	
 d.08 	 Opere edili pareti interne  (IVA compresa) 	 €     16 567,39 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5%    (IVA compresa) 	 €       1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Ribasso d'asta 	 €                    -   	 	 	
 d.11 	 Allaccio impianto idrico alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       5 302,36 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 34 555,16 	
				 	 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 59 190,40 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
                                   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	 €  473 056,68 	 €  59 190,40 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	           €   532 247,08 	

VISTI il verbale di verifica ed il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in: 
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante migliorativa;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante migliorativa;
•	Elenco prezzi unitari di perizia delle opere a carico del Comune;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante migliorativa;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;
•	Tav. 1: PLANIMETRIA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRACCIATO ESTERNO FOGNATURE;
•	Tav. 2: PIANTE STATO DI PROGETTO;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:

 				 Regione 	 Comune 	
 a 	 IMPORTO LAVORI VARIANTE  	 €  228 192,50 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 €     40 008,59 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA	 €     58 824,87 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 €     16 387,29 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 €     36 124,23 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 €     16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 €     36 631,83 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 €     23 875,36 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI  	 	 €   228 192,50 	 	 	
 a.08 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €       7 395,72 	 	 	
 a.09 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €  220 796,78 	 	 	
 a.10 	 Ribasso offerto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	26,654%	 €     58 851,17 	 	 	
 	 Importo netto contratto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	 	 €  169 341,33 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €       4 563,85 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €          250,68 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €     19 532,75 	 	 	
 b.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 	 €       7 591,56 	 	 	
 b.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €       5 967,35 	 	 	
 b.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €     37 255,09 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti   IVA compresa 	 €     25 970,82 	 	 	
 b.08 	 Fornitura materiale elettrico    IVA compresa 	 €     40 872,33 	 	 	
 b.09 	 Fornitura unità esterna trattamento aria   IVA compresa 	 €     47 698,34 	 	 	
 b.10 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 €     27 590,48 	 	 	
 b.11 	 Fornitura porte e sanitari locali a servizio sala polifunzionale  IVA compresa 	 €       3 029,98 	 	 	
 b.12 	 Imprevisti 5%    IVA compresa 	 €     11 409,63 	 	 	
 b.13 	 Ribasso d'asta 	 €    58 851,17 	 	 	
 b.14 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       6 752,16 	 	 	
 b.15 	 Realizzazione fognatura locali a servizio sala polifunzionale 	 €       5 228,82 	 	 	
 b.16 	 IVA realizzaz. fognatura locali a servizio sala  polifunzionale 	 €       1 150,34 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 €  303 715,35 	 	
				 	 	
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE   (FINANZIATO DALLA REGIONE) 	 €  473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 €       1 282,52 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 €       2 520,30 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 €     16 655,11 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 €       4 177,31 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €          798,43 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 €    23 836,81 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto  	0,000%	 €                    -   	 	 	
 	 Importo netto contratto   	 €     24 635,24 	 	 € 24 635,24 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €          492,70 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €            27,06 	 	 	
 d.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €       2 415,41 	 	 	
 d.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 €          938,77 	 	 	
 d.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €          737,92 	 	 	
 d.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €       5 419,75 	 	 	
 d.07 	 Fornitura porte e sanitari WC protezione civile  (IVA compresa) 	 €       1 422,03 	 	 	
 d.08 	 Opere edili pareti interne  (IVA compresa) 	 €     16 567,39 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5%    (IVA compresa) 	 €       1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Ribasso d'asta 	 €                    -   	 	 	
 d.11 	 Allaccio impianto idrico alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       5 302,36 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 34 555,16 	
				 	 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 59 190,40 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
                                   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	 €  473 056,68 	 €  59 190,40 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	           €   532 247,08 	

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

5) Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

6) Di demandare al Responsabile dei Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 31/08/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 04/04/2018

                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                         Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in: 
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante migliorativa;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante migliorativa;
•	Elenco prezzi unitari di perizia delle opere a carico del Comune;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante migliorativa;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;
•	Tav. 1: PLANIMETRIA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRACCIATO ESTERNO FOGNATURE;
•	Tav. 2: PIANTE STATO DI PROGETTO;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:
 				 Regione 	 Comune 	
 a 	 IMPORTO LAVORI VARIANTE  	 €  228 192,50 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 €     40 008,59 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA	 €     58 824,87 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 €     16 387,29 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 €     36 124,23 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 €     16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 €     36 631,83 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 €     23 875,36 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI  	 	 €   228 192,50 	 	 	
 a.08 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €       7 395,72 	 	 	
 a.09 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €  220 796,78 	 	 	
 a.10 	 Ribasso offerto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	26,654%	 €     58 851,17 	 	 	
 	 Importo netto contratto  ELETTROCUPRA S.r.l.  	 	 €  169 341,33 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €       4 563,85 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €          250,68 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €     19 532,75 	 	 	
 b.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 	 €       7 591,56 	 	 	
 b.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €       5 967,35 	 	 	
 b.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €     37 255,09 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti   IVA compresa 	 €     25 970,82 	 	 	
 b.08 	 Fornitura materiale elettrico    IVA compresa 	 €     40 872,33 	 	 	
 b.09 	 Fornitura unità esterna trattamento aria   IVA compresa 	 €     47 698,34 	 	 	
 b.10 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 €     27 590,48 	 	 	
 b.11 	 Fornitura porte e sanitari locali a servizio sala polifunzionale  IVA compresa 	 €       3 029,98 	 	 	
 b.12 	 Imprevisti 5%    IVA compresa 	 €     11 409,63 	 	 	
 b.13 	 Ribasso d'asta 	 €    58 851,17 	 	 	
 b.14 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       6 752,16 	 	 	
 b.15 	 Realizzazione fognatura locali a servizio sala polifunzionale 	 €       5 228,82 	 	 	
 b.16 	 IVA realizzaz. fognatura locali a servizio sala  polifunzionale 	 €       1 150,34 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 €  303 715,35 	 	
				 	 	
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE   (FINANZIATO DALLA REGIONE) 	 €  473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 €       1 282,52 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 €       2 520,30 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 €     16 655,11 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 €       4 177,31 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 €     24 635,24 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 €          798,43 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 €    23 836,81 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto  	0,000%	 €                    -   	 	 	
 	 Importo netto contratto   	 €     24 635,24 	 	 € 24 635,24 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 €          492,70 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €            27,06 	 	 	
 d.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 €       2 415,41 	 	 	
 d.04 	 Coordinamento sicurezza in cantiere + CNPAIA 4% 	 €          938,77 	 	 	
 d.05 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 €          737,92 	 	 	
 d.06 	 IVA sui lavori 	22,00%	 €       5 419,75 	 	 	
 d.07 	 Fornitura porte e sanitari WC protezione civile  (IVA compresa) 	 €       1 422,03 	 	 	
 d.08 	 Opere edili pareti interne  (IVA compresa) 	 €     16 567,39 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5%    (IVA compresa) 	 €       1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Ribasso d'asta 	 €                    -   	 	 	
 d.11 	 Allaccio impianto idrico alla rete idrica  (IVA compresa) 	 €       5 302,36 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 34 555,16 	
				 	 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 59 190,40 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
                                   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	 €  473 056,68 	 €  59 190,40 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	           €   532 247,08 	

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

5) Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

6) Di demandare al Responsabile dei Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 11-09-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  11-09-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11-09-18 al 26-09-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO