COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  130 DEL  02-08-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

MESSA  IN  SICUREZZA  EDIFICI  PERICOLANTI SU VIA
PUBBLICA  IN VIA POTENZA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI 
SISMICI  DEL  26.10.2016  E SUCCESSIVI -  ESAME ED
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese
di agosto alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	A seguito degli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi, la gran parte degli edifici prospicienti via Potenza ha subìto forti lesioni, che hanno comportato inizialmente la completa chiusura della intera strada;
•	Successivamente, in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco, la parte sud della via, all’incrocio con viale Piave, è stata riaperta al solo traffico pedonale;
•	Per consentire la completa riapertura al transito pedonale di via Potenza, è necessario mettere in sicurezza ulteriori tre edifici, come da verbale GTS del 21/03/2017;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA IN VIA POTENZA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", che prevede un importo totale di Euro 28.130,96, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		               22.661,16 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 	                    679,83 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		              21.981,33 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 a 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                    453,22 	
 a.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      31,12 	
 	 	 	 		 	
 b 	 IVA 		 	
 b.01 	 su lavori 	 	22%		                 4.985,46 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		                 5.469,80 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				               28.130,96 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 194 del 28/06/2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta EDILFLASH S.R.L.S., con sede in MACERATA (MC), via Bramante 10 – C.I.G. Z801EDF824, con un ribasso percentuale del 22,080%, così per l’importo di contratto pari a € 17.807,68.

VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera, consistenti nella realizzazione di sbadacchiature aggiuntive in legno in corrispondenza di aperture su prospetti laterali di due fabbricati, di posa in opera, di spezzoni lignei di tenuta, ancorati a terra con barre in acciaio, alla base dei ritti verticali in legno sulle facciate, rendendosi pertanto necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le relative risorse per eseguire maggiori e diversi lavori.

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in aumento per un importo complessivo dei lavori pari a € 25.772,73, comprensivo di € 11.313,10 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 3.192,69, risulta pari ad € 22.580,04, rimanendo comunque invariato l’importo della perizia rispetto a quello originario, pari a € 28.130,96;

VISTA la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 28.130,96, come appresso distinto:

A	 LAVORI 				
a	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 	                     25 772,73 	
a.01	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  	 	                     10 865,90 	
a.02	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 	                     14 906,83 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	 a.01 + a.02 x  	3,0000%	                     11 313,10 	
	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	                     14 459,63 	
	 	 	 	 	
	 ribasso offerto ditta EDILFLASH S.R.L.U. 	22,080%	                       3 192,69 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	                     11 313,10 	
	 Importo netto contratto ditta EDILFLASH S.R.L.U. - CIG Z801EDF824 	                     22 580,04 	
					
B	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
b	 Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 	 	 	                          515,45 	
b.01	 IRAP su incentivi art. 92 	 	 	                            35,41 	
					
c	 i.v.a. 	 	
c.01	 IVA su lavori 	 	22%	                       4 967,61 	
	 	 	 		
d	 Lavori in economia: 	 	 	 	
d.02	 Economie da ribasso, inclusa IVA 	                            32,44 	
	 				
	 	 Totale somme a disposizione 	                       5 550,91 	
				 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   	                     28 130,96 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 28.130,96, come appresso distinto:
A	 LAVORI 				
a	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 	                     25 772,73 	
a.01	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  	 	                     10 865,90 	
a.02	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 	                     14 906,83 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	 a.01 + a.02 x  	3,0000%	                     11 313,10 	
	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	                     14 459,63 	
	 	 	 	 	
	 ribasso offerto ditta EDILFLASH S.R.L.U. 	22,080%	                       3 192,69 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	                     11 313,10 	
	 Importo netto contratto ditta EDILFLASH S.R.L.U. - CIG Z801EDF824 	                     22 580,04 	
					
B	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
b	 Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 	 	 	                          515,45 	
b.01	 IRAP su incentivi art. 92 	 	 	                            35,41 	
					
c	 i.v.a. 	 	
c.01	 IVA su lavori 	 	22%	                       4 967,61 	
	 	 	 		
d	 Lavori in economia: 	 	 	 	
d.02	 Economie da ribasso, inclusa IVA 	                            32,44 	
	 				
	 	 Totale somme a disposizione 	                       5 550,91 	
				 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   	                     28 130,96 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 03/08/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 03/08/2017 
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                        Dr.ssa Paola Cingolani

 LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica, dal Responsabile del servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 28.130,96, come appresso distinto:
A	 LAVORI 				
a	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 	                     25 772,73 	
a.01	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  	 	                     10 865,90 	
a.02	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 	                     14 906,83 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	 a.01 + a.02 x  	3,0000%	                     11 313,10 	
	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	                     14 459,63 	
	 	 	 	 	
	 ribasso offerto ditta EDILFLASH S.R.L.U. 	22,080%	                       3 192,69 	
a.03	 Sicurezza inclusa (SI) 	                     11 313,10 	
	 Importo netto contratto ditta EDILFLASH S.R.L.U. - CIG Z801EDF824 	                     22 580,04 	
					
B	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
b	 Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 	 	 	                          515,45 	
b.01	 IRAP su incentivi art. 92 	 	 	                            35,41 	
					
c	 i.v.a. 	 	
c.01	 IVA su lavori 	 	22%	                       4 967,61 	
	 	 	 		
d	 Lavori in economia: 	 	 	 	
d.02	 Economie da ribasso, inclusa IVA 	                            32,44 	
	 				
	 	 Totale somme a disposizione 	                       5 550,91 	
				 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   	                     28 130,96 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 17-08-17                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  17-08-17             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17-08-17 al 01-09-17 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO