COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  119 DEL  19-07-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  E  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI VARIANTE OPERE
DI  "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DAN= 
NEGGIATO   A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  SISMICI  DEL
26.10.2016 E SUCCESSIVI"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese
di luglio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	A seguito degli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi, il Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica ha subìto forti lesioni, che ne hanno compromesso la stabilità, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, tanto da rendere necessaria l’interdizione al transito pedonale e veicolare delle zone antistanti, che sono state immediatamente delimitate con transennamento;
•	Dalle valutazioni condotte dall’Ufficio Tecnico Comunale, è emersa la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza, in quanto il livello di danno strutturale dell’immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità e la riattivazione dei servizi essenziali;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 01/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo totale di € 44.100,34, come appresso distinto:

 A 	 LAVORI 				
	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 	               35 525,45 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	3,00%		                 1 065,76 	
	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		              34 459,69 	
					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 a 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%		                    710,51 	
 a.01 	 IRAP su incentivi art. 113 			                      48,78 	
					
 b 	 IVA su lavori 	22%		                 7 815,60 	
					
	 Totale somme a disposizione 			                 8 574,89 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	               44 100,34 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 113 del 21/04/2017, R.G. 239 sono stati affidati i lavori all'Impresa SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. – Via Po, 52 – MACERATA (MC), per un importo totale di € 35.525,45, di cui € 1.065,76 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 33,75%.
VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate a garantire una maggiore sicurezza del fabbricato e delle zone adiacenti ad esso.
VISTO l’Ordine di Servizio n. 1 del 12/05/2017, con il quale è stata chiesta all’Impresa la urgente realizzazione di una mantovana di protezione in acciaio e tavolato sul prospetto verso Piazza della Repubblica e su via della Croce allo scopo di proteggere ulteriormente gli spazi antistanti dall’eventuale caduta di frammenti dalle facciate.
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo complessivo di € 41.653,33, comprensivo di € 865,94 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 9.449,55, risulta pari ad  € 32.203,78.
CONSIDERATO che, a seguito dell’Ordine di Servizio n. 1 del 12/05/2017, le somme a disposizione dell’Amministrazione vengono portate a € 17.940,31, comprendendo così l’importo di  € 9.965,21 per i lavori complementari di cui al citato Ordine di Servizio, comprensivi di ribasso del 33,75% e delle relative somme a disposizione.
		
CONSIDERATO che l’importo della perizia è aumentato rispetto a quello originario e risulta ora pari a  € 50.144,09.

VISTA la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 50.144,09, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		           41 653,33 	
 a.02 	 di cui:   NON SOGGETTI A RIBASSO 		           12 788,74 	
 a.03 	               SOGGETTI A RIBASSO 		           28 864,59 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                865,94 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		           27 998,65 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL 	 	33,75% di a.05		             9 449,55 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - CIG ZE21E2F441  (a.01-a.06) 		           32 203,78 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                833,07 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                  57,20 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		             7 084,83 	
 					 	
 c 	 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI COMPLEMENTARI COME DA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 (ribassati del 33,75% e comprensivi delle relative somme a disposizione) 		             9 965,21 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		           17 940,31 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				           50 144,09 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 50.144,09, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		           41 653,33 	
 a.02 	 di cui:   NON SOGGETTI A RIBASSO 		           12 788,74 	
 a.03 	               SOGGETTI A RIBASSO 		           28 864,59 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                865,94 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		           27 998,65 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL 	 	33,75% di a.05		             9 449,55 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - CIG ZE21E2F441  (a.01-a.06) 		           32 203,78 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                833,07 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                  57,20 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		             7 084,83 	
 					 	
 c 	 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI COMPLEMENTARI COME DA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 (ribassati del 33,75% e comprensivi delle relative somme a disposizione) 		             9 965,21 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		           17 940,31 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				           50 144,09 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 15/07/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 15/07/2017 
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                        Dr.ssa Paola Cingolani

 LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica, dal Responsabile del servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 49.989,48, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            45 309,01 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            16 637,45 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            28 671,56 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	                 860,15 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           27 811,41 	
 						
 	 ribasso offerto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL 	 	27,998%		              7 786,64 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                 860,15 	
 	 Importo netto contratto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL - CIG Z601E74F4E 		           37 522,37 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                 906,18 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   62,22 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 	 		              1 992,20 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		              8 254,92 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                 438,28 	
 					 	
 d 	 Economie di gara (residuo ribasso d'asta e relative imposte) 		                 813,30 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		            12 467,11 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				            49 989,48 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 25-07-17                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  25-07-17             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-07-17 al 09-08-17 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO