COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 811

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 403    DEL 15-11-17

======================================================================
OGGETTO: OPERE  DI "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUB=
BLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO"  AFFIDAMENTO OPE= 
RE  COMPLEMENTARI  ALLA DITTA BOLDRINI COSTRUZIONI
L.A.F. SRL
======================================================================

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese
di  novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
PREMESSO che:
-	La scalinata di Via del Sottopassaggio versava in precarie condizioni e presentava cedimenti e lesioni attribuibili alle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, si è reso necessario provvedere con la massima urgenza al suo ripristino e contestuale adeguamento alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dei servizi essenziali;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 15/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", che prevede un importo totale di Euro 26.761,74, di cui € 21.047,13 per lavori ed € 5.714,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 65 del 09/03/2017, R.G. 145, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all'Impresa BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. – Corso Italia 106 – Castelraimondo (MC), per un importo contrattuale di € 17.625,50, di cui € 631,41 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 16,750%;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 08/11/2017 è stata approvata la perizia di variante dei lavori citati per un importo totale di € 30.331,78, con un aumento di € 3.570,04 dell’importo totale dell’opera;
-	In aggiunta ai lavori già previsti dal progetto esecutivo, si è evidenziata la necessità di prevedere opere accessorie di completamento a quelle già realizzate, finalizzate al buon funzionamento e a un migliore utilizzo del manufatto;

VISTA la già citata Deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 08/11/2017 di esame ed approvazione della perizia di variante delle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", che prevede un importo totale di € 30.401,72, di cui € 20.310,52 per lavori, al netto del ribasso pari al 16,750% offerto dall'Impresa BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. – Corso Italia 106 – Castelraimondo (MC), ed € 10.091,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, all’interno delle quali sono previsti € 4.538,65 per lavori complementari, comprensivi del medesimo ribasso e delle relative somme a disposizione;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al Cap. 2901-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

VISTO il DURC prot. n. INPS_9249004, con scadenza validità al 21.02.2018, dal quale si evince la regolarità della Ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. – Corso Italia 106 – Castelraimondo (MC);

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il C.I.G. n. Z8A20C4A44 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”.

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento dei lavori in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto la fattispecie rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 16 del 03/04/2008, in quanto trattasi di lavori inferiori a quarantamila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di impegnare l’ulteriore somma di € 3.570,04, quale maggiore impegno di spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori, al Cap. 2901-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”.

3) Di affidare opere complementari ai lavori di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO all'Impresa BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. – Corso Italia 106 – Castelraimondo (MC), per l'importo di seguito indicato:
- Importo complessivo dell'appalto            Euro    4.284,97
- Oneri per la sicurezza 
  e lavori non soggetti a ribasso             Euro      128,55
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro    4.156,42
- Ribasso d'asta (16,750%)                    Euro      696,20
- Importo dei lavori a ragione di contratto
  al netto del ribasso del 16,750%            Euro    3.588,77

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 15-11-17     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 15-11-17      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 15-11-17      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-11-17
al 30-11-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 15-11-17           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO