COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 639

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 257    DEL 10-08-18

======================================================================
OGGETTO: ESAME  E  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI
LAVORI  DI  "MESSA  IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI 
NEL CENTRO STORICO DI CRISPIERO, DANNEGGIATI DAGLI
EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI"
======================================================================

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese
di  agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTO il progetto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI NEL CENTRO STORICO DI CRISPIERO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 115 in data 06/06/2018, per un importo totale di € 9.000,00, di cui € 6.562,51 per lavori, compresi € 3.459,76 per gli oneri di sicurezza, ed € 2.437,49 per somme a disposizione dell'Amm.ne Appaltante;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 204 del 28/06/2018 con la quale i lavori sono stati affidati all’Impresa EDILBIS  S.R.L.S. Corso Italia 121, CASTELRAIMONDO (MC) per un importo totale di contratto di € 6.351,52, di cui € 3.459,76 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 6,80 %, impegnando le necessarie somme Cap. 2901-0 RP2017 del Bilancio 2018, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

VISTO che in corso d’opera si è constatato:
- che la parte sommitale della facciata del fabbricato su via Busontoni necessitava di interventi più estesi, con aumento nella quantità del cuci-scuci e della voce dell’intonaco provvisorio;
- che l’intervento sulla copertura dell’abside della Chiesa di S. Maria ausiliatrice ha comportato un maggiore utilizzo della piattaforma e una maggiore superficie da riparare, non prevedibile in fase progettuale per l’impossibilità di verificare preventivamente le porzioni oggetto di intervento;
- che l’intervento per la copertura del Campanile si è rilevato meno oneroso rispetto alle previsioni.

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in aumento per un importo complessivo di € 7.523,91, comprensivo di € 3.420,32 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 279,04, risulta pari ad  € 7.244,87;

VISTA la perizia di assestamento delle opere di ““MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI NEL CENTRO STORICO DI CRISPIERO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo totale di Euro 9.000,00, di cui € 7.523,91 per lavori ed € 1.755,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
-	N. 1 Relazione Tecnica di assestamento;
-	N. 2 Computo metrico estimativo di assestamento;
-	N. 3 Quadro di raffronto progetto – assestamento;
-	N. 4 Quadro tecnico economico di assestamento;
-	N. 5 Raffronto Quadro tecnico economico progetto – assestamento.

PRESO ATTO che, la perizia di assestamento sopra citata non modifica l’importo totale di Euro 9.000,00 a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 23/05/2018 e che quindi essa non comporta aumenti di spesa;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al Cap. 2901-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

VISTO che i compensi per le attività tecnico-amministrative di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 trovano copertura nelle somme a disposizione previste nel progetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di approvare la perizia di assestamento delle opere di ““MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI NEL CENTRO STORICO DI CRISPIERO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo totale di Euro 9.000,00, di cui € 7.523,91 per lavori ed € 1.755,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante;
3) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 11-08-18     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 11-08-18      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 11-08-18      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-08-18
al 26-08-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 10-08-18           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO