COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  184 DEL  08-11-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE  O=
PERE  DI  "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUB= 
BLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  otto del mese
di novembre alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	A	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   3  Assenti n.   2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	La scalinata di Via del Sottopassaggio versava in precarie condizioni e presentava cedimenti e lesioni, almeno in parte attribuibili alle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, si è reso necessario provvedere con la massima urgenza al suo ripristino ed adeguamento alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989 n. 236;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 15/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", che prevede un importo totale di Euro 26.761,74, di cui € 21.047,13 per lavori ed € 5.714,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		             21.047,13 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 	                    631,41 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		              20.415,72 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 a 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                    420,94 	
 a.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      28,90 	
 a.02 	 Spese tecniche per rilievi topografici, C.P. 4% inclusi 		                    520,00 	
 	 	 	 		 	
 b 	 IVA 		 	
 b.01 	 su lavori 	 	22%		                 4.630,37 	
 b.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                    114,40 	
 					 	
			 Totale somme a disposizione 		                 5.714,61 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO		              26.761,74 	

-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 65 del 09/03/2017, sono stati affidati i lavori all'Impresa BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L., con sede in CASTELRAIMONDO (MC), C.so Italia, 106, per un importo totale di € 17.627,50, di cui € 631,41 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 16,75%.

VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto, adeguatamente descritte nella relazione illustrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata per motivi organizzativi, e finalizzate a garantire una maggiore sicurezza del manufatto e delle zone adiacenti ad esso.
VISTO altresì che si rendono necessarie ulteriori opere complementari, anch’esse adeguatamente descritte nella relazione illustrativa, finalizzate al buon funzionamento e a un migliore utilizzo del manufatto.
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo complessivo di € 24.250,64, comprensivo di € 727,52 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 3.940,12, risulta pari ad € 20,310,52.
CONSIDERATO che le somme a disposizione dell’Amministrazione vengono portate a € 10.091,20, comprendendo così l’importo di  € 4.538,65 per i lavori complementari di cui sopra, comprensivi di ribasso del 16,75% e delle relative somme a disposizione.
	
CONSIDERATO che l’importo della perizia è aumentato rispetto a quello originario e risulta ora pari a  € 30.401,72.

VISTA la perizia di variante delle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	computo metrico opere complementari;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico economico opere complementari;
•	quadro tecnico comparativo;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 30.401,72, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		               24 250,64 	
 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  		                              - 	
 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		               24 250,64 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,0000%		                    727,52 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		               23 523,12 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL  	16,750%		                 3 940,12 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                   727,52 	
 	 Importo netto contratto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL 
- CIG Z7E1D76B95 		              20 310,52 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 	 	 		                    420,94 	
 b.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      28,90 	
 b.02 	 Spese tecniche per rilievi topografici, C.P. 4% incl. 		                    520,00 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori 	 	22%		                 4 468,31 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche 	 	22%		                   114,40 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 	 	 	
 d.01 	 Imprevisti, inclusa IVA 		 	
 d.02 	 Economie da ribasso, inclusa IVA 		                               - 	
 d.03 	 LAVORI COMPLEMENTARI (ribassati del 16,75% e comprensivi delle relative somme a disposizione) 		                 4 538,65 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		               10 091,20 	
					 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   		               30 401,72 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante delle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	computo metrico opere complementari;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico economico opere complementari;
•	quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 30.401,72, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		               24 250,64 	
 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  		                              - 	
 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		               24 250,64 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,0000%		                    727,52 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		               23 523,12 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL  	16,750%		                 3 940,12 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                   727,52 	
 	 Importo netto contratto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL 
- CIG Z7E1D76B95 		              20 310,52 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 	 	 		                    420,94 	
 b.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      28,90 	
 b.02 	 Spese tecniche per rilievi topografici, C.P. 4% incl. 		                    520,00 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori 	 	22%		                 4 468,31 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche 	 	22%		                   114,40 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 	 	 	
 d.01 	 Imprevisti, inclusa IVA 		 	
 d.02 	 Economie da ribasso, inclusa IVA 		                                 - 	
 d.03 	 LAVORI COMPLEMENTARI  (ribassati del 16,75% e comprensivi delle relative somme a disposizione) 		                 4 538,65 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		               10 091,20 	
					 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   		               30 401,72 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Castelraimondo, li 03/11/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Castelraimondo, lì 03/11/2017 
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                        Dr.ssa Paola Cingolani

 LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica, dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante delle opere di "RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	computo metrico opere complementari;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico economico opere complementari;
•	quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 30.401,72, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		               24 250,64 	
 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  		                              - 	
 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		               24 250,64 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,0000%		                    727,52 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		               23 523,12 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL  	16,750%		                 3 940,12 	
 a 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                   727,52 	
 	 Importo netto contratto ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. SRL 
- CIG Z7E1D76B95 		              20 310,52 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 	 	 		                    420,94 	
 b.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      28,90 	
 b.02 	 Spese tecniche per rilievi topografici, C.P. 4% incl. 		                    520,00 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori 	 	22%		                 4 468,31 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche 	 	22%		                   114,40 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 	 	 	
 d.01 	 Imprevisti, inclusa IVA 		 	
 d.02 	 Economie da ribasso, inclusa IVA 		                                 - 	
 d.03 	 LAVORI COMPLEMENTARI  (ribassati del 16,75% e comprensivi delle relative somme a disposizione) 		                 4 538,65 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		               10 091,20 	
					 	
		 IMPORTO COMPLESSIVO   		               30 401,72 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 13-11-17                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  13-11-17             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-11-17 al 28-11-17 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO