COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  164 DEL  09-10-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED APPROVAZIONE VERIFICA CONGRUITA' IMPORTO
RICHIESTO (C.I.R.) PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IM= 
PORTI  NECESSARI  PER  INTERVENTO  DI "RIPARAZIONE
DANNI  E  MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO  SISMICO DELLA
TRIBUNA  DEL  CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DANNEGGIATA

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese
di ottobre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	Gli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi hanno gravemente danneggiato la tribuna del campo sportivo comunale sito lungo la SP 256, con lesioni e dissesti di varia entità che hanno compromesso l’agibilità del fabbricato;
•	E’ stata effettuata una prima scheda Aedes in data 09/02/2017 con esito di parziale inagibilità (esito C);
•	A seguito della scheda Aedes l’ufficio tecnico ha chiesto all’USR finanziamenti per il ripristino della suddetta tribuna per un importo totale pari a € 63.344,00;
•	A seguito del rilevamento di nuove lesioni ai pilastri dell’edificio, è stato effettuato un nuovo sopralluogo Aedes in data 09/08/2017 da cui è stata determinata la completa inagibilità (esito E);
•	Gli interventi di ripristino della tribuna del campo sportivo comunale non sono ancora stati inseriti in un programma  degli interventi di ricostruzione, riparazione, e ripristino delle opere pubbliche che comprenda finanziamenti per il ripristino della tribuna in oggetto;
•	L’ufficio Tecnico, ha ritenuto opportuno redigere una verifica preliminare della Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) da inviare all’USR al fine di richiedere un finanziamento congruo agli importi necessari per il ripristino della tribuna.

VISTA la documentazione del C.I.R. redatta dall’Ufficio Tecnico e composta dai seguenti elaborati qui integralmente richiamati, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:

- Valutazione livello operativo
01 – Tavola rilievo geometrico e fessurativo
02 – Relazione fotografica
03 – Calcolo rigidezze
04 – Relazione fotografica sondaggi

- Relazione tecnica e C.I.R.
C.01 – Tavola calcolo superficie utile calpestabile

VISTO il Quadro Tecnico economico per interventi di “RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI” che prevedono un importo totale di € 750.784,06, come appresso distinto:

A 	 IMPORTO  RICAVATO DA COSTO PARAMETRICO (Ord 19 -61) 	           614 481,00 	
					
 a.01 	 IMPORTO LAVORI 	 	 	           558 619,09 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 b.01 	 Spese tecniche incluse nell'importo A (10% dell'importo lavori "a.01") 	 	10,00%	             55 861,91 	
 b.02 	 Spese tecniche per progettazione e D.L., sondaggi e prove sui materiali non incluse nel contributo "A" 	 	10,00%	             55 861,91 	
 	 IVA 	 	
 b.03 	 su lavori (Ca.01) 	 	10,00%	             55 861,91 	
 b.04 	 su spese tecniche incluse nell'importo da costo parametrico (b.01) 	 	22,00%	             12 289,62 	
 b.05 	 su spese tecniche escluse (b.02) 	 	22,00%	             12 289,62 	
			 Totale somme  "B" 	           192 164,97 	
 	 	 	 	 	
	 RIEPILOGO 				
 a.01 	 IMPORTO LAVORI 	 	 	           558 619,09 	
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 			           192 164,97 	
                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	           750 784,06 	

VISTO che il QTE complessivo risultante da tale proposta, pari a € 750.784,06 risulta maggiore di € 687.440,06 rispetto a quanto precedentemente richiesto  all’USR (QTE totale pari a € 63.344,00)

P R O P O N E

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2) Di approvare la valutazione C.I.R. per l’intervento di “RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, in cui si propone  la demolizione e ricostruzione della tribuna del campo sportivo comunale.
3) Di approvare il QTE complessivo risultante da tale proposta, pari a € 750.784,06, che risulta maggiore di € 687.440,06 rispetto a quanto precedentemente richiesto all’USR.
4) Di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Cesare Bigiaretti.
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica l'adozione di tutti gli atti susseguenti e la trasmissione del C.I.R. all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
6) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

Sotto la propria responsabilità:
•	parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
•	
Castelraimondo, 08.10.2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Cesare Bigiaretti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 08.10.2019

                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE   
                                          Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2) Di approvare la valutazione C.I.R. per l’intervento di “RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, in cui si propone  la demolizione e ricostruzione della tribuna del campo sportivo comunale.
3) Di approvare il QTE complessivo risultante da tale proposta, pari a € 750.784,06, che risulta maggiore di € 687.440,06 rispetto a quanto precedentemente richiesto all’USR.
4) Di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Cesare Bigiaretti.
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica l'adozione di tutti gli atti susseguenti e la trasmissione del C.I.R. all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
6) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 15-10-19                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  15-10-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-10-19 al 30-10-19 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO