COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  28 DEL  07-02-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZINE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVO=
RI  DI "RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLI= 
CHE  DANNEGGIATE  DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI NOV-
DIC 2013  STRADA COMUNALE CARSIGNANO"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese
di febbraio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	A	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   3  Assenti n.   2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	Il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della strada comunale di Carsignano, danneggiata dagli eventi alluvionali di novembre-dicembre 2013, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 in data 20/07/2016, per un importo totale di € 80.000, di cui € 59.911,90 per lavori, compresi € 1.163,04 per gli oneri di sicurezza, ed € 20.088,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne Appaltante.
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 167 del 12/06/2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa EDILBIANGI s.r.l., con sede in San Severino Marche (MC), Via Meucci n. 8/10, per un importo totale di € 43.690,16, di cui € 1.163,04 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 27,612%.
-	Successivamente, in data 30/08/2017 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto.
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 167/2017 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, al fine di reimpiegare le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta per tutte le ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell’intervento, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 c. 3 del disciplinare sottoscritto fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Castelraimondo. 

CONSIDERATO CHE:
-	Durante lo svolgimento dei lavori, consegnati in data 12/10/2017, si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera: stralcio della realizzazione delle gabbionate di contenimento nel tratto a monte dell’abitato di Carsignano; prolungamento di alcuni dei rami del drenaggio con scavo a una profondità inferiore a quella prevista; regolarizzazione del profilo della strada adiacente il tratto oggetto di intervento mediante la risagomatura dello strato superficiale in asfalto con utilizzo di conglomerato bituminoso di pezzatura più fine e tappetino di usura.
-	Si è reso necessario concordare con l’Impresa n. 4 nuovi prezzi, tutti desunti dal prezzario della Regione Marche in vigore al momento dell’offerta, concordati con il Direttore dei Lavori ed assoggettati al ribasso d’asta del 27,612%, puntualmente riportati nell’elenco nuovi prezzi di variante.
-	si è pertanto resa necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le risorse necessarie per eseguire maggiori e diversi lavori.

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE a seguito delle variazioni introdotte l’importo netto contrattuale passa da € 43.690,16 ad € 55.512,36 con un incremento pari a € 11.822,19;	

VISTI gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

PRESO ATTO CHE il Quadro Tecnico economico di Perizia di variante prevede:

A 	 LAVORI 					
 	 		 	
a.01	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		        76 123,56 	
a.02	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 		          1 477,75 	
a.03	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		       74 645,81 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta EDILBIANGI SRL 	27,612%		        20 611,20 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          1 477,75 	
 	 Importo netto contratto ditta EDILBIANGI SRL 		       55 512,36 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
b.01	 Contributo ANAC 		               30,00 	
b.02	 Economie da ribasso, compresa IVA 22%  	 		          6 917,83 	
b.03	 Progettazione e indagini geologiche 	 	 		          2 500,00 	
b.04	 C.I. su spese tecniche  	 	2%		               50,00 	
b.05	 Indagini geognostiche 	 	 		             500,00 	
						
b.06	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 	 	2%	 	          1 522,47 	
 b.07 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               83,63 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori e indagini geognostiche 	 	22%		        12 322,72 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche e c.i. 	 	22%		             561,00 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 		 	
 d.01 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento 		                       - 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		        24 487,65 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		        80 000,00 	

PROPONE

1)	Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2)	Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Q.T.E. raffronto progetto/variante;
•	Schema di atto di sottomissione;
	qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:

A 	 LAVORI 					
 	 		 	
a.01	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		        76 123,56 	
a.02	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 		          1 477,75 	
a.03	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		       74 645,81 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta EDILBIANGI SRL 	27,612%		        20 611,20 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          1 477,75 	
 	 Importo netto contratto ditta EDILBIANGI SRL 		       55 512,36 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
b.01	 Contributo ANAC 		               30,00 	
b.02	 Economie da ribasso, compresa IVA 22%  	 		          6 917,83 	
b.03	 Progettazione e indagini geologiche 	 	 		          2 500,00 	
b.04	 C.I. su spese tecniche  	 	2%		               50,00 	
b.05	 Indagini geognostiche 	 	 		             500,00 	
						
b.06	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 	 	2%	 	          1 522,47 	
 b.07 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               83,63 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori e indagini geognostiche 	 	22%		        12 322,72 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche e c.i. 	 	22%		             561,00 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 		 	
 d.01 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento 		                       - 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		        24 487,65 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		        80 000,00 	

	e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata;

4)Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

5)Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 01/02/2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Gian Mario Brancaleoni
                                   Responsabile Servizio Finanziario
E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Castelraimondo, lì 01.02.2018
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                        Dr.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1)	Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2)	Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Q.T.E. raffronto progetto/variante;
•	Schema di atto di sottomissione;
	qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:

A 	 LAVORI 					
 	 		 	
a.01	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		        76 123,56 	
a.02	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 		          1 477,75 	
a.03	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		       74 645,81 	
 	 	 	 		 	
 	 ribasso offerto ditta EDILBIANGI SRL 	27,612%		        20 611,20 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          1 477,75 	
 	 Importo netto contratto ditta EDILBIANGI SRL 		       55 512,36 	
						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
b.01	 Contributo ANAC 		               30,00 	
b.02	 Economie da ribasso, compresa IVA 22%  	 		          6 917,83 	
b.03	 Progettazione e indagini geologiche 	 	 		          2 500,00 	
b.04	 C.I. su spese tecniche  	 	2%		               50,00 	
b.05	 Indagini geognostiche 	 	 		             500,00 	
						
b.06	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 	 	2%	 	          1 522,47 	
 b.07 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               83,63 	
						
 c 	 i.v.a. 		 	
 c.01 	 IVA su lavori e indagini geognostiche 	 	22%		        12 322,72 	
 c.02 	 IVA su spese tecniche e c.i. 	 	22%		             561,00 	
 	 	 	 			
 d 	 Lavori in economia: 	 	 		 	
 d.01 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento 		                       - 	
	 					
	 	 Totale somme a disposizione 		        24 487,65 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		        80 000,00 	

	e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata;

4)Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

5)Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 09-02-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  09-02-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09-02-18 al 24-02-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO