COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  147 DEL  22-08-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO IN
AUMENTO  OPERE  DI  "DEMOLIZIONE  EDIFICIO SITO IN 
LOC.  CRISPIERO,  VIA  DEL COLLE N. 5, DANNEGGIATO
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese
di agosto alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	Il progetto dei lavori di “Demolizione edificio sito in loc. Crispiero, via del Colle n. 5, danneggiato dagli eventi sismici del 26/10/2016 e successivi” è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 09/05/2018, per un importo totale di € 6.356,31, di cui € 5.121,52 per lavori ed € 1.234,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante.
•	Con Determina del Settore Tecnico n. 149/2018 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa EDILBIANGI S.r.l., con sede in SAN SEVERINO MARCHE (MC), Via Meucci, n. 8/10, per un importo totale di € 4.624,73, oltre IVA 22% corrispondente ad € 1.017,44, così per un importo complessivo di € 5.642,17, con un ribasso offerto pari al 10,00% sull’importo lavori a base 

VISTO che nel corso dei lavori si è verificato il crollo di un tratto del versante oggetto dell’intervento, che ha interessato anche la porzione di muro a monte e pertanto è emersa la necessità di modificare la conformazione della scarpata e della vegetazione a monte al fine di ottenere una maggiore stabilità e garantire la pubblica incolumità.
VISTO l’Ordine di servizio n. 1, emesso in data 26/07/2018, con il quale la D.L. ha ordinato all’impresa di eseguire immediatamente le seguenti operazioni, finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera: posizionamento, alla base della scarpata e lungo tutto il tratto interessato, di blocchi in cls affiancati e disposti su due file sovrapposte; asportazione delle piante e demolizione del muro pericolante ad esse adiacente a monte della porzione crollata; riempimento della parte retrostante con materiale di risulta.
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in aumento per un importo complessivo di € 6.447,31, comprensivo di € 193,42 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 625,39, risulta pari ad  € 5.821,92.

VISTA la perizia finale di assestamento in aumento delle opere di “DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. CRISPIERO, VIA DEL COLLE N. 5, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ufficio Tecnico e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica perizia di assestamento,
•	computo metrico perizia di assestamento,
•	quadro comparativo progetto – perizia,
•	elenco prezzi perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico comparativo progetto – perizia.

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che ammonta a € 7.238,77, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OS23) 		 €           6 447,31 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €                      -   	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €           6 447,31 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	 €              193,42 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		 €          6 253,89 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. 	 	10,00% di a.05		 €              625,39 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. - CIG Z7523B1AC2  (a.01-a.06) 		 €          5 821,92 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		 €              128,95 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		 €                  7,08 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		 €           1 280,82 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		 €           1 416,85 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		 €           7 238,77 	

CONSIDERATO che il Quadro Tecnico Economico di perizia prevede un aumento di € 882,46 rispetto a quello già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 09/05/2018, pari a € 6.356,31, come si evince dal QTE di raffronto appresso distinto:

				 PROGETTO  	 AGGIUDICAZIONE 	 ASSESTAMENTO FINALE 	
							
 A 	 LAVORI 						
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OS23) 	 €             5 121,52 	 €             5 121,52 	 €             6 447,31 	
 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  	 €                        -   	 €                        -   	 €                        -   	
 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 	 €             5 121,52 	 €             5 121,52 	 €             6 447,31 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 €                153,65 	 €                153,65 	 €                193,42 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €            4 967,87 	 €            4 967,87 	 €            6 253,89 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 ribasso offerto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. 	10,00%	 €                        -   	 €                496,79 	 €                625,39 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 €                        -   	 €                153,65 	 €                193,42 	
 	 Importo netto contratto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. - CIG Z7523B1AC2 	 €                       -   	 €            4 624,73 	 €            5 821,92 	
							
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 						
 b 	 Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 	 €                102,43 	 €                102,43 	 €                128,95 	
 b.01 	 IRAP su incentivi art. 92 	 	 	 €                    5,63 	 €                    5,63 	 €                    7,08 	
							
 c 	 i.v.a. 	 	 	 	
 c.01 	 IVA su lavori 	 	22%	 €             1 126,73 	 €             1 017,44 	 €             1 280,82 	
 	 	 	 				
 d 	 Lavori in economia: 	 	 	 	 	 	
 d.01 	 Imprevisti, inclusa IVA 	 €                        -   	 €                           -   	 €                        -   	
 d.02 	 Economie da ribasso, inclusa IVA 	 €                        -   	 €                606,08 	 €                        -   	
 d.03 	 Economie maturate, inclusa IVA 	 €                        -   	 €                           -   	 €                        -   	
	 						
	 Totale somme a disposizione 	 €             1 234,79 	 €             1 731,58 	 €             1 416,85 	
				 	 	 	
	 IMPORTO COMPLESSIVO   	 €             6 356,31 	 €             6 356,31 	 €             7 238,77 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia finale di assestamento in aumento delle opere di “DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. CRISPIERO, VIA DEL COLLE N. 5, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica perizia di assestamento,
•	computo metrico perizia di assestamento,
•	quadro comparativo progetto – perizia,
•	elenco prezzi perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico comparativo progetto – perizia.

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che ammonta a € 7.238,77, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OS23) 		 €           6 447,31 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €                      -   	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €           6 447,31 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	 €              193,42 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		 €          6 253,89 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. 	 	10,00% di a.05		 €              625,39 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. - CIG Z7523B1AC2  (a.01-a.06) 		 €          5 821,92 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		 €              128,95 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		 €                  7,08 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		 €           1 280,82 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		 €           1 416,85 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		 €           7 238,77 	

4) Di dare atto che l'importo complessivo della perizia ammonta ad € 7.238,77, e che il maggiore importo di € 882,46 rispetto a quello già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 09/05/2018 trova copertura al cap. 2901-0 RP2017 del Bilancio 2018, avente ad oggetto "Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 52 del 02/01/2018.

6) Di demandare allo stesso responsabile l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 08/08/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 08/08/2018
                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                     Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia finale di assestamento in aumento delle opere di “DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. CRISPIERO, VIA DEL COLLE N. 5, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/10/2016 E SUCCESSIVI”, predisposta dall’Ufficio Tecnico e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica perizia di assestamento,
•	computo metrico perizia di assestamento,
•	quadro comparativo progetto – perizia,
•	elenco prezzi perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico perizia di assestamento,
•	quadro tecnico economico comparativo progetto – perizia.

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che ammonta a € 7.238,77, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OS23) 		 €           6 447,31 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €                      -   	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		 €           6 447,31 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	 €              193,42 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		 €          6 253,89 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. 	 	10,00% di a.05		 €              625,39 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  EDILBIANGI  S.r.l. - CIG Z7523B1AC2  (a.01-a.06) 		 €          5 821,92 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		 €              128,95 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		 €                  7,08 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		 €           1 280,82 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		 €           1 416,85 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		 €           7 238,77 	

4) Di dare atto che l'importo complessivo della perizia ammonta ad € 7.238,77, e che il maggiore importo di € 882,46 rispetto a quello già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 09/05/2018 trova copertura al cap. 2901-0 RP2017 del Bilancio 2018, avente ad oggetto "Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 52 del 02/01/2018.

6) Di demandare allo stesso responsabile l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 23-08-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  23-08-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-08-18 al 07-09-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO