COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  172 DEL  23-10-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DE=
GLI  EDIFICI  DEL COMPLESSO SPORTIVO "FEGGIANI" DI 
PROPRIETÀ  COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI (C.U.P.
F36J15000160004)  -  STRALCIO FUNZIONALE 3: TENNIS
COPERTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMO=

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese
di ottobre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	A	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 176 del 20.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al progetto di "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SPORTIVO “FEGGIANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI", che prevede un importo totale di Euro 227.000,00, come appresso distinto:
LAVORI 	 	 	 	
 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  	148.524,30	
 di cui: 	 	 	
 STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - BOCCIODROMO 	37.848,80	
 STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - PALAZZETTO 	65.476,40	
 STRALCIO FUNZIONALE N. 3 - TENNIS COPERTO 	45.199,10	
 Sicurezza inclusa (SI) 	3,00%	  4.455,73	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	144.068,57	
			
SOMME A DISPOSIZIONE 	78.475,70	
IMPORTO COMPLESSIVO 	227.000,00	

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 286 del 21.09.2018 i lavori di “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SPORTIVO “FEGGIANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI” - STRALCIO FUNZIONALE 3 – TENNIS COPERTO” sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta DORICA LEGNAMI CASTELLANI S.R.L., con sede in Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 7, per gli importi di seguito indicati:
- Importo complessivo appalto                 Euro 55.142,18
- Oneri per la sicurezza                      Euro  1.654,27
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro 53.487,91
- Ribasso d'asta (17,715%)                    Euro  9.475,38
- Importo dei lavori di contratto
	 al netto del ribasso del 17,715%           Euro 45.666,80

VISTO che, in corso d’opera, è emersa la necessità di effettuare  modifiche al progetto originario, adeguatamente descritte nella relazione tecnica di variante citata in seguito, finalizzate al buon funzionamento, a un migliore utilizzo del manufatto e all’ottimizzazione delle fasi esecutive, quali:
•	ripristino delle porzioni di base degli archi adiacenti ai due ingressi, interessati da gravi marcescenze che ne minavano la stabilità strutturale;
•	semplificazione delle fasi di realizzazione delle fondazioni esterne al manufatto, con getto in cls direttamente nello scavo, evitando casseri e rinterro, con risparmio di tempo;
•	demolizione, per motivi di ordine tecnico-funzionale, della struttura sporgente dagli archi di estremità con successiva ricostruzione dei tratti di canaline di scolo in cls. poste alla base delle porzioni estreme dei prospetti longitudinali.
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo di € 62.848,65, comprensivo di € 1.885,46 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 10.799,63, risulta pari ad € 52.049,02;
CONSIDERATO che, l’importo di contratto è pertanto aumentato di € 6.382,22 rispetto a quello originario e risulta ora pari a  € 52.049,02.

VISTA la perizia di variante dei “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SPORTIVO “FEGGIANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI” - STRALCIO FUNZIONALE 3 – TENNIS COPERTO”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

VISTA la necessità di effettuare altre opere complementari aggiuntive a quelle già presenti in progetto, con lo scopo di migliorare la funzionalità delle strutture oggetto di intervento e garantirne un utilizzo più sicuro, efficiente e conforme alle vigenti normative, per la quale è necessario provvedere ad una rimodulazione del quadro tecnico economico dell’intervento complessivo, impiegando le somme a disposizione ancora disponibili per lavori in economia. 

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia rimodulato, che prevede per l’intervento complessivo un importo totale di € 227.000,00, invariato rispetto a quello di progetto, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 			 VARIANTE 	
 	 	 	 		
 a.01 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - BOCCIODROMO 	 37 848,80 	
 			 	 	
 a.02 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - PALAZZETTO 	 65 476,40 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 1 964,29 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 63 512,11 	
	 ribasso offerto ditta  GABRIELE SRLS 	27,597%	 17 527,44 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 964,29 	
	 Importo netto contratto ditta GABRIELE SRLS - PALAZZETTO 	 47 948,96 	
	 DETRAZ. IMPORTO (ACCORDO BONARIO DEL 08/10/2019) - IVA compr.	-	6700,55 	
 	 	 	 	 	
 a.03 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 3 - TENNIS COPERTO 	 62 848,65 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 	 1 885,46 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 60 963,19 	
	 ribasso offerto ditta  DORICA LEGNAMI 	17,715%	 10 799,63 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 885,46 	
	 Importo netto contratto ditta DORICA LEGNAMI 	 52 049,02 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 b.01 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  	2,00%	 3 323,48 	
 b.02 	 IRAP su b.01 	 	 	 182,55 	
 b.03 	 Progetto e D.L. strutturali tennis coperto 	 7 020,43 	
 b.04 	 C.I. su spese tecniche 	 	4,00%	 280,82 	
 b.05 	 Contributo A.N.A.C. 	 	 	 60,00 	
 b.06 	 Contributo diritti di segreteria per espressione parere C.O.N.I.  	 150,00 	
 	 	 	 	 	
 b 	 IVA 	 	
 b.07 	 su lavori 	 	10,00%	 13 784,68 	
 b.08 	 su spese tecniche e C.I. 	 	22,00%	 1 606,27 	
 	 	 	 	 	
 c 	 Lavori in economia: 	 	 	 	
 c.01 	 Opere complementari, IVA  inclusa: 	 	 	
 	 - soletta in cls e tracciatura campo da gioco Bocciodromo  	 18 435,56 	
 	 - autogru e piattaforma aerea tennis coperto 	 2 403,40 	
 	 - asfaltatura spazio intorno al tennis coperto 	 	 13 278,55 	
 	 - tracciatura campo da gioco Palazzetto dello sport  	 4 886,95 	
 	 - tinteggiatura interna Palazzetto dello sport 	 	 13 205,89 	
 	 - righe calcetto e riempimento colorato Palazzetto dello sport  	 3 599,00 	
 	 - paletti in plastica e catenelle Palazzetto dello sport   	 175,68 	
 	 - adeguamento parapetti Palazzetto dello sport    	 7 557,00 	
 	 - rifacimento pavimentazione laterale esterna Palazzetto dello sport  	 5 720,00 	
 	 	 	 	 	
 c.02 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa 	183,51	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 	 95 853,76 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	 227 000,00 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SPORTIVO “FEGGIANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI” - STRALCIO FUNZIONALE 3 – TENNIS COPERTO”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia rimodulato, che prevede per l’intervento complessivo un importo totale di € 227.000,00, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 			 VARIANTE 	
 	 	 	 		
 a.01 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - BOCCIODROMO 	 37 848,80 	
 			 	 	
 a.02 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - PALAZZETTO 	 65 476,40 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 1 964,29 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 63 512,11 	
	 ribasso offerto ditta  GABRIELE SRLS 	27,597%	 17 527,44 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 964,29 	
	 Importo netto contratto ditta GABRIELE SRLS - PALAZZETTO 	 47 948,96 	
	 DETRAZ. IMPORTO (ACCORDO BONARIO DEL 08/10/2019) - IVA compr.	-	6700,55 	
 	 	 	 	 	
 a.03 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 3 - TENNIS COPERTO 	 62 848,65 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 	 1 885,46 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 60 963,19 	
	 ribasso offerto ditta  DORICA LEGNAMI 	17,715%	 10 799,63 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 885,46 	
	 Importo netto contratto ditta DORICA LEGNAMI 	 52 049,02 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 b.01 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  	2,00%	 3 323,48 	
 b.02 	 IRAP su b.01 	 	 	 182,55 	
 b.03 	 Progetto e D.L. strutturali tennis coperto 	 7 020,43 	
 b.04 	 C.I. su spese tecniche 	 	4,00%	 280,82 	
 b.05 	 Contributo A.N.A.C. 	 	 	 60,00 	
 b.06 	 Contributo diritti di segreteria per espressione parere C.O.N.I.  	 150,00 	
 	 	 	 	 	
 b 	 IVA 	 	
 b.07 	 su lavori 	 	10,00%	 13 784,68 	
 b.08 	 su spese tecniche e C.I. 	 	22,00%	 1 606,27 	
 	 	 	 	 	
 c 	 Lavori in economia: 	 	 	 	
 c.01 	 Opere complementari, IVA  inclusa: 	 	 	
 	 - soletta in cls e tracciatura campo da gioco Bocciodromo  	 18 435,56 	
 	 - autogru e piattaforma aerea tennis coperto 	 2 403,40 	
 	 - asfaltatura spazio intorno al tennis coperto 	 	 13 278,55 	
 	 - tracciatura campo da gioco Palazzetto dello sport  	 4 886,95 	
 	 - tinteggiatura interna Palazzetto dello sport 	 	 13 205,89 	
 	 - righe calcetto e riempimento colorato Palazzetto dello sport  	 3 599,00 	
 	 - paletti in plastica e catenelle Palazzetto dello sport   	 175,68 	
 	 - adeguamento parapetti Palazzetto dello sport    	 7 557,00 	
 	 - rifacimento pavimentazione laterale esterna Palazzetto dello sport  	 5 720,00 	
 	 	 	 	 	
 c.02 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa 	183,51 	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 	 95 853,76 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	 227 000,00 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Arch. Cesare Bigiaretti, responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto Decreto Sindacale n. 7169 del 05/06/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 17/10/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Arch. Cesare Bigiaretti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 17/10/2019

                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE   
                                    Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO SPORTIVO “FEGGIANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA A. GRAMSCI” - STRALCIO FUNZIONALE 3 – TENNIS COPERTO”, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia rimodulato, che prevede per l’intervento complessivo un importo totale di € 227.000,00, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 			 VARIANTE 	
 	 	 	 		
 a.01 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - BOCCIODROMO 	 37 848,80 	
 			 	 	
 a.02 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - PALAZZETTO 	 65 476,40 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 1 964,29 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 63 512,11 	
	 ribasso offerto ditta  GABRIELE SRLS 	27,597%	 17 527,44 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 964,29 	
	 Importo netto contratto ditta GABRIELE SRLS - PALAZZETTO 	 47 948,96 	
	 DETRAZ. IMPORTO (ACCORDO BONARIO DEL 08/10/2019) - IVA compr.	-	6700,55 	
 	 	 	 	 	
 a.03 	 STRALCIO FUNZIONALE N. 3 - TENNIS COPERTO 	 62 848,65 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 	 1 885,46 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 60 963,19 	
	 ribasso offerto ditta  DORICA LEGNAMI 	17,715%	 10 799,63 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 1 885,46 	
	 Importo netto contratto ditta DORICA LEGNAMI 	 52 049,02 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 b.01 	 Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  	2,00%	 3 323,48 	
 b.02 	 IRAP su b.01 	 	 	 182,55 	
 b.03 	 Progetto e D.L. strutturali tennis coperto 	 7 020,43 	
 b.04 	 C.I. su spese tecniche 	 	4,00%	 280,82 	
 b.05 	 Contributo A.N.A.C. 	 	 	 60,00 	
 b.06 	 Contributo diritti di segreteria per espressione parere C.O.N.I.  	 150,00 	
 	 	 	 	 	
 b 	 IVA 	 	
 b.07 	 su lavori 	 	10,00%	 13 784,68 	
 b.08 	 su spese tecniche e C.I. 	 	22,00%	 1 606,27 	
 	 	 	 	 	
 c 	 Lavori in economia: 	 	 	 	
 c.01 	 Opere complementari, IVA  inclusa: 	 	 	
 	 - soletta in cls e tracciatura campo da gioco Bocciodromo  	 18 435,56 	
 	 - autogru e piattaforma aerea tennis coperto 	 2 403,40 	
 	 - asfaltatura spazio intorno al tennis coperto 	 	 13 278,55 	
 	 - tracciatura campo da gioco Palazzetto dello sport  	 4 886,95 	
 	 - tinteggiatura interna Palazzetto dello sport 	 	 13 205,89 	
 	 - righe calcetto e riempimento colorato Palazzetto dello sport  	 3 599,00 	
 	 - paletti in plastica e catenelle Palazzetto dello sport   	 175,68 	
 	 - adeguamento parapetti Palazzetto dello sport    	 7 557,00 	
 	 - rifacimento pavimentazione laterale esterna Palazzetto dello sport  	 5 720,00 	
 	 	 	 	 	
 c.02 	 Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa 	183,51 	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 	 95 853,76 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	 227 000,00 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Arch. Cesare Bigiaretti, responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto Decreto Sindacale n. 7169 del 05/06/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 29-10-19                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  29-10-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-10-19 al 13-11-19 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO