COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 788

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 389    DEL 09-11-17

======================================================================
OGGETTO: OPERE  DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DEL CI=
MITERO  DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI 
EVENTI  SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - AF=
FIDAMENTO  OPERE  COMPLEMENTARI  AL CONSORZIO "RE=
======================================================================

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese
di  novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO che:
-	A seguito delle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, la chiesa del Cimitero del Capoluogo in Via Potenza ha subito forti lesioni, con parziale crollo del timpano di facciata, che hanno comportato la chiusura di una porzione del cimitero, prontamente delimitata con idoneo transennamento;
-	Sulla base delle valutazioni condotte dal GTS in sede di sopralluogo del 27/01/2017, è emersa la necessità di attuare un intervento di smontaggio controllato di alcune porzioni dell’edificio, in particolare del torrino e di alcune parti di muratura della facciata, allo scopo di prevenirne il collasso, anche se in area interdetta;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposto dall’Arch. Stefano Gelagna, per un importo totale di € 45.947,37;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 125 del 10/05/2017, R.G. 272, i lavori sono stati affidati al consorzio RESTAURI S.C.A.R.L. – P.zza E. Mattei, 7 – MATELICA (MC), per un importo totale di € 30.827,44, di cui € 999,85 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 10,504%;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 158 del 13/09/2017 è stata approvata la perizia di variante dei lavori citati per un importo totale di € 53.297,51;
-	In seguito a un sopralluogo effettuato all’interno della Chiesa, non effettuabile in precedenza per motivi di sicurezza, si sono potute riscontrare ulteriori criticità dovute al grado di danneggiamento presente e quindi si è evidenziata la necessità di prevedere opere accessorie di completamento a quelle già realizzate all’esterno del manufatto, finalizzate a mettere in sicurezza la Chiesa anche al suo interno;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 168 del 11/10/2017 di esame ed approvazione del progetto relativo alle "OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERNO DELLA CHIESA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO", che prevede un importo totale di Euro 27.163,95, di cui € 18.708,30 per lavori, al netto del ribasso pari al 10,504% offerto dal consorzio RESTAURI S.C.A.R.L. – P.zza E. Mattei, 7 – MATELICA (MC), ed € 8.455,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al Cap. 2902-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni culturali - eventi sismici del 2016”;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_9229850, con scadenza validità al 20.02.2018, dal quale si evince la regolarità della Ditta EUGENI PERICLE S.R.L., con sede in MATELICA (MC), Piazza E. Mattei n. 7;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_9311457, con scadenza validità al 27.02.2018, dal quale si evince la regolarità della Ditta GRIMALDI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in MATELICA (MC), Piazza E. Mattei n. 7;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il C.I.G. n. Z552086D65 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”.

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento dei lavori in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto la fattispecie rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 16 del 03/04/2008, in quanto trattasi di lavori inferiori a quarantamila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di impegnare la somma di € 27.163,95, necessaria per l’esecuzione dei lavori, al Cap. 2902-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni culturali - eventi sismici del 2016”.

3) Di affidare i lavori di "OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERNO DELLA CHIESA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO" al consorzio RESTAURI S.C.A.R.L., con sede a Matelica (MC) in Piazza E. Mattei n. 7, per l'importo di seguito indicato – C.I.G. Z552086D65:
- Importo complessivo dell'appalto            Euro   20.586,51
- Oneri per la sicurezza 
e lavori non soggetti a ribasso               Euro    2.705,63
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro   17.880,88
- Ribasso d'asta (10,504%)                    Euro    1.878,21
- Importo dei lavori a ragione di contratto
  al netto del ribasso del 10,504%            Euro   18.708,30

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 09-11-17     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-11-17      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 09-11-17      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-11-17
al 24-11-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-11-17           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO