COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 983

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 419    DEL 17-12-18

======================================================================
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMI=
NUZIONE  LAVORI  DI  "MESSA  IN SICUREZZA OPERA DI 
PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. CROCIFISSO COMUNE DI PIO=
RACO,   DANNEGGIATA   DAGLI   EVENTI  SISMICI  DEL
======================================================================

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese
di  dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO CHE:
•	A seguito degli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi, il locale dell’opera di captazione di Fonte Cannaro, situata nel Comune di Pioraco in Loc. Crocifisso (Foglio 7 Part. 34), lungo la strada 361 Settempedana, ha subìto forti lesioni nel locale che ospita le vasche di raccolta per l’acquedotto che serve il Comune di Castelraimondo. 
•	con deliberazione di Giunta Municipale n. 112 del 06/06/2018 è stato approvato il  progetto esecutivo delle opere di "MESSA IN SICUREZZA OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. CROCIFISSO, COMUNE DI PIORACO, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", il cui  Quadro Tecnico Economico prevede  un importo totale di Euro 39.792,08, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		      28 921,30 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		           670,82 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		      28 250,48 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	4,00%	 	        1 130,02 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		     27 120,46 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		           578,43 	
 b.01 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		             31,77 	
 	 	 	 		 	
 b.02 	 IVA 		 	
 b.03 	 su lavori 	 	22%		        6 362,69 	
 					 	
 c 	 Lavori in economia: 	 	 		 	
 c.01 	 Opere accessorie non quantificabili a misura, IVA 22% inclusa 		        3 897,90 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		      10 870,78 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		      39 792,08 	

•	Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 263 del 31/08/2018 i lavori in epigrafe sono stati affidati all'Impresa Stella Edo s.n.c. con sede in Fiuminata via Flaminia  n. 8 Partita IVA : 00101080430  per un importo totale di contratto di € 27.475,23, di cui € 670,82 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 5,00 %.

VISTO CHE:
•	in corso d’opera si è potuto constatare con più accuratezza che le particolari caratteristiche dell’ambiente in cui si operava non garantivano una corretta riuscita delle operazioni previste, sia per la loro complessità che per le caratteristiche dei materiali utilizzati. 
•	Pertanto, dopo accurate valutazioni, si è optato per una soluzione alternativa, di più semplice esecuzione e maggiore compatibilità con l’ambiente umido dei materiali utilizzati, che prevede la posa in opera di rete in fibre di vetro accoppiata con intonaco in malta fibrorinforzata, in combinazione con cuciture a secco intradossali. 
•	Inoltre, dopo attente valutazioni e accordi intercorsi con ASSEM S.p.a., gestore del S.I.I., si è evitata la realizzazione del by-pass previsto dal progetto originario, con un sensibile risparmio economico. 
•	L’Ufficio Tecnico Comunale, per migliorare l’opera e la sua funzionalità, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ha pertanto redatto apposita perizia di variante in diminuzione, la quale rientra nella tipologia del disposto dell’Art. 106 d.Lgs. 50/2016 – c. 1 lett. b, c. 7 e c. 12, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	analisi dei nuovi prezzi,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;
•	A fronte di tali modifiche le opere subiscono una variazione in diminuzione per un importo complessivo dei lavori pari a € 21.679,21, comprensivo di € 1.124,98 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 1.027,71, porta l’importo netto di contratto ad  € 20.651,50.
•	L’importo della perizia rimane invariato rispetto a quello originario e ammonta quindi a € 39.792,08. Il nuovo quadro economico di spesa è così ripartito:

A	LAVORI 					
				
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		21 679,21	
	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 		268,55	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 		21 410,66	
a	Sicurezza inclusa (SI) 		4,00%		856,43	
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		20 554,23	
						
	ribasso offerto ditta STELLA EDO S.N.C. 	5,00%		1 027,71	
a	Sicurezza inclusa (SI) 		856,43	
	Importo netto contratto ditta STELLA EDO S.N.C. - CIG Z6224C4AE2 		20 651,50	
						
B	SOMME A DISPOSIZIONE 					
b	Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 		433,58	
b.01	IRAP su incentivi art. 92 				23,82	
						
c	i.v.a. 			
c.01	IVA su lavori 		22%		4 543,33	
						
d.01	Economie maturate 		14 139,85	
						
	Totale somme a disposizione 		19 140,58	
						
	IMPORTO COMPLESSIVO 		39 792,08	

VISTO l’impegno di spesa assunto al cap. 2901-0 del Bilancio 2017, avente ad oggetto “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

DETERMINA

1)	Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2)	Di approvare la perizia di variante in diminuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. CROCIFISSO COMUNE DI PIORACO, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI” (CIG Z6224C4AE2) composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	analisi dei nuovi prezzi,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo.

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico, che prevede il medesimo importo totale di Euro 39.792,08, come appresso distinto:

A	LAVORI 					
				
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3) 		21 679,21	
	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 		268,55	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 		21 410,66	
a	Sicurezza inclusa (SI) 		4,00%		856,43	
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		20 554,23	
						
	ribasso offerto ditta STELLA EDO S.N.C. 	5,00%		1 027,71	
a	Sicurezza inclusa (SI) 		856,43	
	Importo netto contratto ditta STELLA EDO S.N.C. - CIG Z6224C4AE2 		20 651,50	
						
B	SOMME A DISPOSIZIONE 					
b	Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 		433,58	
b.01	IRAP su incentivi art. 92 				23,82	
						
c	i.v.a. 			
c.01	IVA su lavori 		22%		4 543,33	
						
d.01	Economie maturate 		14 139,85	
						
	Totale somme a disposizione 		19 140,58	

4) Di dare atto che la somma di Euro 39.792,08 è stata impegnata al cap. 2901-0 del Bilancio 2017, avente ad oggetto “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”.

5) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 17-12-18     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-12-18      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 17-12-18      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-12-18
al 01-01-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-12-18           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO