COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 161

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 79    DEL 06-03-19

======================================================================
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI
DI "REALIZZAZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN C.A. - 
TRAVERSA SETTEMPEDANA" (CUP F31B15000320004)

======================================================================

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese
di  marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO CHE:
•	con deliberazione di Giunta Municipale n. 210 del 05/12/2015 è stato approvato il  progetto esecutivo per l'intervento di “REALIZZAZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN C.A. - TRAVERSA SETTEMPEDANA”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, con lo scopo di ripristinare la fruibilità della strada comunale e per l’eliminazione del potenziale pericolo sulla corte privata sottostante, mediante la rimozione delle opere di contenimento esistenti realizzate con blocchi di cemento non armati e la successiva realizzazione di un muro in c.a. adeguatamente dimensionato
•	il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo sopra indicato prevedeva un importo totale di Euro 25.000,00, di cui € 19.627,37 per lavori, compresi € 447,08 per gli oneri di sicurezza, ed € 5.372,63 per somme a disposizione dell'Amm.ne Appaltante come appresso distinto:

Importo Lavori		€ 19.627,37	

Somme a disposizione			
I.V.A.	10%	€  1.962,37		
Spese tecniche e R.U.P. 2%	€    392,55		
I.R.A.P. su spese tecniche 8,5%	€     33,37		
Lavori in economia	€  2.983,98		
Totale somme a disposizione	€  5.372,63	€  5.372,63	

TOTALE GENERALE		
€ 25.000,00	

•	Con Determinazione del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino n. 9 del 17.12.2015, i lavori in epigrafe sono stati affidati all'Impresa BOTTICELLI MASSIMO – Via Pergolesi, n. 63 – CASTELRAIMONDO (MC), per un importo totale di € 16.462,62, di cui € 447,08 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 16,50%.

VISTO CHE:
•	in corso d’opera si sono avute variazioni delle quantità in alcune lavorazioni. 
•	L’Ufficio Tecnico Comunale, ha pertanto redatto apposita perizia di variante, la quale rientra nella tipologia del disposto dell’Art. 106 d.Lgs. 50/2016 – c. 1 lett. b, c. 7 e c. 12, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro comparativo,
•	quadro tecnico economico di variante,
•	quadro tecnico economico di raffronto;
•	A fronte di tali modifiche l’importo dei lavori aumenta fino a € 19.778,21 con un aumento pari a € 150,84; l’importo netto di contratto, al netto del ribasso di € 3.181,82, diventa di € 16.596,39, comprensivo di € 494,46 per oneri di sicurezza.
•	Per il maggiore importo per i lavori si utilizza parte delle somme destinate agli imprevisti; pertanto l’importo della perizia rimane invariato rispetto a quello originario e ammonta quindi a € 25.000,00. Il nuovo quadro economico di spesa è così ripartito:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            19 778,21 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		                           - 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            19 778,21 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	 	 	                 494,46 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           19 283,75 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta BOTTICELLI MASSIMO  	 	16,50% di a.05		              3 181,82 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  BOTTICELLI MASSIMO  - CIG ZB017766FB (a.01-a.06) 		           16 596,39 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113  D. Lgs. 50/2016 	 	2,00% di a.01		                 395,56 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113  D. Lgs. 50/2016 	 	 		                   21,73 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	10% di a.07		              1 659,64 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		              2 826,68 	
 b.06 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		              3 500,00 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              8 403,61 	
						
	IMPORTO COMPLESSIVO		            25 000,00 	

VISTO l’impegno di spesa assunto al cap. 2107 del Bilancio 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

DETERMINA

1.	Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2.	Di approvare la perizia di variante in diminuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN C.A. - TRAVERSA SETTEMPEDANA” (CUP F31B15000320004 - CIG ZB017766FB) composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro comparativo,
•	quadro tecnico economico di variante,
•	quadro tecnico economico di raffronto;
3.	Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico, che prevede il medesimo importo totale di Euro 39.792,08, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            19 778,21 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		                           - 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            19 778,21 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	 	 	                 494,46 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           19 283,75 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta BOTTICELLI MASSIMO  	 	16,50% di a.05		              3 181,82 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  BOTTICELLI MASSIMO  - CIG ZB017766FB (a.01-a.06) 		           16 596,39 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113  D. Lgs. 50/2016 	 	2,00% di a.01		                 395,56 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113  D. Lgs. 50/2016 	 	 		                   21,73 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	10% di a.07		              1 659,64 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		              2 826,68 	
 b.06 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		              3 500,00 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              8 403,61 	
						
	IMPORTO COMPLESSIVO		            25 000,00 	

4. Di dare atto che la somma di Euro 25.000,00 è stata impegnata al cap. 2107 del Bilancio 2015.

5. Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

Castelraimondo, li 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 11-03-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 11-03-19      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 11-03-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-03-19
al 26-03-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 06-03-19           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO