COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  11 DEL  20-01-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI
DI "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA  DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA -
COD. M.I.U.R. MCMM80201G - ISTITUTO COMPRENSIVO N.
STRAMPELLI"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese
di gennaio alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	Il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica dell'edificio adibito a scuola media presso l’Istituto comprensivo N. Strampelli di Castelraimondo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 21/10/2015, finanziato per € 243.466,05 con contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la restante parte con fondi propri, per un importo totale di € 399.775,41, di cui € 300.053,64 per lavori a base d'asta, compresi € 6.450,64 per gli oneri di sicurezza, ed € 99.721,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne Appaltante.
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 135 del 23/05/2016 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa MECELLA S.R.L., con sede in Matelica (MC), Via A. Merloni, n. 33, per un importo totale di € 277.014,61, di cui € 6.450,64 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 7,847%.
-	Successivamente, in data 15/07/2017 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto, classificato al n. 1621 di repertorio, registrato a Tolentino il 04/10/2017, numero 1920 ed approvato con Det. U. T. n. 364 del 19/10/2017.
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 144 del 01/06/2016 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, al fine di reimpiegare le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta per tutte le ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell’intervento, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 c. 3 del disciplinare sottoscritto fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Castelraimondo. 

CONSIDERATO CHE:
-	Durante lo svolgimento dei lavori, consegnati in data 04/07/2016, si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera: migliorìe all’impianto elettrico consistenti nella ripartizione delle accensioni delle aule e dei carichi elettrici con  rifacimento delle dorsali e inserimento di un nuovo quadro elettrico per la gestione delle accensioni, suddividendole per piani; piccole modifiche all’impianto termoidraulico dei servizi igienici (radiatori); estensione della tinteggiatura a tutte le aule anziché alle sole porzioni previste in progetto. 
-	Si è reso necessario concordare con l’Impresa n. 14 nuovi prezzi, tutti desunti dal prezzario della Regione Marche in vigore al momento dell’offerta, concordati con il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 163 del Regolamento Generale dei LL.PP. di cui al DPR n. 207/2010 ed assoggettati al ribasso d’asta del 7,847%, puntualmente riportati nell’elenco nuovi prezzi di variante;
-	Sono state inoltre previste somme per lavori da affidarsi in economia da parte dell’Amministrazione, relativamente alle seguenti opere complementari, tutte finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua complessiva funzionalità: opere inerenti l’impianto termico-sanitario, quali la verniciatura dei termosifoni smontati e successivamente rimontati, lo smontaggio e rimontaggio del vaso di espansione, la riapertura della fognatura dei servizi igienici per i professori; opere di tinteggiatura e trattamenti come la laccatura delle porte e l’applicazione di fissativo e colore in corrispondenza del camino sopra la mensa e della scala esterna di emergenza, per consentirne l’omogeneizzazione con il resto del cappotto esterno; modifiche all’impianto elettrico, consistenti nel posizionamento di nuova antenna, connessioni varie per il riposizionamento delle lampade di emergenza e sistemazione  di cavi esterni; opere edili relative al ripristino della funzionalità del pianerotto della scala di emergenza mediante posa di guaina antiscivolo al posto di quella esistente ammalorata.
-	si è pertanto resa necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le risorse necessarie per eseguire maggiori e diversi lavori.

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto del:
-	 D.Lgs. 163/2006 art. 132 comma  1 lettera b) “variante per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale”,
-	D.P.R. 207/2010 art. 132 comma 3) “… Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.” 
-	D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 6. “Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163”,
-	D.P.R. 207/2010  comma 12 “Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori”.

CONSIDERATO CHE:
a seguito delle variazioni introdotte l’importo netto contrattuale passa da € 277.014,61 ad € 284.834,00 con un incremento pari a circa il 2,82 % (due virgola ottantadue %);	

VISTI gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;
•	Tav. 01.1v2.E: Progetto Impianti – utenze elettriche;
•	Tav. 01.2v2.E: Progetto Impianti – dorsali elettriche;
•	Tav. 01.5.vE: Progetto Impianti – quadro elettrico piano terra;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

PRESO ATTO CHE il Quadro Tecnico economico di Perizia di variante prevede:

		IMPORTI TOTALI (Euro)	FINANZIAMENTO MIT (Euro)	FONDI PROPRI DELL’ENTE (Euro)	
a	Importo lavori di perizia al netto del ribasso del 7,847% offerto dalla ditta Mecella S.r.l.	284.834,00	173.465,90	111.368,10	
b	somme a disposizione dell’amministrazione (compresa IVA)				
	Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	6.170,47	3.757,86	2.412,61	
	IRAP su incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	338,93	206,41	132,52	
	Coordinamento sicurezza	13.141,25	8.003,11	5.138,14	
	Prog. e D.L. impianti e cert. Energetica	15.636,85	9.522,95	6.113,90	
	Contr. Integr. Su spese tecniche	1.151,12	701,04	450,08	
	IVA 10% su lavori	28.483,40	17.346,59	11.136,81	
	IVA 22% su spese tecniche e c.i.	6.584,43	4.009,96	2.574,47	
	Lavori in economia, IVA inclusa	-	-	-	
	Contributo ANAC	225,00	137,03	87,97	
	Fornitura corpi illuminanti	31.835,03	19.387,76	12.447,27	
	Imprevisti e lavori su fattura	11.076,51	6.745,67	4.330,84	
	Totale b) somme a disposizione	114.642,99	69.818,38	44.824,61	
1	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE (a+b)	399.476,99	243.284,28	156.192,71	
c	economie di gara (ribasso d’asta e relative imposte)	298,42	181,74	116,68	
2	TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)	399.775,41	243.466,06	156.309,39	

PROPONE

1)	Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2)Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Q.T.E. raffronto progetto/variante;
•	Schema di atto di sottomissione;
•	Tav. 01.1v2.E: Progetto Impianti – utenze elettriche;
•	Tav. 01.2v2.E: Progetto Impianti – dorsali elettriche;
•	Tav. 01.5.vE: Progetto Impianti – quadro elettrico piano terra;

	qui integralmente richiamati nei contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se, materialmente non allegati, per esigenze organizzative e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

3) di prendere atto  che il Quadro Tecnico economico prevede:

		IMPORTI TOTALI (Euro)	FINANZIAMENTO MIT (Euro)	FONDI PROPRI DELL’ENTE (Euro)	
a	Importo lavori di perizia al netto del ribasso del 7,847% offerto dalla ditta Mecella S.r.l.	284.834,00	173.465,90	111.368,10	
b	somme a disposizione dell’amministrazione (compresa IVA)				
	Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	6.170,47	3.757,86	2.412,61	
	IRAP su incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	338,93	206,41	132,52	
	Coordinamento sicurezza	13.141,25	8.003,11	5.138,14	
	Prog. e D.L. impianti e cert. Energetica	15.636,85	9.522,95	6.113,90	
	Contr. Integr. Su spese tecniche	1.151,12	701,04	450,08	
	IVA 10% su lavori	28.483,40	17.346,59	11.136,81	
	IVA 22% su spese tecniche e c.i.	6.584,43	4.009,96	2.574,47	
	Lavori in economia, IVA inclusa	-	-	-	
	Contributo ANAC	225,00	137,03	87,97	
	Fornitura corpi illuminanti	31.835,03	19.387,76	12.447,27	
	Imprevisti e lavori su fattura	11.076,51	6.745,67	4.330,84	
	Totale b) somme a disposizione	114.642,99	69.818,38	44.824,61	
1	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE (a+b)	399.476,99	243.284,28	156.192,71	
c	economie di gara (ribasso d’asta e relative imposte)	298,42	181,74	116,68	
2	TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)	399.775,41	243.466,06	156.309,39	

	e, pertanto, la presente variante trova copertura nella somma già stanziata.
4)Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione.
5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 17/01/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 17/01/2018
                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                     Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari;
•	Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Q.T.E. raffronto progetto/variante;
•	Schema di atto di sottomissione;
•	Tav. 01.1v2.E: Progetto Impianti – utenze elettriche;
•	Tav. 01.2v2.E: Progetto Impianti – dorsali elettriche;
•	Tav. 01.5.vE: Progetto Impianti – quadro elettrico piano terra;

	qui integralmente richiamati nei contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se, materialmente non allegati, per esigenze organizzative e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

3) Di prendere atto  che il Quadro Tecnico economico prevede:

		IMPORTI TOTALI (Euro)	FINANZIAMENTO MIT (Euro)	FONDI PROPRI DELL’ENTE (Euro)	
a	Importo lavori di perizia al netto del ribasso del 7,847% offerto dalla ditta Mecella S.r.l.	284.834,00	173.465,90	111.368,10	
b	somme a disposizione dell’amministrazione (compresa IVA)				
	Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	6.170,47	3.757,86	2.412,61	
	IRAP su incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	338,93	206,41	132,52	
	Coordinamento sicurezza	13.141,25	8.003,11	5.138,14	
	Prog. e D.L. impianti e cert. Energetica	15.636,85	9.522,95	6.113,90	
	Contr. Integr. Su spese tecniche	1.151,12	701,04	450,08	
	IVA 10% su lavori	28.483,40	17.346,59	11.136,81	
	IVA 22% su spese tecniche e c.i.	6.584,43	4.009,96	2.574,47	
	Lavori in economia, IVA inclusa	-	-	-	
	Contributo ANAC	225,00	137,03	87,97	
	Fornitura corpi illuminanti	31.835,03	19.387,76	12.447,27	
	Imprevisti e lavori su fattura	11.076,51	6.745,67	4.330,84	
	Totale b) somme a disposizione	114.642,99	69.818,38	44.824,61	
1	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE (a+b)	399.476,99	243.284,28	156.192,71	
c	economie di gara (ribasso d’asta e relative imposte)	298,42	181,74	116,68	
2	TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)	399.775,41	243.466,06	156.309,39	

	e, pertanto, la presente variante trova copertura nella somma già stanziata.
4)Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione.
5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 23-01-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  23-01-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-01-18 al 07-02-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO