COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  224 DEL  28-12-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE
AL  PROGETTO  DI  "ADEGUAMENTO  TECNICO-FUNZIONALE 
DELL'EDIFICIO  DENOMINATO  "LANCIANO FORUM" PER O=
SPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese
di dicembre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	A seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi, gli spazi di proprietà pubblica destinati ad ospitare eventi ed attività pubbliche siti nel Comune di Castelraimondo (Cinema Manzoni e teatro comunale) hanno subìto danni tali da renderli non più utilizzabili;
-	È fondamentale individuare uno spazio per organizzare eventi ed attività pubbliche a valenza sociale, culturale e didattica capace di accogliere le sopra menzionate attività, attorno al quale aggregare e consentire alla popolazione colpita dal sisma di ritrovare un minimo di coesione sociale in un ambiente sicuro ed attrezzato; 
-	Il Comune di Castelraimondo dispone di un edificio in località Lanciano, perfettamente fruibile e con struttura antisismica, che non ha subìto alcun danno a seguito del sisma del 2016, che potrebbe essere utilmente utilizzato per eventi ed attività pubbliche senza finalità di lucro da parte del Comune di Castelraimondo, dei Comuni limitrofi di Gagliole e Pioraco nonché dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino, i quali hanno già stipulato un accordo con questo Comune per la temporanea delocalizzazione delle attività in precedenza svolte presso gli edifici lesionati dal sisma e fino alla loro sistemazione;
-	In data 30/09/2017 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Regione Marche una proposta progettuale, per un importo totale di € 663.671,66 a valere su fondi donazione relativi a strutture culturali, sociali e ricreative, avente come oggetto il miglioramento ed implementazione della struttura con l’obbiettivo finale di creare un centro polifunzionale modulabile di 1300 mq costituito da due sale attigue utilizzabili anche in maniera singola mediante pannelli scorrevoli. 
-	In data 29/11/2017 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Regione Marche la documentazione progettuale relativa all’intervento di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE", al fine di ottenere la prescritta autorizzazione. La documentazione trasmessa comprendeva la verifica della convenienza economica dell’adeguamento funzionale (costo complessivo di € 515.309,03) rispetto a una soluzione alternativa che prevedeva la realizzazione di una struttura prefabbricata temporanea, in base all’art.2 dell’OCDPC n.408/2016 (costo complessivo di € 749.845,18);
-	In data 09/02/2018 la Regione Marche ha preso atto che l’intervento di adeguamento funzionale dell’edificio esistente è certamente inferiore all’acquisto dei moduli, determinando anche un risparmio del consumo di suolo, con salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Inoltre ha espresso parere favorevole al progetto presentato, a condizione che interventi di adeguamento impiantistico e di finitura interna siano limitati esclusivamente alla sala polifunzionale già esistente;
-	In data 04/04/2018, con D.G.M. n. 67 è stato approvato il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dall’Ing. Carmine Calafiore per il Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e per gli aspetti impiantistici, che prevedeva un importo totale di € 432.434,27, di cui € 199.218,44 per lavori ed € 233.215,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 123 del 19.04.2018, rettificata con Determinazione del Settore Tecnico n. 131 del 02.05.2018, è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE" ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 140 del 11.05.2018 si è preso atto delle risultanze dell’indagine di mercato, approvando il verbale di sorteggio pubblico, sulla base del quale sono state sorteggiate n. 20 (venti) ditte, e lo schema di lettera di invito con i relativi allegati;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 156 del 31/05/2018 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa ELETTROCUPRA S.R.L., con sede in Cupramontana (AN), Via Ponte Magno n.14, con un ribasso del 26,654% rispetto all’importo posto a base di gara, corrispondente ad € 51.378,88, per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 147.839,56, di cui € 6.456,09 per Oneri per la Sicurezza;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 171 del 08/06/2018 la somma di € 432.434,27 è stata impegnata al capitolo 2620/5 del Bilancio 2018;
-	I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, per ragioni di urgenza, in data 09/07/2018;
-	Con D.G.M. n. 150 del 22/08/2018 è stato dato l’indirizzo di: redigere una variante migliorativa al progetto esecutivo approvato con DGM n. 67/2018, prevedendo la realizzazione di idonei spazi di servizio per i promotori di attività socio-culturali da destinare a bagni, spogliatoi e depositi; realizzare con fondi dell’Amministrazione l’ampliamento dell’attuale sala polifunzionale, mediante l’utilizzo dell’attigua sala deposito; realizzare con fondi dell’Amministrazione una seconda sala polifunzionale di circa mq. 300 in una porzione del deposito comunale, lato blocco servizi; destinare una porzione del deposito protezione civile al posizionamento di spazi per servizi (bagni, spogliatoi, depositi);
-	CHE  è è stata approvata la perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo delle opere di "ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM" PER OSPITARE EVENTI ED ATTIVITÀ PUBBLICHE", in conformità con l’atto di indirizzo sopra citato, per un importo complessivo dell’intervento di € 532.247,08, così suddiviso:
a)	importo netto contrattuale € 169.341,33, oltre somme a disposizione per € 303.715,35, così per importo progetto finanziato con fondi della Regione Marche di € 473.056,68,
b)	realizzazione di opere complementari, finanziate con fondi comunali, per un importo lavori pari a € 24.635,24, oltre somme a disposizione per € 34.555,16, così per un totale di € 59.190,40.
-	Che sono state impegnate le somme di € 22.565,73 e € 67.000,00 rispettivamente al capitolo 2620/5 e al capitolo 2620/6 del Bilancio 2018;

CONSIDERATO CHE:
-	In corso d’opera si è riscontrata la necessità di effettuare modifiche al progetto approvato, non incluse nell'appalto iniziale, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, necessarie per migliorare l’opera e la sua funzionalità senza alterare la natura generale del contratto, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 – c. 1 lett. b e c, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti 7 Marzo 2018 n. 49 . Le modifiche principali , descritte negli elaborati di variante , consistono in:
a)	Stralcio realizzazione di tettoia e recinzione perimetrale dell’Unità Trattamento Aria esterna;
b)	Realizzazione di una quinta in cartongesso e chiusura dello spazio al di sopra dei servizi igienici;
c)	Riposizionamento di una conchiglia della copertura del capannone che si presentava spostata rispetto alla sua sede;
d)	Sostituzione in copertura degli evacuatori di fumo non utilizzati e causa di infiltrazioni;
e)	Fornitura e posa in opera di impianto audio necessario per le attività previste all’interno della sala;
f)	Pulizia completa della sala polifunzionale, compreso trattamento del pavimento, necessaria per l’utilizzo della struttura;
g)	Modifiche nelle quantità di lavorazioni impiantistiche e realizzazione di opere accessorie a completamento di quelle principali;
h)	Realizzazione di opere accessorie, a carico del Comune, riguardanti l’esterno del fabbricato e la sala adiacente a quella principale.
-	Si rende necessario concordare con l’Impresa n. 72 nuovi prezzi, dei quali n. 11 desunti dal Prezzario LL.PP. Regione Marche 2018, n. 58 desunti dal Prezzario Unico Del Cratere del Centro Italia (Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018), e n. 3 derivanti da regolare analisi, concordati con il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 163 del Regolamento Generale dei LL.PP. di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i.ed assoggettati al ribasso d’asta del 26,654%, puntualmente riportati nell’elenco nuovi prezzi di variante;
-	È stata pertanto redatta una perizia di variante, onde impegnare le risorse necessarie per eseguire maggiori e diversi lavori.

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto dell’Art. 106 d.Lgs. 50/2016 – c. 1 lett. b e c, cc. 7 e 12;

CONSIDERATO CHE:
-	a seguito delle variazioni introdotte, l’importo netto contrattuale passa da € 169.341,33 ad € 178.446,46, con un incremento di € 9.105,13, pari a circa il 5,38% (cinque virgola trentotto %);
-	l’importo del progetto finanziato con fondi della Regione Marche rimane invariato a € 473.056,68, in quanto per i maggiori lavori sono state utilizzate le somme per imprevisti e parte del ribasso d’asta;
-	per le opere complementari, finanziate con fondi comunali e da affidare con apposita scrittura privata: l’importo lavori passa da € 24.635,24 a € 26.370,48 (comprensivo dello stesso ribasso d’asta applicato per i lavori a carico della Regione), con un aumento di € 1.735,24 pari a circa il 7,04%; le somme a disposizione aumentano da € 34.555,16 a € 85.073,28; l’importo complessivo a carico del Comune passa da € 59.190,40 a € 111.443,76, con un aumento pari a € 52.253,36;
-	l’importo complessivo dell’intervento passa da € 532.247,08 ad € 584.500,44, con un aumento pari a € 52.253,36;

VISTI gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

PRESO ATTO CHE il Quadro Tecnico economico di Perizia di variante prevede:

 				Regione	Comune	
 a 	 IMPORTO LAVORI 	€ 240 461,94 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 € 75 056,15 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA 	 € 66 098,55 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 € 1 291,09 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 € 30 017,97 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 € 16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 € 25 762,25 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 € 25 895,60 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI 	 	€ 240 461,94	 	 	
 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 7 793,37 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	€ 232 668,57 	 	 	
 	 Ribasso offerto ELETTROCUPRA S.r.l. 	26,654%	 € 62 015,48 	 	 	
 	 Importo netto contratto ELETTROCUPRA S.r.l. 	 	€ 178 446,46 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,60%	 € 3 847,39 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 € 264,16 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 € 22 978,01 	 	 	
 b.04 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 € 5 055,16 	 	 	
 b.05 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 17 844,65 	 	 	
 b.06 	 Contributo ANAC 	 	 €  60,00 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti IVA compresa 	 € 25 940,32 	 	 	
 b.08 	 Fornitura corpi illuminanti integrativi sala 1 IVA compresa 	 € 3 121,13 	 	 	
 b.09 	 Fornitura materiale elettrico IVA compresa 	 € 40 870,00 	 	 	
 b.10 	 Fornitura unità esterna trattamento aria IVA compresa 	 € 47 698,34 	 	 	
 b.11 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 € 26 607,57 	 	 	
 b.12 	 Fornitura sanitari locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa 	 € 607,56 	 	 	
 b.13 	 Imprevisti 5% IVA compresa 	 €  - 	 	 	
 b.14 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 27 672,32 	 	 	
 b.15 	 Impianto audio fornito e posto in opera IVA compr.	 € 20 008,00 	 	 	
 b.16 	 Fornitura e posa porte locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa	 € 1 199,00 	 	 	
 b.17 	 Quinta davanti bagni, bar IVA compresa 	 € 5 760,22 	 	 	
 b.18 	 Riposizionamento conchiglia copertura IVA compresa 	 € 4 270,00 	 	 	
 b.19 	 Sostituzione evacuatori di fumo copertura e taglio pannello IVA compresa 	 € 11 000,00 	 	 	
 b.20 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM 	 € 11 840,60 	 	 	
 b.21 	 Realizzazione fognatura wc spogliatoi e allacci antincendio IVA compresa 	 € 11 818,79 	 	 	
 b.22 	 Fornitura e posa porte aggiuntive sala polifunzionale IVA compresa 	 € 1 023,00 	 	 	
 b.23 	 Pulizia sala polifunzionale principale 	 € 5 124,00 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	€ 294 610,22 	 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE (OPERE A CARICO DELLA REGIONE)   	€ 473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 € 35 953,53 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 € 1 906,16 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 € 2 326,12 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 € 19 990,66 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 € 11 730,59 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE  	 € 35 953,53 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 1 165,25 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 € 34 788,28 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto 	26,654%	 € 9 583,05 	 	 	
 	 Importo netto contratto 	 € 26 370,48 	 	 € 26 370,48 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 € 719,07 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €  39,50 	 	 	
 d.03 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 2 637,05 	 	 	
 d.04 	 Fornitura corpi illuminanti sala 2 IVA compresa 	 € 4 627,12 	 	 	
 d.05 	 Fornitura sanitari WC protezione civile IVA compr.	 € 607,56 	 	 	
 d.06 	 Canali aggiuntivi trattamento aria sala 2 IVA compr.	 € 8 142,28 	 	 	
 d.07 	 Spostamento parete interna IVA compresa 	 € 12 846,52 	 	 	
 d.08 	 Controsoffitto + parete sala 2 IVA compresa	 € 13 721,17 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5% (IVA compresa) 	 € 1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 10 541,36 	 	 	
 d.11 	 Oneri per aumento di potenza elettrica 	 	 € 1 440,53 	 	 	
 d.12 	 Fornitura e posa porte WC prot. civile IVA compr.	 € 1 331,00 	 	 	
 d.13 	Fondaz rampa ingresso principale e sala 2 IVA compr.	 € 10 098,94 	 	 	
 d.14 	 Rampa uscita di sicurezza sala 2 IVA compresa 	 € 7 700,00 	 	 	
 d.15 	Fognatura WC PROT. CIVILE + lavori esterni (IVA compr.)	 € 8 201,82 	 	 	
 d.16 	 Pulizia sala polifunzionale 2 	 € 976,00 	 	 	
 d.17 	Allaccio impianto idrico alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM	 € 211,62 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 85 073,28 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 111 443,76 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
					 	
   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	€ 473 056,68 	 € 111 443,76 	
   IMPORTO COMPLESSIVO 	 €    584 500,44 	

RITENUTO che la perizia sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in: 
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante migliorativa;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:

 				Regione	Comune	
 a 	 IMPORTO LAVORI 	€ 240 461,94 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 € 75 056,15 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA 	 € 66 098,55 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 € 1 291,09 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 € 30 017,97 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 € 16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 € 25 762,25 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 € 25 895,60 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI 	 	€ 240 461,94	 	 	
 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 7 793,37 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	€ 232 668,57 	 	 	
 	 Ribasso offerto ELETTROCUPRA S.r.l. 	26,654%	 € 62 015,48 	 	 	
 	 Importo netto contratto ELETTROCUPRA S.r.l. 	 	€ 178 446,46 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,60%	 € 3 847,39 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 € 264,16 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 € 22 978,01 	 	 	
 b.04 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 € 5 055,16 	 	 	
 b.05 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 17 844,65 	 	 	
 b.06 	 Contributo ANAC 	 	 €  60,00 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti IVA compresa 	 € 25 940,32 	 	 	
 b.08 	 Fornitura corpi illuminanti integrativi sala 1 IVA compresa 	 € 3 121,13 	 	 	
 b.09 	 Fornitura materiale elettrico IVA compresa 	 € 40 870,00 	 	 	
 b.10 	 Fornitura unità esterna trattamento aria IVA compresa 	 € 47 698,34 	 	 	
 b.11 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 € 26 607,57 	 	 	
 b.12 	 Fornitura sanitari locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa 	 € 607,56 	 	 	
 b.13 	 Imprevisti 5% IVA compresa 	 €  - 	 	 	
 b.14 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 27 672,32 	 	 	
 b.15 	 Impianto audio fornito e posto in opera IVA compr.	 € 20 008,00 	 	 	
 b.16 	 Fornitura e posa porte locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa	 € 1 199,00 	 	 	
 b.17 	 Quinta davanti bagni, bar IVA compresa 	 € 5 760,22 	 	 	
 b.18 	 Riposizionamento conchiglia copertura IVA compresa 	 € 4 270,00 	 	 	
 b.19 	 Sostituzione evacuatori di fumo copertura e taglio pannello IVA compresa 	 € 11 000,00 	 	 	
 b.20 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM 	 € 11 840,60 	 	 	
 b.21 	 Realizzazione fognatura wc spogliatoi e allacci antincendio IVA compresa 	 € 11 818,79 	 	 	
 b.22 	 Fornitura e posa porte aggiuntive sala polifunzionale IVA compresa 	 € 1 023,00 	 	 	
 b.23 	 Pulizia sala polifunzionale principale 	 € 5 124,00 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	€ 294 610,22 	 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE (OPERE A CARICO DELLA REGIONE)   	€ 473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 € 35 953,53 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 € 1 906,16 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 € 2 326,12 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 € 19 990,66 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 € 11 730,59 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE  	 € 35 953,53 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 1 165,25 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 € 34 788,28 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto 	26,654%	 € 9 583,05 	 	 	
 	 Importo netto contratto 	 € 26 370,48 	 	 € 26 370,48 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 € 719,07 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €  39,50 	 	 	
 d.03 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 2 637,05 	 	 	
 d.04 	 Fornitura corpi illuminanti sala 2 IVA compresa 	 € 4 627,12 	 	 	
 d.05 	 Fornitura sanitari WC protezione civile IVA compr.	 € 607,56 	 	 	
 d.06 	 Canali aggiuntivi trattamento aria sala 2 IVA compr.	 € 8 142,28 	 	 	
 d.07 	 Spostamento parete interna IVA compresa 	 € 12 846,52 	 	 	
 d.08 	 Controsoffitto + parete sala 2 IVA compresa	 € 13 721,17 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5% (IVA compresa) 	 € 1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 10 541,36 	 	 	
 d.11 	 Oneri per aumento di potenza elettrica 	 	 € 1 440,53 	 	 	
 d.12 	 Fornitura e posa porte WC prot. civile IVA compr.	 € 1 331,00 	 	 	
 d.13 	Fondaz rampa ingresso principale e sala 2 IVA compr.	 € 10 098,94 	 	 	
 d.14 	 Rampa uscita di sicurezza sala 2 IVA compresa 	 € 7 700,00 	 	 	
 d.15 	Fognatura WC PROT. CIVILE + lavori esterni (IVA compr.)	 € 8 201,82 	 	 	
 d.16 	 Pulizia sala polifunzionale 2 	 € 976,00 	 	 	
 d.17 	Allaccio impianto idrico alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM	 € 211,62 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 85 073,28 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 111 443,76 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
					 	
   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	€ 473 056,68 	 € 111 443,76 	
   IMPORTO COMPLESSIVO 	 €    584 500,44 	

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

5) Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

6) Di demandare al Responsabile dei Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Castelraimondo, li 27/12/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Gian Mario Brancaleoni
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 27/12/2018

                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                     Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in: 
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo delle opere a carico del Comune;
•	Elenco prezzi unitari di perizia di variante migliorativa;
•	Analisi nuovi prezzi unitari;
•	Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante; 
•	Raffronto Q.T.E. progetto/variante;
•	Schema di Atto di sottomissione;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di prendere atto che il Quadro Tecnico economico prevede:

 				Regione	Comune	
 a 	 IMPORTO LAVORI 	€ 240 461,94 	 	 	
	 di cui: 			 	 	
 a.01 	IMPIANTO ELETTRICO	 	 € 75 056,15 	 	 	
 a.02 	IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA 	 € 66 098,55 	 	 	
 a.03 	IMPIANTO ANTINCENDIO	 	 € 1 291,09 	 	 	
 a.04 	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	 € 30 017,97 	 	 	
 a.05 	INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	 € 16 340,33 	 	 	
 a.06 	LAVORI EDILI 	 € 25 762,25 	 	 	
 a.07 	 Realizzazione locali a servizio sala polifunzionale 	 € 25 895,60 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI 	 	€ 240 461,94	 	 	
 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 7 793,37 	 	 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	€ 232 668,57 	 	 	
 	 Ribasso offerto ELETTROCUPRA S.r.l. 	26,654%	 € 62 015,48 	 	 	
 	 Importo netto contratto ELETTROCUPRA S.r.l. 	 	€ 178 446,46 	 	
				 	 	
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE FINANZIATE 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,60%	 € 3 847,39 	 	 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 € 264,16 	 	 	
 b.03 	 Spese tecniche + CNPAIA 4% 	 	 € 22 978,01 	 	 	
 b.04 	 IVA spese tecniche 	22,00%	 € 5 055,16 	 	 	
 b.05 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 17 844,65 	 	 	
 b.06 	 Contributo ANAC 	 	 €  60,00 	 	 	
 b.07 	 Fornitura corpi illuminanti IVA compresa 	 € 25 940,32 	 	 	
 b.08 	 Fornitura corpi illuminanti integrativi sala 1 IVA compresa 	 € 3 121,13 	 	 	
 b.09 	 Fornitura materiale elettrico IVA compresa 	 € 40 870,00 	 	 	
 b.10 	 Fornitura unità esterna trattamento aria IVA compresa 	 € 47 698,34 	 	 	
 b.11 	 Fornitura pannelli insonorizzanti IVA compresa 	 € 26 607,57 	 	 	
 b.12 	 Fornitura sanitari locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa 	 € 607,56 	 	 	
 b.13 	 Imprevisti 5% IVA compresa 	 €  - 	 	 	
 b.14 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 27 672,32 	 	 	
 b.15 	 Impianto audio fornito e posto in opera IVA compr.	 € 20 008,00 	 	 	
 b.16 	 Fornitura e posa porte locali a servizio sala polifunzionale IVA compresa	 € 1 199,00 	 	 	
 b.17 	 Quinta davanti bagni, bar IVA compresa 	 € 5 760,22 	 	 	
 b.18 	 Riposizionamento conchiglia copertura IVA compresa 	 € 4 270,00 	 	 	
 b.19 	 Sostituzione evacuatori di fumo copertura e taglio pannello IVA compresa 	 € 11 000,00 	 	 	
 b.20 	 Allaccio impianto idrico antincendio alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM 	 € 11 840,60 	 	 	
 b.21 	 Realizzazione fognatura wc spogliatoi e allacci antincendio IVA compresa 	 € 11 818,79 	 	 	
 b.22 	 Fornitura e posa porte aggiuntive sala polifunzionale IVA compresa 	 € 1 023,00 	 	 	
 b.23 	 Pulizia sala polifunzionale principale 	 € 5 124,00 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	€ 294 610,22 	 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE (OPERE A CARICO DELLA REGIONE)   	€ 473 056,68 	 	
				 	 	
 c 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 € 35 953,53 	 	 	
 	 di cui: 	 	 	 	 	
 c.01 	LAVORI EDILI WC PROTEZIONE CIVILE	 € 1 906,16 	 	 	
 c.02 	IMPIANTO IDRICO WC PROTEZIONE CIVILE	 € 2 326,12 	 	 	
 c.03 	IMPIANTO ELETTRICO WC E DEPOSITO PROT. CIVILE	 € 19 990,66 	 	 	
 c.04 	 IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE 2 	 € 11 730,59 	 	 	
 c.05 	 IMPORTO LAVORI PER OPERE A CARICO DEL COMUNE  	 € 35 953,53 	 	 	
 c.06 	 Oneri per la sicurezza 	3,241%	 € 1 165,25 	 	 	
 c.07 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	 € 34 788,28 	 	 	
 c.08 	 Ribasso offerto 	26,654%	 € 9 583,05 	 	 	
 	 Importo netto contratto 	 € 26 370,48 	 	 € 26 370,48 	
				 	 	
 d 	 SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 	 	
 d.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	2,00%	 € 719,07 	 	 	
 d.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €  39,50 	 	 	
 d.03 	 IVA sui lavori 	10,00%	 € 2 637,05 	 	 	
 d.04 	 Fornitura corpi illuminanti sala 2 IVA compresa 	 € 4 627,12 	 	 	
 d.05 	 Fornitura sanitari WC protezione civile IVA compr.	 € 607,56 	 	 	
 d.06 	 Canali aggiuntivi trattamento aria sala 2 IVA compr.	 € 8 142,28 	 	 	
 d.07 	 Spostamento parete interna IVA compresa 	 € 12 846,52 	 	 	
 d.08 	 Controsoffitto + parete sala 2 IVA compresa	 € 13 721,17 	 	 	
 d.09 	 Imprevisti 5% (IVA compresa) 	 € 1 231,76 	 	 	
 d.10 	 Economie di gara (IVA compresa) 	 € 10 541,36 	 	 	
 d.11 	 Oneri per aumento di potenza elettrica 	 	 € 1 440,53 	 	 	
 d.12 	 Fornitura e posa porte WC prot. civile IVA compr.	 € 1 331,00 	 	 	
 d.13 	Fondaz rampa ingresso principale e sala 2 IVA compr.	 € 10 098,94 	 	 	
 d.14 	 Rampa uscita di sicurezza sala 2 IVA compresa 	 € 7 700,00 	 	 	
 d.15 	Fognatura WC PROT. CIVILE + lavori esterni (IVA compr.)	 € 8 201,82 	 	 	
 d.16 	 Pulizia sala polifunzionale 2 	 € 976,00 	 	 	
 d.17 	Allaccio impianto idrico alla rete idrica (IVA compresa) - ASSEM	 € 211,62 	 	 	
 	 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 € 85 073,28 	
				 	 	
   IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A CARICO DEL COMUNE 	 	 € 111 443,76 	
				 	 	
				 Regione 	 Comune 	
					 	
   IMPORTO RIPARTITO PER COMPETENZA 	€ 473 056,68 	 € 111 443,76 	
   IMPORTO COMPLESSIVO 	 €    584 500,44 	

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura nel DUP e nel Bilancio 2018;

5) Di approvare lo Schema di Atto di sottomissione;

6) Di demandare al Responsabile dei Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 05-02-19                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  05-02-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-02-19 al 20-02-19 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO