COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  6 DEL  23-01-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE O=
PERE  DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SPINA 
DELLA  FRAZIONE  TORRICELLA MEDIANTE OPERE PROVVI=
SIONALI  E  SMONTAGGIO  DI PORZIONE DI FABBRICATO,
DANNEGGIATO  DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese
di gennaio alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:

-	A seguito delle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, alcuni edifici siti in Frazione Torricella hanno subito forti lesioni che ne hanno compromesso la stabilità, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, tanto da rendere necessaria l’interdizione al transito pedonale e veicolare della strada comunale di accesso alla frazione;

-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 171 del 04/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SPINA DELLA FRAZIONE TORRICELLA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI E SMONTAGGIO DI PORZIONE DI FABBRICATO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposto dall’Arch. Andrea Pierigè, che prevedeva un importo totale di Euro 126.531,89, di cui € 107.779,43 per lavori ed € 18.752,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come appresso distinto:

A 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  sicurezza inclusa  	 	    107.779,43 	
 a.01 	 Oneri per la Sicurezza (SI) Voci “f” non soggette a ribasso 	 	      33.511,42 	
 a.02 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 	        74.268,01 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 			
 b.01 	 IVA su lavori (10% di A)  		      10.777,94 	
 b.02 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 (1%) 		        1.077,79 	
 b.03 	 IRAP su incentivi art. 113  		59,20 	
 b.04 	 Spese tecniche progettazione  (5% di A)   		       5.388,97 	
 b.05 	 C.N.P.A.I.A (4% di b.03) 		          215,56 	
 b.06 	 IVA  su spese tecniche (22% su b.04+b.05)  		1.233,00 	
 					 	
		 Totale somme a disposizione 		      18.752,46 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		      126.531,89 	

-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 349 del 06/11/2018, sono stati affidati i lavori all'Impresa RESTAURI S.C.A.R.L., con sede in Piazza E. Mattei n. 7 62024 MATELICA , con un ribasso del 6,250% pari ad un importo di Euro 4.641,75  per un importo netto dei lavori pari ad Euro 69.626,26, oltre Euro 33.511,42 per oneri di sicurezza, così per un importo totale di aggiudicazione pari a € 103.137,68.

VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di modificare le quantità di alcune lavorazioni non previste in progetto, adeguatamente descritte nella relazione illustrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata per motivi organizzativi, e finalizzate a garantire una maggiore sicurezza del manufatto e delle zone adiacenti ad esso.
VISTO altresì che il quadro economico del progetto prevedeva l’applicazione di un’aliquota IVA del 10% sull’importo dei lavori, mentre successivamente si è chiarito che l’aliquota corretta è il 22%.
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo complessivo di € 111.806,20, comprensivo di € 45.022,51 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 4.173,98, risulta pari ad € 107.632,22.
CONSIDERATO che le somme a disposizione dell’Amministrazione risultano ora pari a € 31.909,07.
	
CONSIDERATO che l’importo della perizia è aumentato di € 13.009,40 rispetto a quello originario e risulta ora pari a  € 139.541,29.

VISTA la perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SPINA DELLA FRAZIONE TORRICELLA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI E SMONTAGGIO DI PORZIONE DI FABBRICATO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 139.541,29, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 				
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		        111 806,20 	
 a 	  Oneri per la Sicurezza (SI) Voci “f” non soggette a ribasso  	 	          45 022,51 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		         66 783,69 	
 					
 	 ribasso offerto ditta RESTAURI S.C.A.R.L. 	6,250%		            4 173,98 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          45 022,51 	
 	 Importo netto contratto ditta RESTAURI S.C.A.R.L.   C.I.G. 7654938EA9 	 	       107 632,22 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 a.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%		            1 077,79 	
 a.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 		                 59,20 	
 a.03 	  Spese tecniche progettazione  (5%) 	 		            5 590,31 	
 a.04 	  C.N.P.A.I.A (4%) 	 		               223,61 	
 	 	 		 	
 b 	 IVA 		 	
 b.01 	 su lavori 	22%		          23 679,09 	
 b.02 	 su spese tecniche 	22%		            1 279,06 	
 				 	
 c 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                        - 	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 		          31 909,07 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO		        139 541,29 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SPINA DELLA FRAZIONE TORRICELLA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI E SMONTAGGIO DI PORZIONE DI FABBRICATO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 139.541,29, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 				
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		        111 806,20 	
 a 	  Oneri per la Sicurezza (SI) Voci “f” non soggette a ribasso  	 	          45 022,51 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		         66 783,69 	
 					
 	 ribasso offerto ditta RESTAURI S.C.A.R.L. 	6,250%		            4 173,98 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          45 022,51 	
 	 Importo netto contratto ditta RESTAURI S.C.A.R.L.    C.I.G. 7654938EA9 	 	       107 632,22 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 a.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%		            1 077,79 	
 a.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 		                 59,20 	
 a.03 	  Spese tecniche progettazione  (5%) 	 		            5 590,31 	
 a.04 	  C.N.P.A.I.A (4%) 	 		               223,61 	
 	 	 		 	
 b 	 IVA 		 	
 b.01 	 su lavori 	22%		          23 679,09 	
 b.02 	 su spese tecniche 	22%		            1 279,06 	
 				 	
 c 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                        - 	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 		          31 909,07 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO		        139 541,29 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 02 del 02/01/2019, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 22/01/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 22/01/2019

                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                    Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SPINA DELLA FRAZIONE TORRICELLA MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI E SMONTAGGIO DI PORZIONE DI FABBRICATO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 139.541,29, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 				
 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		        111 806,20 	
 a 	  Oneri per la Sicurezza (SI) Voci “f” non soggette a ribasso  	 	          45 022,51 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		         66 783,69 	
 					
 	 ribasso offerto ditta RESTAURI S.C.A.R.L. 	6,250%		            4 173,98 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		          45 022,51 	
 	 Importo netto contratto ditta RESTAURI S.C.A.R.L.    C.I.G. 7654938EA9 	 	       107 632,22 	
 					
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 				
 a.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%		            1 077,79 	
 a.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 		                 59,20 	
 a.03 	  Spese tecniche progettazione  (5%) 	 		            5 590,31 	
 a.04 	  C.N.P.A.I.A (4%) 	 		               223,61 	
 	 	 		 	
 b 	 IVA 		 	
 b.01 	 su lavori 	22%		          23 679,09 	
 b.02 	 su spese tecniche 	22%		            1 279,06 	
 				 	
 c 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                        - 	
 				 	
	 Totale somme a disposizione 		          31 909,07 	
					
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO		        139 541,29 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 02 del 02/01/2019, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 24-01-19                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  24-01-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-01-19 al 08-02-19 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO