COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  85 DEL  31-05-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPE=
RE  DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA IV 
NOVEMBRE  N.  21, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI
DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese
di maggio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	A seguito delle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, l’edificio sito in via IV novembre n. 21 ha subito forti lesioni che ne hanno compromesso la stabilità, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, tanto da rendere necessaria l’interdizione al transito pedonale e veicolare del tratto antistante, che è stato immediatamente delimitato con transennamento;
•	Dalle valutazioni condotte dall’Ufficio Tecnico Comunale, è emersa la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza, in quanto il livello di danno strutturale dell’immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità e la riattivazione dei servizi essenziali;
•	Considerata l’urgenza di procedere con l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e causa carenza di organico, si è reso necessario affidare a professionista esterno in possesso dei necessari requisiti le attività di progettazione, in quanto i dipendenti dell’Ufficio Tecnico sono impegnati a tempo pieno nella gestione dell’emergenza;
•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 85 del 03/04/2017, R.G. n. 193, l’attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio sito in via IV novembre n. 21 sono state affidate all’Ing. Bisbocci Luca, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Macerata al n. 1351, con studio in Castelraimondo, Viale Europa, 19/A, per un corrispettivo pari al 5% dell’importo dei lavori, oltre C.P. e IVA come per Legge, stimato pertanto in via preventiva in € 650,00, oltre c.p. 4% pari ad € 26,00 ed IVA 22% pari ad € 148,72, così per un totale di € 824,72 – C.I.G. Z1A1E15E5C;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 08.04.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE N. 21, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ing. Bisbocci, che prevede un importo totale di Euro 22.794,77, come appresso distinto:

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		               17.469,76 	
 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 	                    524,09 	
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		              16.945,67 	
					
 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                    349,40 	
 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                      23,99 	
 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 		                    908,43 	
 	 	 		 	
 IVA 		 	
 su lavori 	 	22%		                 3.843,35 	
 su spese tecniche 	 	22%		                    199,85 	
				 	
 Totale somme a disposizione 		                 5.325,01 	
					
                                   		IMPORTO COMPLESSIVO		               22.794,77 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 106 del 13/04/2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Pomili Federico, con sede in CASTELRAIMONDO (MC), Via Pascoli, n. 10 – C.I.G. Z121E402B0, con un ribasso percentuale del 12,50%, così per un importo lavori di contratto pari ad € 15.351,55.

VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera, consistenti nella rinzaffatura e intonacatura del paramento esterno al piano terra, nella realizzazione di un plinto in c.a. di appoggio al puntello laterale di sinistra verso via IV novembre e nell’integrazione delle sbadacchiature esistenti con altre sulla faccia interna di due aperture, rendendosi pertanto necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le relative risorse per eseguire maggiori e diversi lavori;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in aumento per un importo complessivo di € 21.998,32, comprensivo di € 215,90 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 2.722,80, risulta pari ad  € 19.275,52 

VISTA la prima perizia di variante delle opere di “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE N. 21, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ing. Bisbocci e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di Euro 28.104,68, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		              €   21.998,32 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €   14.801,74 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €    7.196,58 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI) 	 	3,00%	 	               €     215,90 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		            €  21.782,42 	
 						
 	 ribasso offerto ditta POMILI FEDERICO 	 	12,500%		              €   2.722,80 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                €    215,90 	
 	 Importo netto contratto ditta POMILI FEDERICO  - CIG Z121E402B0 		           €   19.275,52 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		               €    439,97 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               €     30,21 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 		              €   1.143,91 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		             €  4.240,61 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                    €   251,66 	
 					 	
	Totale somme a disposizione		 		             €    6.106,36 	

 IMPORTO COMPLESSIVO 				            €   28.104,68 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE N. 21, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ing. Bisbocci e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di Euro 28.104,68, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		              €   21.998,32 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €   14.801,74 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €    7.196,58 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI) 	 	3,00%	 	               €     215,90 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		            €  21.782,42 	
 						
 	 ribasso offerto ditta POMILI FEDERICO 	 	12,500%		              €   2.722,80 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                €    215,90 	
 	 Importo netto contratto ditta POMILI FEDERICO  - CIG Z121E402B0 		           €   19.275,52 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		               €    439,97 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               €     30,21 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 		              €   1.143,91 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		             €  4.240,61 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                    €   251,66 	
 					 	
	Totale somme a disposizione		 		             €    6.106,36 	

 IMPORTO COMPLESSIVO 				            €   28.104,68 	

4) Di dare atto che l'importo complessivo della perizia ammonta ad Euro 28.104,68, il cui costo trova copertura al cap. 2901-0 del Bilancio 2017, avente ad oggetto "Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017.

6) Di demandare allo stesso responsabile l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo,  lì 31/05/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 31/05/2017 
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                          Dr.ssa Paola Cingolani

 LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica, dal Responsabile del servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di “MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA IV NOVEMBRE N. 21, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, predisposto dall’Ing. Bisbocci e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di Euro 28.104,68, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		              €   21.998,32 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €   14.801,74 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		             €    7.196,58 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI) 	 	3,00%	 	               €     215,90 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		            €  21.782,42 	
 						
 	 ribasso offerto ditta POMILI FEDERICO 	 	12,500%		              €   2.722,80 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                €    215,90 	
 	 Importo netto contratto ditta POMILI FEDERICO  - CIG Z121E402B0 		           €   19.275,52 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		               €    439,97 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		               €     30,21 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 		              €   1.143,91 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		             €  4.240,61 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                    €   251,66 	
 					 	
	Totale somme a disposizione		 		             €    6.106,36 	

 IMPORTO COMPLESSIVO 				            €   28.104,68 	

4) Di dare atto che l'importo complessivo della perizia ammonta ad Euro 28.104,68, il cui costo trova copertura al cap. 2901-0 del Bilancio 2017, avente ad oggetto "Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017.

6) Di demandare allo stesso responsabile l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 06-06-17                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  06-06-17             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06-06-17 al 21-06-17 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO