COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  56 DEL  15-04-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI "LA=
VORI  DI  ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO 
DEL  CIMITERO CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DE=
GLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese
di aprile alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
-	A seguito del ripetersi delle scosse relative all’evento sismico del 2016, il Cimitero Comunale di Castelraimondo ha subìto ulteriori danni tali da compromettere la fruibilità della porzione di colombario adiacente all’ingresso al lato sud della parte nuova del complesso;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 19/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo totale di € 39.268,38, di cui € 29.280,76 per lavori ed € 9.987,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		      29 280,76 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		      12 728,76 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		      16 552,00 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI)  	3,00%	 	           496,56 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		     16 055,44 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		           585,62 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		             32,17 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		        6 441,77 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura, compresa IVA 		        2 928,08 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		        9 987,62 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO   		      39 268,38 	

-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 273 del 13/09/2018 sono stati affidati i lavori (C.I.G. n. Z8424E3961), per un importo di contratto pari a € 28.914,70, di cui € 13.225,32 per gli oneri di sicurezza e per lavori non soggetti a ribasso, oltre all'IVA, alla Ditta BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), Via Circonvallazione 27, Cod. Fisc. e P. IVA 01960050431, con un ribasso pari al 2,28%;

VISTO che, in corso d’opera, l’utilizzo della piattaforma ha consentito di verificare da vicino e con maggiore cura i danni riportati soprattutto nelle parti alte della porzione sud-est del Cimitero capoluogo, consistenti in diffusi accenni di distacco dell’intonaco sul soffitto al piano superiore delle ali sud ed est, scorrimento di coppi in copertura e distacco tra pilastri in muratura e travi perimetrali di solaio all’incrocio tra l’ala est e quella nord;
VISTO altresì che si rendono necessarie modifiche al progetto originario, adeguatamente descritte nella relazione tecnica di variante citata in seguito, finalizzate al buon funzionamento e a un migliore utilizzo del manufatto;
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo di € 35.663,97, comprensivo di € 18.214,93 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 397,84, risulta pari ad € 35.266,13;
CONSIDERATO che le somme a disposizione dell’Amministrazione vengono portate a € 8.996,37;
	
CONSIDERATO che l’importo della perizia è aumentato di € 4.994,12 rispetto a quello originario e risulta ora pari a  € 44.262,50.

VISTA la perizia di variante dei “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 44.262,50, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            35 663,97 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 675,27 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 988,70 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI)   3,00% 	 	                 539,66 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           17 449,04 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  BOLDRINI ALBERTO  S.R.L.S.   2,28% di a.05 		                 397,84 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S. - CIG Z8424E3961 		           35 266,13 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113     2,00% di a.01 		                 713,28 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   39,18 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori     22% di a.07 		              7 758,55 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                           - 	
 b.06 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                 485,36 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              8 996,37 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		            44 262,50 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 44.262,50, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            35 663,97 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 675,27 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 988,70 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI)   3,00% 	 	                 539,66 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           17 449,04 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  BOLDRINI ALBERTO  S.R.L.S.   2,28% di a.05 		                 397,84 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S. - CIG Z8424E3961 		           35 266,13 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113     2,00% di a.01 		                 713,28 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   39,18 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori     22% di a.07 		              7 758,55 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                           - 	
 b.06 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                 485,36 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              8 996,37 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		            44 262,50 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 11/04/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 11/04/2019

                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                      Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di perizia di variante;
•	elenco prezzi di perizia di variante;
•	computo metrico di variante;
•	quadro tecnico economico di perizia di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	schema atto di sottomissione;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 44.262,50, come appresso distinto:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            35 663,97 	
 a.02 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 675,27 	
 a.03 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            17 988,70 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI)   3,00% 	 	                 539,66 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           17 449,04 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta  BOLDRINI ALBERTO  S.R.L.S.   2,28% di a.05 		                 397,84 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta  BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S. - CIG Z8424E3961 		           35 266,13 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113     2,00% di a.01 		                 713,28 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   39,18 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori     22% di a.07 		              7 758,55 	
 					 	
 b.05 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                           - 	
 b.06 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                 485,36 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              8 996,37 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		            44 262,50 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 23-04-19                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  23-04-19             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23-04-19 al 08-05-19 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO