COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 381

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 160    DEL 24-05-19

======================================================================
OGGETTO: OPERE  DI  "LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA
ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DA= 
GLI  EVENTI  SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"
ULTERIORE  IMPEGNO  DI  SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI
======================================================================

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese
di  maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO che:

•	A seguito del ripetersi delle scosse relative all’evento sismico del 2016, il Cimitero Comunale di Castelraimondo ha subìto ulteriori danni tali da compromettere la fruibilità della porzione di colombario adiacente all’ingresso al lato sud della parte nuova del complesso, interessata da lesioni in corrispondenza dei pilastri in muratura in mattoni pieni che sorreggono le travi perimetrali in c.a. ai due livelli, le quali hanno manifestato anche segni di crisi delle sezioni in adiacenza ai ritti in muratura ed espulsione del copriferro diffuso lungo tutto il loro sviluppo. 
•	La porzione in oggetto, già inagibile per gli eventi del 26/10/2016, era stata oggetto di un primo intervento provvisorio, con transennamento e inserimento di puntelli metallici e placcaggi provvisori, ma il ripetersi delle scosse ha reso necessario un ulteriore intervento di messa in sicurezza.
•	In altre zone del complesso si sono anche manifestati distacchi di intonaco, con rischio di caduta sulle aree di transito pubbliche adiacenti di altre porzioni pericolanti.
•	È emersa pertanto la necessità di attuare un intervento di messa in sicurezza con lo scopo di ripristinare la fruibilità della porzione di colombario e delle aree esterne limitrofe destinate alla viabilità, compreso l’ingresso al lato sud della parte nuova del Cimitero.
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 19/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI”, che prevede un importo totale di € 39.268,38, di cui € 29.280,76 per lavori ed € 9.987,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante;
-	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 273 del 13/09/2018 sono stati affidati i “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI” (C.I.G. n. Z8424E3961) per un importo di contratto pari a € 28.914,70, di cui € 13.225,32 per gli oneri di sicurezza e per lavori non soggetti a ribasso, oltre all'IVA, alla Ditta BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), Via Circonvallazione 27, Cod. Fisc. e P. IVA 01960050431;
-	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 11/04/2019 è stata approvata la perizia di variante dei lavori citati che prevede un importo totale di € 44.262,50, di cui € 35.663,97 per lavori, con un aumento rispettivamente pari a € 4.994,12 e € 6.383,21 rispetto al progetto originario;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al Cap. 2901-0 del Bilancio 2019, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

VISTO che l'Impresa BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S., esecutrice dei sopra citati “LAVORI DI ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI” ha fornito immediata disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto applicando lo stesso ribasso del 2,28%, per un importo aggiuntivo di contratto di € 6.351,44 oltre IVA;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_16657618, con scadenza validità al 21/09/2019, dal quale si evince la regolarità della Ditta BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), Via Circonvallazione 27;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei fussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il C.I.G. n. Z8424E3961 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”.

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento dei lavori in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto la fattispecie rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 16 del 03/04/2008, in quanto trattasi di lavori inferiori a quarantamila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di impegnare l’ulteriore somma di € 4.994,12, quale maggiore impegno di spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori, al Cap. 2901-0 del Bilancio 2019, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”.

3) Di affidare l’esecuzione dei lavori aggiuntivi di "ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI” all'Impresa BOLDRINI ALBERTO S.R.L.S., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), Via Circonvallazione 27, Cod. Fisc. e P. IVA 01960050431, per l'importo di seguito indicato:
- Importo dell'appalto            		  Euro   6.383,21
- Oneri per la sicurezza 
  e lavori non soggetti a ribasso             Euro   4.989,61
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro   1.393,60
- Ribasso d'asta (2,28%)                      Euro      43,10
- Importo dei lavori a ragione di contratto
  al netto del ribasso del 2,28%              Euro   6.351,44

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 31-05-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 31-05-19      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 31-05-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31-05-19
al 15-06-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 24-05-19           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO