COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 448

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 212    DEL 14-07-17

======================================================================
OGGETTO: OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE,
DANNEGGIATO  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI SISMICI DEL 
26.10.2016  E SUCCESSIVI" - APPROVAZIONE ORDINE DI
SERVIZIO N. 1, APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI  E
======================================================================

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese
di  luglio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 01/04/2017 di esame ed approvazione del progetto relativo alle opere di "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", che prevede un importo totale di Euro 44.100,34, di cui € 35.525,45 per lavori ed € 8.574,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n. 113 del 21.04.2017, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in MACERATA (MC), Via Po, 52, per l'importo di seguito indicato:
- Importo complessivo dell'appalto            Euro   35.525,45
- Oneri per la sicurezza                      Euro    1.065,76
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro   34.459,69
- Ribasso d'asta (33,75%)                     Euro   11.630,14
- Importo lavori al netto del ribasso         Euro   22.829,55
- Oneri per la sicurezza                      Euro    1.065,76
- Importo dei lavori a ragione di contratto
  al netto del ribasso del 33,75%             Euro   23.895,31

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di proteggere ulteriormente gli spazi antistanti i prospetti verso Piazza della Repubblica e su via della Croce dall’eventuale caduta di frammenti dalle facciate, in modo da poter riaprire al transito le suddette strade pubbliche in completa sicurezza;

VISTO l’ordine di servizio n. 1 del 12.05.2017, con il quale il D.L. ha ordinato all’Impresa SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. di provvedere al più presto alla realizzazione di una mantovana sul prospetto verso Piazza della Repubblica e su via della Croce, come meglio descritto negli elaborati tecnici, richiamati nei contenuti e non materialmente allegati per ragioni organizzative, depositati presso l’U.T.C.;

DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione di dette opere complementari ammonta ad € 10.442,23, che al netto del ribasso offerto dalla ditta SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. ammonta ad € 7.985,26, oltre IVA 22%;

DATO ATTO che si rende necessario impegnare ulteriori somme per l’esecuzione delle necessarie opere complementari, per un importo complessivo di € 9.965,21, così distinti:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		            10 442,23 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		              7 505,05 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		              2 937,18 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	3,00% di a.02	 	                 225,15 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		             7 279,90 	
 a.06 	 ribasso offerto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL 	33,75%		              2 456,97 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - CIG Z851F5B027  (a.01-a.06) 		             7 985,26 	
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                 208,84 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   14,34 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		              1 756,76 	
	 Totale somme a disposizione 		              1 979,94 	
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		              9 965,21 	

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al Cap. 2901-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il C.I.G. n. Z851F5B027 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”.

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento dei lavori in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto la fattispecie rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 16 del 03/04/2008, in quanto trattasi di lavori inferiori a quarantamila euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 02/01/2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di prendere atto dell’ordine di servizio n. 1 del 12.05.2017, con il quale il D.L. ha ordinato all’Impresa SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. di provvedere al più presto alla realizzazione di una mantovana sul prospetto verso Piazza della Repubblica e su via della Croce, come meglio descritto negli elaborati tecnici, richiamati nei contenuti e non materialmente allegati per ragioni organizzative, depositati presso l’U.T.C.

3) Di impegnare la somma di € 9.965,21, necessaria per l’esecuzione delle opere complementari, al Cap. 2901-0 del Bilancio 2017, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”.

4) Di approvare gli elaborati tecnico-economici relativi all’esecuzione delle opere complementari, richiamati nei contenuti e non materialmente allegati per ragioni organizzative, depositati presso l’U.T.C., che prevedono un importo complessivo di € 9.965,21, così distinti:
A 	 LAVORI 					
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		            10 442,23 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		              7 505,05 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		              2 937,18 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	3,00% di a.02	 	                 225,15 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		             7 279,90 	
 a.06 	 ribasso offerto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL 	33,75%		              2 456,97 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - CIG Z851F5B027  (a.01-a.06) 		             7 985,26 	
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                 208,84 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   14,34 	
 	 	 	 		 	
 b.03 	 IVA 		 	
 b.04 	 su lavori 	 	22% di a.07		              1 756,76 	
	 Totale somme a disposizione 		              1 979,94 	
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 		              9 965,21 	

5) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 14-07-17     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 14-07-17      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 14-07-17      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-07-17
al 29-07-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 14-07-17           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO