COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 904

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 390    DEL 06-12-19

======================================================================
OGGETTO: O.C.S.R. N. 48/2018 - PROGETTI FINANZIATI A VALERE
SULLE DONAZIONI SMS SOLIDALI - MANUTENZIONE E ADE= 
GUAMENTO  AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE
-  C.U.P. F34F19000030002  APPROVAZIONE PERIZIA DI
======================================================================

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese
di  dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO che:
•	La Regione Marche intende estendere anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, il servizio di elisoccorso per le emergenze sanitarie e di protezione civile, nell’ottica di garantire continuativamente e con la massima rapidità i relativi interventi;
•	Con Ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte con gli sms solidali;
•	Il Comitato dei Garanti per la supervisione sull’utilizzo dei fondi raccolti tramite donazioni solidali in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, nella seduta del 17 luglio 2017, ha individuato tra i progetti da finanziare quello finalizzato alla realizzazione di sette nuove elisuperfici ed all’adeguamento di quelle già esistenti, tra le quali quella situata nel Comune di Castelraimondo, mettendo a disposizione le citate risorse;
•	Con Ordinanza n. 48/2018 il Commissario Speciale per la Ricostruzione ha disciplinato le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni solidali, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie;
•	Il finanziamento assegnato al Comune di Castelraimondo ammonta a € 64.660,00;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 13.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ing. Carlo Tarozzi di Loreto per la parte impiantistica, per un importo complessivo di € 64.660,00.
•	Con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1831 del 10.7.2019 è stato definitivamente approvato il progetto proposto dal Comune di Castelraimondo, concedendo la somma di € 64.660,00 a titolo di contributo ammissibile; il quadro economico approvato è il seguente:
a 	 IMPORTO LAVORI    (OG3) 	€            23 797,45	
 	 di cui: 	 	 	
 a.01 	 LAVORI EDILI  	 	 €           15 661,81	
 a.02 	 OPERE IMPIANTISTICHE 	 €             8 135,64	
			   	
 a.03 	 Oneri per la sicurezza 	 	 €                 713,92	
 a.04 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €           23 083,53	
				
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%	 €                 237,97	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €                   13,07	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA	 	 €              4 816,24 	
 b.04 	 IVA spese tecniche 	22%	 €              1 059,57 	
 b.05 	 IVA sui lavori 	22%	 €              5 235,44	
 b.06	 Fornitura apparati (IVA 22% compresa) 	 €            27 897,42 	
 b.07 	 Imprevisti (IVA compresa) + ARROTONDAMENTO 	 €              1 602,83	
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     	 €           40 862,55	
				
                                   IMPORTO COMPLESSIVO     	 €            64 660,00 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 242 del 31.07.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE” alla Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4, per gli importi di seguito indicati:
- Importo complessivo dell'appalto            Euro  22.918,16
- Oneri per la sicurezza                      Euro     687,54
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso  Euro  22.230,62
- Ribasso d'asta (3,00%)                      Euro     666,92
- Importo dei lavori a ragione di contratto
  al netto del ribasso del 3,00%              Euro  22.251,24

CONSIDERATO CHE:
•	in fase esecutiva è stato necessario apportare variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali ed essendo motivate da oggettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra i quali il rifacimento completo della recinzione perimetrale in rete metallica, l’allargamento della fondazione del box per i quadri elettrici e la non necessità di effettuare la calibrazione e collaudo degli impianti;
•	L’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ing. Tarozzi per la parte impiantistica, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, hanno pertanto redatto apposita perizia di variante, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico comparativo;
•	A fronte di tali modifiche l’importo complessivo dell’intervento non varia rispetto a quello originario pari a  € 64.660,00, mentre l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento del 5,65%, pari a € 1.344,50. Pertanto il nuovo importo di contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è pari a € 24.410,32. Di conseguenza vengono variate anche le somme a disposizione, comprensive della realizzazione della targa in lamiera richiesta dalla Regione Marche.
•	Il Quadro tecnico economico risulta così rimodulato:

a 	 IMPORTO LAVORI (OG3) 	 €  25 141,95 	
	 DI CUI: 	 		
 a.01 	LAVORI EDILI 	 	 €  20 082,34 	
 a.02 	Impianto di terra	 €      755,41 	 	
 a.03 	Quadristica	 €      602,54 	 	
 a.04 	Conduttori e cavi	 €   1 212,84 	 	
 a.05 	Punti luce apparati AVL	 €   2 058,34 	 	
 a.06 	Segnalazione ostacoli	 €      430,48 	 	
 a.07 	Opere impiantistiche accessorie	 €               - 	 	
 a.08 	TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE	 	 €   5 059,61 	
			 	
 a.09 	 Oneri per la sicurezza 	 	 €    754,26 	
 a.10 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €  24 387,69 	
 a.11 	 ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL 	3,000%	 €    731,63 	
 a.12 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 €    754,26 	
 a.13 	 Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735) 	 €  24 410,32 	
				
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE 	 	
 b.01 	 Economie da ribasso, compresa IVA 22% 	 	 €      - 	
 b.02 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%	 €    701,21 	
 b.03 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €    38,52 	
 b.04 	 Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA 	 	 €   4 816,24 	
 b.05 	 IVA spese tecniche 	22%	 €   1 059,57 	
 b.06 	 IVA sui lavori 	22%	 €   5 370,27 	
 b.07 	 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa) 	 €    976,00 	
 b.09 	 Fornitura e posa in opera targa 	 	 €    310,00 	
 b.10 	 Fornitura apparati (IVA 22% compresa) 	 €  26 779,00 	
 b.11 	 Imprevisti (IVA compresa) 	 	 €      - 	
 b.12 	 ECONOMIE MATURATE 	 €    138,87 	
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  	 €  40 189,68 	
				
         IMPORTO COMPLESSIVO 	 €  64 600,00 	

VISTO l’impegno di spesa assunto con Det. 457 del 29/12/2018 al cap. 2710-1 del Bilancio 2018, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria ed adeguamento elisuperficie per abilitazione a volo notturno - reimpiego donazioni da sms solidali eventi sismici 2016”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7169 del 05/06/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

VISTO l’articolo 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in ordine alle competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di gare;
ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti spettanti al Responsabile del Servizio, secondo gli obiettivi definiti dalla stessa Giunta Comunale;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di approvare la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico, che prevede il medesimo importo totale di Euro 64.660,00, come appresso distinto:

a 	 IMPORTO LAVORI    (OG3) 	 €      25 141,95 	
 	 DI CUI: 	 	 	
 a.01 	LAVORI EDILI 	 	 €       20 082,34 	
 a.02 	Impianto di terra	 €              755,41 	 	
 a.03 	Quadristica	 €              602,54 	 	
 a.04 	Conduttori e cavi	 €           1 212,84 	 	
 a.05 	Punti luce apparati AVL	 €           2 058,34 	 	
 a.06 	Segnalazione ostacoli	 €              430,48 	 	
 a.07 	Opere  impiantistiche accessorie	 €                       -   	 	
 a.08 	TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE	 	 €         5 059,61 	
			   	
 a.09 	 Oneri per la sicurezza 	 	 €             754,26 	
 a.10 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 	 €      24 387,69 	
 a.11 	 ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL 	3,000%	 €             731,63 	
 a.12 	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	 €             754,26 	
 a.13 	 Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL  (C.I.G. Z7C2940735) 	 €       24 410,32 	
				
 b 	 SOMME A DISPOSIZIONE 	 	
 b.01 	 Economie da ribasso, compresa IVA 22% 	 	 €                      -   	
 b.02 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	1,00%	 €             701,21 	
 b.03 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 €               38,52 	
 b.04 	 Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA 	 	 €         4 816,24 	
 b.05 	 IVA spese tecniche 	22%	 €         1 059,57 	
 b.06 	 IVA sui lavori 	22%	 €         5 370,27 	
 b.07 	 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa) 	 €             976,00 	
 b.09 	 Fornitura e posa in opera  targa  	 	 €             310,00 	
 b.10 	 Fornitura apparati (IVA 22% compresa) 	 €       26 779,00 	
 b.11 	 Imprevisti (IVA compresa)  	 	 €                      -   	
 b.12 	 ECONOMIE MATURATE 	 €             198,87 	
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      	 €      40 249,68 	
				
                                   IMPORTO COMPLESSIVO 	 €       64 660,00 	

4) Di dare atto che la somma di Euro 64.660,00 è stata impegnata al cap. 2710-1 RP 2018 del Bilancio 2019, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria ed adeguamento elisuperficie per abilitazione a volo notturno - reimpiego donazioni da sms solidali eventi sismici 2016”.

5) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                           F.to ZENOBI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 06-12-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 06-12-19      F.to Bigiaretti Arch. Cesare

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 06-12-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-12-19
al 21-12-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 06-12-19           Bigiaretti Arch. Cesare