COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 950

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 406    DEL 10-12-18

======================================================================
OGGETTO: LAVORI DI "DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA
PUBBLICA SITO IN FRAZ. CASTEL S. MARIA, VIA VARANO 
N.95  / VIA OTTONI N. 40, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - APPROVAZIO=
======================================================================

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese
di  dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

RICHIAMATA la propria determinazione n. 276 del 13/09/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta EDILFLASH S.R.L.S., con sede a Macerata (MC), Via Bramante 10, Cod. Fisc. e P. IVA 01940030438, per l'importo di € 15.404,13, oltre IVA 22% corrispondente ad € 3.388,91, così per un importo complessivo di € 18.793,04, con un ribasso pari al 6,50% – C.I.G. Z6424E8CEB;

VISTO che in corso d’opera si è constatata la necessità di modificare alcune lavorazioni, quali l’allargamento dell’apertura su via Varano per consentire un più agevole passaggio del materiale di risulta verso l’esterno;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in aumento per un importo dei lavori di € 17.832,16, comprensivo degli oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 903,14, porta ad un importo netto di contratto pari ad  € 16.929,02;

VISTO l’ordine di servizio n. 1 del 18/10/2018;

PRESO ATTO che, a fronte delle variazioni apportate, l’importo totale di Euro 22.000,00 a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 25/07/2018 non subisce modifiche e che quindi non vi sono aumenti di spesa;

VISTO l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 467 del 29.12.2017 al cap. 2901-0 del Bilancio 2017, avente ad oggetto "INTERVENTI DI RECUPERO SU BENI PUBBLICI - EVENTI SISMICI DEL 2016";

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 31/10/2018, come da apposito verbale;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale, regolarmente sottoscritti senza riserve dall’impresa esecutrice dei lavori, dal direttore dei lavori e dal R.U.P.;

CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e che, sulla base dei summenzionati atti contabili, può essere pagata la somma complessiva di Euro 16.929,02, relativa ai lavori eseguiti ed alle spese sostenute, oltre IVA 22% come per legge, per un ammontare complessivo di € 20.653,40;

VISTA la fattura n. 3 del 28/11/2018, emessa dalla Ditta EDILFLASH S.R.L.S., con sede a Macerata (MC), Via Bramante 10, Cod. Fisc. e P. IVA 01940030438, per un importo di € 16.929,02, oltre IVA 22% corrispondente ad € 3.724,38, così per un totale di € 20.653,40;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_14154422, con scadenza validità al 26.03.2019, dal quale si evince la regolarità della Ditta EDILFLASH S.R.L.S., con sede a Macerata (MC), Via Bramante 10, Cod. Fisc. e P. IVA 01940030438;

VISTO che i compensi per le attività tecnico-amministrative di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. trovano copertura nelle somme a disposizione previste nel progetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 02/01/2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di approvare l’ordine di servizio n. 1 del 18/10/2018.

3) Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di "DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA SITO IN FRAZ. CASTEL S. MARIA, VIA VARANO N.95 / VIA OTTONI N. 40, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", nonché la relazione sul conto finale, regolarmente sottoscritti senza riserve dall’impresa esecutrice dei lavori, dal direttore dei lavori e dal R.U.P.

4) Di liquidare la fattura n. 3 del 28/11/2018, emessa dalla Ditta EDILFLASH S.R.L.S., con sede a Macerata (MC), Via Bramante 10, Cod. Fisc. e P. IVA 01940030438, per un importo di € 16.929,02, oltre IVA 22% corrispondente ad € 3.724,38, così per un totale di € 20.653,40.

5) Di liquidare la somma di Euro 277,95, già ridotta del 20% ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., comprensiva di contributi Cassa Pensioni ed IRAP, come segue:
- all'Ing. Gian Mario Brancaleoni la somma di Euro 166,77;
- all’Arch. Cesare Bigiaretti la somma di Euro 111,18;

6) Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto determinativo, pari ad Euro 20.931,35, al Cap. 2901-0 RP2017 del Bilancio 2018, recante “Interventi di recupero su beni pubblici - eventi sismici del 2016”.

7) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 10-12-18     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

======================================================================
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 10-12-18      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 10-12-18      F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-12-18
al 25-12-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 10-12-18           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO