COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  156 DEL  12-09-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  E  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI VARIANTE OPERE
DI  "DELOCALIZZAZIONE  DI  UN'ATTIVITA  PRODUTTIVA 
DANNEGGIATA  DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E
SUCC.  AI  SENSI  DELLO.C.D.P.C. N. 408 del 18/11/
2016"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese
di settembre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO CHE:
•	A seguito degli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi l’edificio sede dell’attività commerciale denominata “Agriripalta srl” di Calmanti Giorgio, sita in via u. Betti n.52, ha subìto forti lesioni che ne hanno comportato l’inutilizzabilità ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n.361 del 23/11/16;
•	Ai sensi dell’ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile N.408 del 18/11/2016 l’attività succitata ha presentato istanza di delocalizzazione assunta al protocollo comunale col n. 12577 del 08/11/2017;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alle opere di “DELOCALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCC. AI SENSI DELL’O.C.D.P.C. N. 408 del 18/11/2016”, che prevede un importo totale di Euro 43.000,00, come appresso distinto:

 A 	 LAVORI 	 	 	 	 	
						
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            10.886,68 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		            10.886,68 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                 326,60 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		           10.560,08 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 	 	 	 	 	
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                 217,73 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   12,06 	
 b.03 	 FORNITURA E POSA IN OPERA  MODULO PREFABBRICATO 		            21.000,00 	
 b.04 	 nuovo allaccio fognario e idrico 	 	 		              2.081,06 	
 b.05 	 nuovo allaccio elettrico 	 	 		                 670,32 	
 	 IVA 		 	
 b.06 	 su lavori 	 	22% di a.07		              2.395,07 	
 b.07 	 su fornitura  		22% di b.03		              4.620,00 	
 b.08 	 su allaccio fognario e idrico 		10% di b.04		               208,11   	
 b.09 	 su allaccio elettrico 		22% di b.05		                 147,47 	

 b.06 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                 761,50 	

			 Totale somme a disposizione 		            32.113,32 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				            43.000,00 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 160 del 31/05/2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta “EDILIZIA MACCHIONI FABIO”, con sede in Camporotondo di Fiastrone (MC), C.da Palombare, 14/A,  con un ribasso percentuale del 8,00%, così per l’importo di contratto pari a € 10.041,87 al netto del ribasso di € 844,81.

VISTO che in corso d’opera si è evidenziato il bisogno di distanziare maggiormente i moduli prefabbricati dalla vicina cabina ENEL, per  una miglior fruizione e manutenzione di entrambi i manufatti con la conseguente necessità di eseguire alcune lavorazioni diverse rispetto a quanto inserito in progetto, finalizzate a garantire il corretto utilizzo dell’area conseguendo anche un certo risparmio economico.
Considerato che tali variazioni consistono essenzialmente nel diverso posizionamento del misuratore di corrente con realizzazione di linea elettrica esterna, diversa posizione dei sanitari, ridimensionamento della platea di fondazione e modifica alla ringhiera. 
CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, le opere subiscono una variazione in diminuzione per un importo complessivo dei lavori pari a € 10431,87, comprensivo di € 312,96 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 809,51, risulta pari ad € 9.622,36, rimanendo comunque invariato l’importo della perizia rispetto a quello originario, pari a € 43.000,00;
VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale invariato di € 43.000,00, come appresso distinto:
						
 A 	 LAVORI 					
						
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		                  10.431,87 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		                  10.431,87 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                       312,96 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		                 10.118,91 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta 8% 	 	 		                       809,51 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta EDILIZIA MACCHIONI DI MACCHIONI FABIO (a.01-a.06) 		                   9.622,36 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                       217,73 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                         12,06 	
 b.03 	 FORNITURA E POSA IN OPERA  MODULO PREFABBRICATO 		                  21.000,00 	
 b.04 	 nuovo allaccio fognario e idrico 	 	 		                    2.081,06 	
 b.05 	 nuovo allaccio elettrico 	 	 		                       670,32 	
 	 IVA 			
 b.06 	 su lavori 	 	22% di a.07		                    2.116,92 	
 b.07 	 su fornitura  		22% di b.03		                    4.620,00 	
 b.08 	 su allaccio fognario e idrico 		10% di b.04		                     208,11   	
 b.09 	 su allaccio elettrico 		22% di b.05		                       147,47 	
 						
 b.06 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                       761,50 	
 	 	 	 		 	
 C 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                    1.542,48 	
 					 	
			 Totale somme a disposizione 		                  33.377,64 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				                  43.000,00 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "DELOCALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCC. AI SENSI DELL’O.C.D.P.C. N. 408 del 18/11/2016”,  predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	raffronto tra il QTE di variante e di progetto;
•    quadro comparativo;
•    elaborati grafici;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale invariato pari a € 43.000,00, come appresso distinto:

						
 A 	 LAVORI 					
						
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		                  10.431,87 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		                  10.431,87 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                       312,96 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		                 10.118,91 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta 8% 	 	 		                       809,51 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta EDILIZIA MACCHIONI DI MACCHIONI FABIO (a.01-a.06) 		                   9.622,36 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                       217,73 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                         12,06 	
 b.03 	 FORNITURA E POSA IN OPERA  MODULO PREFABBRICATO 		                  21.000,00 	
 b.04 	 nuovo allaccio fognario e idrico 	 	 		                    2.081,06 	
 b.05 	 nuovo allaccio elettrico 	 	 		                       670,32 	
 	 IVA 			
 b.06 	 su lavori 	 	22% di a.07		                    2.116,92 	
 b.07 	 su fornitura  		22% di b.03		                    4.620,00 	
 b.08 	 su allaccio fognario e idrico 		10% di b.04		                     208,11   	
 b.09 	 su allaccio elettrico 		22% di b.05		                       147,47 	
 						
 b.06 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                       761,50 	
 	 	 	 		 	
 C 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                    1.542,48 	
 					 	
			 Totale somme a disposizione 		                  33.377,64 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				                  43.000,00 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 52 del 02/01/2018, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 07/09/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 07/09/2018

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "DELOCALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCC. AI SENSI DELL’O.C.D.P.C. N. 408 del 18/11/2016”,  predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	raffronto tra il QTE di variante e di progetto;
•    quadro comparativo;
•    elaborati grafici;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale invariato pari a € 43.000,00, come appresso distinto:

						
 A 	 LAVORI 					
						
 a.01 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG2) 		                  10.431,87 	
 a.02 	 di cui:   SOGGETTI A RIBASSO 		                  10.431,87 	
 a.03 	              NON SOGGETTI A RIBASSO 		 	
 a.04 	 Sicurezza inclusa (SI) su lavori soggetti a ribasso 	 	3,00% di a.02	 	                       312,96 	
 a.05 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   (a.02-a.04) 		                 10.118,91 	
 						
 a.06 	 ribasso offerto ditta 8% 	 	 		                       809,51 	
 a.07 	 Importo netto contratto ditta EDILIZIA MACCHIONI DI MACCHIONI FABIO (a.01-a.06) 		                   9.622,36 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00% di a.01		                       217,73 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                         12,06 	
 b.03 	 FORNITURA E POSA IN OPERA  MODULO PREFABBRICATO 		                  21.000,00 	
 b.04 	 nuovo allaccio fognario e idrico 	 	 		                    2.081,06 	
 b.05 	 nuovo allaccio elettrico 	 	 		                       670,32 	
 	 IVA 			
 b.06 	 su lavori 	 	22% di a.07		                    2.116,92 	
 b.07 	 su fornitura  		22% di b.03		                    4.620,00 	
 b.08 	 su allaccio fognario e idrico 		10% di b.04		                     208,11   	
 b.09 	 su allaccio elettrico 		22% di b.05		                       147,47 	
 						
 b.06 	 Imprevisti, lavori su fattura e arrotondamento, compresa IVA 		                       761,50 	
 	 	 	 		 	
 C 	 Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte) 		                    1.542,48 	
 					 	
			 Totale somme a disposizione 		                  33.377,64 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				                  43.000,00 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 52 del 02/01/2018, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 17-09-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  17-09-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17-09-18 al 02-10-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO