COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  118 DEL  19-07-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE
EUROPA  N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 
DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - ESAME ED APPROVAZIO=
NE PERIZIA DI VARIANTE

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese
di luglio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	A seguito delle forti scosse di terremoto del 26/10/2016 e di quelle dei giorni seguenti, l’edificio sito in viale Europa nn. 62-68 ha subito forti lesioni che ne hanno compromesso la stabilità, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, tanto da rendere necessaria l’interdizione al transito pedonale e veicolare di parte della strada pubblica antistante, che è stata immediatamente delimitata con transennamento;
•	Dalle valutazioni condotte dall’Ufficio Tecnico Comunale, è emersa la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza, in quanto il livello di danno strutturale dell’immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità e la riattivazione dei servizi essenziali;
•	Considerata l’urgenza di procedere con l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e causa carenza di organico, si è reso necessario affidare a professionista esterno in possesso dei necessari requisiti le attività di progettazione, in quanto i dipendenti dell’Ufficio Tecnico sono impegnati a tempo pieno nella gestione dell’emergenza;
•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 85 del 03/04/2017, R.G. n. 193, l’attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio sito in via IV novembre n. 21 sono state affidate all’Ing. Stefano Sabbatini, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Macerata al n. 999, con studio in Castelraimondo, Via Piancatelli, 76, per un corrispettivo pari al 5% dell’importo dei lavori, oltre C.P. e IVA come per Legge, stimato pertanto in via preventiva in € 1.915,58, oltre c.p. 4% pari ad € 76,62 ed IVA 22% pari ad € 438,28, così per un totale di € 2.430,49.
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Stefano Sabbatini, relativo alle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", che prevede un importo totale di Euro 49.989,48, come appresso distinto:

A	 LAVORI 					
	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		              38 311,60 	
a	 Sicurezza inclusa (SI) 	 	3,00%	 	                1 149,35 	
	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		             37 162,25 	
						
B	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
a.01	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                   766,23 	
a.02	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                     52,61 	
a.03	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 	 		                1 992,20 	
	 	 	 		 	
b	 IVA 		 	
b.01	 su lavori 	 	22%		                8 428,55 	
b.02	 su spese tecniche 	 	22%		                   438,28 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		              11 677,88 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				              49 989,48 	

•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 135 del 17/05/2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Lopergolo Costruzioni S.r.l., con sede in MATELICA (MC), Corso Vittorio Emanuele n. 133 – C.I.G. Z601E74F4E, con un ribasso percentuale del 27,998%, così per l’importo di contratto pari a € 27.906,91

VISTO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera, consistenti nella realizzazione di sbadacchiature aggiuntive interne in legno, di ulteriori perforazioni per il passaggio dei cavi, dello smontaggio di altre due vetrine e nell’aggiunta di elementi in acciaio di raccordo tra i profilati UPN, rendendosi pertanto necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le relative risorse per eseguire maggiori e diversi lavori;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, l’importo dei lavori subisce una variazione in aumento per un importo complessivo di € 45.309,01, comprensivo di € 860,15 per oneri di sicurezza, che, al netto del ribasso di € 7.786,64, risulta pari ad  € 37.522,37, rimanendo comunque invariato l’importo della perizia rispetto a quello originario, pari a € 49.989,48;

VISTA la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante;
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 49.989,48, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            45 309,01 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            16 637,45 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            28 671,56 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	                 860,15 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           27 811,41 	
 						
 	 ribasso offerto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL 	 	27,998%		              7 786,64 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                 860,15 	
 	 Importo netto contratto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL - CIG Z601E74F4E 		           37 522,37 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                 906,18 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   62,22 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 	 		              1 992,20 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		              8 254,92 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                 438,28 	
 					 	
 d 	 Economie di gara (residuo ribasso d'asta e relative imposte) 		                 813,30 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		            12 467,11 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				            49 989,48 	

RITENUTO che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 49.989,48, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            45 309,01 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            16 637,45 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            28 671,56 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	                 860,15 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           27 811,41 	
 						
 	 ribasso offerto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL 	 	27,998%		              7 786,64 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                 860,15 	
 	 Importo netto contratto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL - CIG Z601E74F4E 		           37 522,37 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                 906,18 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   62,22 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 	 		              1 992,20 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		              8 254,92 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                 438,28 	
 					 	
 d 	 Economie di gara (residuo ribasso d'asta e relative imposte) 		                 813,30 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		            12 467,11 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				            49 989,48 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 13/07/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 13/07/2017 
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                        Dr.ssa Paola Cingolani

 LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica, dal Responsabile del servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la prima perizia di variante delle opere di "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 62-68, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI", predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:
•	relazione tecnica di variante,
•	computo metrico di variante,
•	elenco prezzi di variante,
•	quadro tecnico economico di variante; 
•	quadro tecnico riepilogativo e comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia, che prevede un importo totale di € 49.989,48, come appresso distinto:

A 	 LAVORI 					
 a 	 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1) 		            45 309,01 	
 a.01 	 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            16 637,45 	
 a.02 	 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 	 	 		            28 671,56 	
 a.03 	 Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso  (SI) 	 	3,00%	 	                 860,15 	
 	 	 	 		 	
 	 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 		           27 811,41 	
 						
 	 ribasso offerto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL 	 	27,998%		              7 786,64 	
 	 Sicurezza inclusa (SI) 		                 860,15 	
 	 Importo netto contratto ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL - CIG Z601E74F4E 		           37 522,37 	
 						
 B 	 SOMME A DISPOSIZIONE 					
 b.01 	 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 	 	2,00%		                 906,18 	
 b.02 	 IRAP su incentivi art. 113 	 	 		                   62,22 	
 b.03 	 Spese tecniche per progettazione esterna, C.P. 4% incl. 	 	 		              1 992,20 	
 	 	 	 		 	
 c 	 IVA 		 	
 c.01 	 su lavori 	 	22%		              8 254,92 	
 c.02 	 su spese tecniche 	 	22%		                 438,28 	
 					 	
 d 	 Economie di gara (residuo ribasso d'asta e relative imposte) 		                 813,30 	
 					 	
	 Totale somme a disposizione 		            12 467,11 	
						
	                                   IMPORTO COMPLESSIVO 				            49 989,48 	

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Mario Brancaleoni, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 50 del 02/01/2017, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti.

5) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 25-07-17                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  25-07-17             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-07-17 al 09-08-17 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO