Determinazione n°	393	del	25-09-2018	N° Cron. Gen.	651	data reg.	25-09-2018	
Oggetto:	Interventi minimi necessari per il ripristino anche parziale della viabilità lungo la strada perla frazione Agore Riappalto" CUP F64E16000140002 - C.I.G. 7472705F3B (variante) - Impegno somme 	

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venticinque, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-	con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 16/07/2016 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 157.103,89 per lavori ed € 72.896,11per somme a disposizione dell’amministrazione;
-	con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.96 del 04/05/2017 venne preso atto della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.161 (RG 316) del 03/05/2017 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per un importo contrattuale di € 98.474,21 oltre IVA;
-	in data 24/05/2017 con rep.2305 venne stipulato il contratto d’appalto con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl per l’importo di € 98.474,21 oltre IVA di legge;
-	con verbale in data 24/05/2017 venne effettuata la consegna dei lavori;
-	deliberazione della G.C. n.60 del 05/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto un atto d’indirizzo per la risoluzione del contratto di che trattasi e per l’appalto delle opere di completamento in somma urgenza per le motivazioni in essa riportate ;
-	con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.118 del 10/04/2018 si è proceduto alla risoluzione del contratto rep.2305 del 24/05/2017, registrato ad Ascoli Piceno il 26/05/2017 al n.1994 Serie 1T, con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl;
-	con deliberazione della G.C. n.61 del 11/04/2018 sono stati approvati il computo metrico aggiornato dei lavori necessari alla conclusione dell’intervento in oggetto, ed il relativo QTE, per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 145.525,31 per lavori ed € 84.474,69 per somme a disposizione;
-	si è concluso il procedimento di cui all’art.110 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con esito negativo;
-	con verbale di somma urgenza in data 19/04/2018, prot.6336 si affidava sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. con sede ad Acquasanta Terme (AP) in contrada Madonnella n.85/B;
-	con D.G.C. n.108 del 07/06/2018 con la quale, tra l’altro:
1.	è stata approvato il verbale di somma urgenza del 19/04/2018, prot. 6336;
2.	preso atto ed approvato il costo complessivo del lavoro in oggetto di € 138.231,35 oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
-	con propria determinazione n.226 del 11/06/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per l’importo di € 138.231,35, al netto del ribasso offerto del 5,20%, comprensivi di € 3.356,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.900,00 per oneri per la sicurezza aggiuntiva oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
-	in data 19/06/2018 con rep.2315 è stato sottoscritto il contratto d’appalto per l’importo di € 138.231,35;
-	con propria determinazione n.249 del 28/06/2018 è stato approvato il 1° SAL dei lavori e liquidato l’importo di € 102.782,55 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, oltre l’IVA di legge, per complessivi € 125.394,71, come da Certificato di pagamento n.1;
-	con deliberazione della G.C n.183 del 20/09/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo complessivo di € 230.000,00  di cui € 149.767,42 per lavori netti ed € 80.232,58 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che:
-	la variante prevede un aumento di € 11.536,07 dell’importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto;
-	si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 14.074,01, di € 11.536,07 per lavori ed € 2.537,94 IVA 22%,  disponibile al cap.2835/64 – impegno n.400;
-	la predetta somma è reperibile all’interno del quadro economico della variante approvata con deliberazione della G.C. n.183 del 20/09/2018;

VISTI:
-	il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
-	il D.Lgs.50/2016; 
-	il DPR 207/10 per la parte ancora vigente; 

DETERMINA

-	la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1)	DI IMPEGNARE, in favore della ditta appaltatrice, la somma di € 14.074,01 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.183 del 20/09/2018, al cap.2835/64 con impegno n.400;
2)	DI DARE ATTO che il C.I.G. è quello del contratto, cioè 7472705F3B;
3)	DI DARE ATTO che la predetta somma:
a.	è reperibile all’interno del quadro economico della variante approvata con deliberazione della G.C. n.183 del 20/09/2018;
b.	è interamente esigibile nell’anno 2018;
4)	DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’intervento di € 230.000,0 è finanziato con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia n.38/ITE del 23/03/2016, la cui somma, imputata ai cap.2835/60 – 2835/64.

Acquasanta Terme, lì 25-09-2018	Il Responsabile del Servizio	
	(Arch. Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  26-09-2018 al 11-10-2018.

Acquasanta Terme, lì 26-09-2018		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi