COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  87   Del  11-06-19

Oggetto:	SISMA  2016. Demolizione parziale edificio danneg=
giato  dal sisma su pubblica via in Fraz. Rocca di
Montecalvo distinto al F. 67 P.lle 194-195-398_Ap=
provazione variante

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di giugno alle ore 12:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

 DOTT. STANGONI SANTE  	SINDACO  	P	
CAPRIOTTI LUIGI  	ASSESSORE  	P	
IONNI ELISA  	ASSESSORE  	A	
TROLI STEFANO  	ASSESSORE  	A	
CORTELLESI ALESSANDRO  	ASSESSORE  	P	

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n.      3, assenti n.      2
Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-	alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
-	l’evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
-	in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
-	in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
-	si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
-	esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 
-	in data 18/01/2017 si sono registrate nuove fortissime scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
-	con deliberazione di Giunta comunale n.123 del 28/06/2018, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 42.500,00, di cui € 38.038,06 per lavori ed € 4.461,94 per somme a disposizione;
-	con deliberazione di Giunta comunale n.132 del 10/07/2018, è stato corretto un m errore materiale contenuto nella suddetta delibera, confermando l’approvazione del progetto e degli importi indicati;
-	con determinazione del Responsabile del Servizio n. n.302 del 20/07/2018, i lavori in oggetto furono affidati alla ditta Castelletti Luigi per un importo netto dei lavori pari ad € € 32.252,66, giusto ribasso offerto del 16,01% sull’importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 3.225,27 per complessivi € 35.477,93;

VISTO che:
-	durante l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, il direttore dei lavori Arch. Angela giovanna Leuzzi ha constatato le difficoltà tecniche e di gestione del cantiere nell’esecuzione della demolizione di porzioni dell’edificio, verificando la concreta possibilità di non procedere a completa demolizione delle suddette parti dell’immobile oggetto di intervento e valutando che, ai fini della tutela della pubblica incolumità, le porzioni preservabili non costituiscono rischio, circostanze non prevedibili in fase di stesura del progetto iniziale;
-	la variante in questione è configurabile nella casistica di cui all’art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che:
-	quanto esposto dal Direttore dei Lavori è condivisibile e pertanto ricorrono i motivi di cui all’art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-	le modifiche introdotte non modificano la natura dell’opera;

PRESO ATTO che, stante quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha promosso la redazione della perizia di variante n.1, composta dai seguenti elaborati:
-	schema atto di sottomissione
-	quadro economico di raffronto
-	computo metrico di variante

ed avente il seguente quadro economico:
IMPORTO LORDO LAVORI 	€ 45.431,92		
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 1.901,90		
Importo netto dei lavori di variante (rib.16,01%) compresi 	€ 38.462,76	€ 38.462,76	
Somme a disposizione:			
IVA 10% lavori	€ 3.846,28		
SOMME A DISPOSIZIONE	3.846,28	€ 3.846,28	
TOTALE VARIANTE	€ 42.309,04	
da cui si evidenzia un aumento di € 6.831,11 dell’importo netto dei lavori rispetto ai lavori di affidamento oltre IVA;

RITENUTO necessario approvare la variante in argomento;

VISTO che:
-	l’importo totale della perizia, considerando il recupero degli imprevisti, risulta in aumento di € 6.172,98;
-	ricorrono i motivi di cui all’art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che alla maggiore somma di € 6.831,11 necessaria per la realizzazione dell’intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;
VISTI:
-	il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
-	il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
-	gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri:
-	di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
-	di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE:
-	la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 42.309,04 di cui € 38462,76 per lavori netti ed € 63.846,28 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;
-	gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
-	i nuovi prezzi concordati;

DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 42.309,04 necessaria per la realizzazione dell’intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000
					Il Responsabile del Servizio LL.PP.
					       (Arch. Stefano Lo Parco)

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	         			     (Dott. Pietro Fiscaletti)

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	
 DOTT. STANGONI SANTE	DOTT. SSA FERRETTI SIMONA	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La  su estesa  deliberazione  viene pubblicata oggi_________________  all'Albo Pretorio, come prescritto dall’ art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000,  per 15 giorni consecutivi dal_______________ al_________________ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n._________

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                 DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione é divenuta esecutiva il ________________  perché:
•	immediatamente eseguibile.
•	decorsi 10 giorni dall’ ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°,  del T.U. n° 267/2000.

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               DOTT. SSA FERRETTI SIMONA