COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.42 del Reg. Data 15-02-019

Oggetto: DEMOLIZIONE  DI  EDIFICIO  IN  LOCALITA' FONTE PE=
SCHIERA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016-
APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   quindici del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI E RICHIAMATI gli atti: 

•	Ordinanza Sindacale n. 326 del 17/10/2018, con la quale si ordinava la demolizione del fabbricato sito in C.da Fonte Peschiera, distinto catastalmente in fg. 3 part.lla 275, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

•	Verbale di somma Urgenza del 16/11/2018, con il quale è stata affidata all’Impresa Imperatori Marco di Caldarola (MC), in quanto ditta specializzata, l’esecuzione di tale intervento, offrendo uno sconto del 13% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 10.429,48, per un totale di € 9.113,61, al netto dell’Iva di legge e comprensivi dei costi di sicurezza pari a € 307,40

•	Determina n. 360 del 22/11/2018, con la quale sono stati approvati il predetto Verbale di Somma Urgenza e il quadro economico dell’intervento, così strutturato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo totale dei Lavori						€ 10.429,48
Di cui	Oneri per la sicurezza				€ 307,40
Importo dei lavori non soggetti a ribasso	-13%	€ 10.122,08

B)	SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti e spese su fattura				€ 527,57
IVA sui lavori				10%		€ 1.042,95
Totale somme a disposizione						€ 1.570,52
TOTALE								€ 12.000,00

PRECISATO che i lavori sono iniziati in data 16/11/2018, come risulta dal Verbale di Somma Urgenza sopra citato e che i lavori dovevano essere conclusi entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti da tale data;

VISTO che in data 03/12/2018 è stato sottoscritto un Verbale di concorda mento nuovi prezzi, relativamente alla posa di rete di protezione a recinzione dell’area, al fine di evitare il possibile avvicinamento dei mezzi agricoli operanti nei terreni limitrofi;

DATO ATTO che, in seguito all’ultimazione dei lavori, avvenuta il 04/12/2018, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. 13830 del 10/12/2018, con il quale è stato approvato il quadro economico finale, distinto così come segue:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo totale dei Lavori					€ 10.908,98
Di cui	Oneri per la sicurezza				€ 307,40
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 10.601,58
Ribasso offerto			13%		€ 1.378,21
	Importo dei lavori in appalto						€ 9.530,77

B)	SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti e spese su fattura				€ 0,00
IVA sui lavori				10%		€ 953,08
Totale somme a disposizione						€ 953,08
TOTALE								€ 10.483,85
ACCERTATO che l’Impresa esecutrice Imperatori Marco di Caldarola (MC) ha presentato regolare fattura:

•	FATTPA 2_19 del 31/01/2019, per un importo complessivo pari a € 10.483,85 (di cui € 9.530,77 per lavori ed € 953,08 per IVA al 10%);

CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione si provvederà all’inserimento dello stesso sul portale di rendicontazione speciale regionale Cohesion Work Pa;

VERIFICATO che nel capitolo 2838-1 risultano imputati:

•	€ 12.000,00 con impegno n. 405/2018, relativi al quadro tecnico economico iniziale di progetto, approvato con propria Determinazione n. 360 del 22/11/2018;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva dell’Impresa Imperatori Marco prot. INAIL_14103503 con scadenza in data 22/03/2019;

DETERMINA

1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2)	DI APPROVARE il Certificato di Regolare esecuzione, prot. 13830 del 10/12/2018 con il quale è stato approvato il quadro economico finale, riportato in premessa;

3)	DI LIQUIDARE la fattura intestata all’Impresa esecutrice dei lavori, Imperatori Marco di Caldarola (MC), n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019, per un importo complessivo pari a € 10.483,85 (di cui € 9.530,77 per lavori ed € 953,08 per IVA al 10%), assunto con impegno n. 405/2018 ed imputato al cap. 2838-1;

4)	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento, previa emanazione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 e ad erogazione avvenuta.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 20-02-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 20-02-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 20-02-2019 al 07-03-2019.

Lì 20-02-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO