COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.67 del Reg. Data 04-03-019

Oggetto: SISMA 2016 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 DELOCA=
LIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. CIARLAN=
TINI" DI SAN GINESIO MC

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 06/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DI UNA PARTE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “OSTELLO” PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA”  redatto dall‘Ufficio Tecnico per una spesa complessiva presunta di € 139.997,00 come appresso dettagliato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori					€      127.270,00 

B)	SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 10% su lavori 				€        12.727,00

Importo complessivo progetto iniziale		€    139.997,00

-	Con medesima Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 06/11/2018 venivano approvati i verbali di somma urgenza con indicato l’affidamento dei lavori nonché gli elaborati grafici, come depositati agli atti.

CONSIDERATO che 
o	durante l’esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali, al fine di adeguare le opere previste alla reale situazione dei luoghi rilevata in corso d’opera;
o	per l’approvazione delle stesse è stata predisposta una variante suppletiva finalizzata all’esecuzione di opere non differibili in conseguenza dei rinvenimenti imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale;

VISTI gli elaborati trasmessi dall’Ing. Milillo istruttore tecnico presso codesta pubblica amministrazione iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Ancona n. 2524 in qualità di Direttore dei Lavori:
-	Relazione Tecnico-illustrativa di Variante n1, 
-	Elaborato Grafico di variante n.1;
-	Elaborato Economico di variante n.1;
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi.

DATO ATTO che, ferma restando la spesa globale prevista, l’importo dei lavori di progetto viene ad essere così modificato:
	lavori  in appalto							
A1	Importo lavori edili			 				 63.468,20 € 
A2	oneri per la Sicurezza (non soggetta a ribasso)				 -    € 
A3	ribasso percentuale lavori a base di gara	4%			  -2.538,73 € 
A4	Lavori impianto idrico-riscaldamento			 		19.064,00 € 
A5	Lavori impianto elettrico						 14.896,00 € 
A5	Nuovi infissi							 	   5.387,95 € 
A6	Sistemazione esterna, Arredo, Lavori su copertura fabbricato scuole 
e Altro IVA 22%							   3.928,84 €
A7	Sistemazione esterna, Arredo, Lavori su copertura fabbricato scuole 
e Altro IVA 10%							  20.321,13 €
A	totale importo lavori				 			124.527,40 € 
					
	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B4	Imprevisti sui lavori 					
B8	Art. 113 comma 2 D.gls 50/2016 2% (A3*2%)			   2.545,40 € B12	Iva 10% sui lavori (A*10%)						 12.059,86 € B12	Iva 22% sui lavori (A*10%)						      864,34 € B12	Iva 10% su imprevisti lavori (B4* 10%)				   	   -   € 
B	totale somme a disposizione dell'Amministrazione		 15.469,60 € 
	SPESA COMPLESSIVA 					 139.997,00 € 

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

CONSIDERATO che le modifiche delle singole lavorazioni non hanno comportato scostamenti con il prezzo netto dei lavori;

PRESA VISIONE dei preventivi forniteci per le lavorazioni suppletive previste in variante cosi distinte:
a)	Fornitura antincendio della ditta Antincendio Tolentino snc con sede in Via G.Rossini 45 Tolentino (MC) consistente in 321,00 € + IVA=391.62 €;
b)	Ripristino connesione Wifi della ditta Fidoca srl con sede legale a Via Val di Fiastra 6/g Ripe San Ginesio (MC) consistente in 100,00 € + IVA=122.00 €;
c)	Pensilina in alluminio della ditta FaberBruè con sede a C.da Casagatti snc San Ginesio (MC) consistente in 200,00 € +IVA= 244.00 €;
d)	Fornitura mobilio della ditta Centroscuola di Carpineti Renzo con sede P-zle Mercurio 55 Macerata consistente in 3307,84 €+IVA= 4035,56 €

RITENUTE tali offerte economiche congrue;

DATO ATTO che il CIG assegnato per tali interventi supplettivi è: 
a.	Fornitura antincendio		CIG:	ZC7280B74F;
b.	Ripristino connesione Wifi	CIG:	Z7D280B7F4;
c.	Pensilina in alluminio 	CIG:	ZAA280B560;
d.	Fornitura mobilio 		CIG:	Z7127CFDAA;

DATO ATTO che le imprese esecutrici assumono l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Andrea Milillo;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel verbale di affidamento lavori, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma già impegnata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 06/11/2018 ella Giunta Comunale e pari a € 139.997,00;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DI UNA PARTE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “OSTELLO” PER LA DELOCALIZZAZIONE PTEMPORANEA DELLA SCUOLA “redatto dall’Ing. Andrea Milillo, con la quale si conferma la spesa totale sostenuta di € 139.997,00, suddivisa come sopra descritto;
3.	DI AFFIDARE :
a)	la Fornitura antincendio alla ditta Antincendio Tolentino snc con sede in Via G.Rossini 45 Tolentino (MC) consistente in 321,00 € + IVA=391.62 €;
b)	il Ripristino connesione Wifi alla ditta Fidoca srl con sede legale a Via Val di Fiastra 6/g Ripe San Ginesio (MC) consistente in 100,00 € + IVA=122.00 €;
c)	la realizzazione della pensilina in alluminio alla ditta FaberBruè con sede a C.da Casagatti snc San Ginesio (MC) consistente in 200,00 € +IVA= 244.00 €;
d)	la fornitura di mobilio alla ditta Centroscuola di Carpineti Renzo con sede P-zle Mercurio 55 Macerata consistente in 3307,84 €+IVA= 4035,56 €

4.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 08-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 08-05-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 08-05-2019 al 23-05-2019.

Lì 08-05-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO