COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.195 del Reg. Data 25-06-018

Oggetto: LAVORI  DI  MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICO=
LANTE  SITO  IN VIA DEL MERCATO E P.ZZA A. GENTILI
DI  PROPRIETA'  SIG.RA PAZZELLI MARIA, DANNEGGIATO
DAGLI  EVENTI  SISMICI DEL 2016 - APPROVAZIONE VA=

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   venticinque del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Messa in sicurezza dell’edificio pericolante sito in via del Mercato e p.zza A. Gentili di proprietà della Sig.ra Pazzelli Maria, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, redatto dall’Ing. Marco Scagnetti di San Ginesio (MC), dal quale risultava un importo totale dei lavori di Euro 38.401,38 come appresso dettagliato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori					€      32.032,45 
oneri per la sicurezza				€        1.601,62  
Importo lavori a base d’appalto			€      30.430,83

B)	SOMME A DISPOSIZIONE:
  B1) IVA 10% su lavori			€        3.203,25
B2) Spese tecniche (5% importo lavori)	€        1.601,62
B3) Contributo previdenziale 4% B2)		€             64,06
B4) IVA 22% su spese tecniche		€           -------
B5) Imprevisti e spese su fattura 		€        1.500,00
       Sommano					€        6.368,93

Importo complessivo progetto iniziale		€    38.401,38

-	Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 152 del 18.05.2018 detti lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta PAZZELLI LUCA di San Ginesio (MC) per l’importo di € 29.750,14 di cui € 1.601,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che 
o	durante l’esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali, in seguito ad un’evoluzione del quadro fessurativo dell’edificio intervenuta successivamente alla redazione del progetto, al fine di adeguare le opere previste alla reale situazione dei luoghi rilevata al momento dell’inizio dei lavori;
o	per l’approvazione delle stesse è stata predisposta una variante suppletiva finalizzata all’esecuzione di opere non differibili in conseguenza dei rinvenimenti imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale;

VISTI gli elaborati trasmessi dall’Ing. Scagnetti e assunti al protocollo del Comune in data 25.06.2018:
-	Relazione Tecnico-illustrativa, quadro economico di raffronto, documentazione fotografica – Tavola n. 1;
-	Computo metrico di variante n.1 – Tavola n. 2;
-	Planimetrie, prospetti e particolari – Tavola n. 3;

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede il riutilizzo delle economie da ribasso e l’utilizzo della voce “Imprevisti” del quadro economico ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ferma restando la spesa globale prevista, l’importo dei lavori di progetto viene ad essere così modificato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori							€      33.429,05 
oneri per la sicurezza						€        1.671,45
lavori soggetti a ribasso						€      31.757,60
deduzione ribasso offerto (7,50%)				€    -   2.381,82 

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€    31.047,23

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

LAVORI	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
Lavori	€   32.032,45	€  33.429,05	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€     1.601,62	€    1.671,45	
Importo lavori soggetto a ribasso	€   30.430,83	€  31.757,60	
Ribasso offerto (- 7,50%)		            -    €    2.381,82	
1.	Totale importo lavori	€   32.032,45	€  31.047,23	

SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
Iva 10% su totale importo lavori	€     3.203,25	€    3.104,72 	
Spese tecniche	€     1.601,62	€    1.601,62	
Contributo previdenziale 4% 	€          64,06	€         64,06	
IVA 22% su spese tecniche	----	----	
Imprevisti e spese su fattura	€     1.500,00	€           0,00	
Economie da ribasso (IVA compresa)	----	€    2.583,75   	
2.	Totale somme a disposizione	€     6.368,93	€    7.354,15	
			
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)	€   38.401,38	€  38.401,38	

CONSIDERATO che il prezzo netto dei lavori aggiuntivi è stabilito in € 1.297,09 al netto del ribasso d’asta offerto al 7,50%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, esclusa l’iva al 10%, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune;

DATO ATTO che il sig. Pazzelli Luca titolare della ditta omonima, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Marco Scagnetti;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale stipulato secondo l’uso del commercio, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma già impegnata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2018 e pari a € 38.401,38;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza di edificio pericolante sito in via del Mercato e p.zza A. Gentili di proprietà della Sig.ra Pazzelli Maria, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, redatta dall’Ing. Marco Scagnetti di San Ginesio (MC) in data 20.06.2018, con la quale si conferma la spesa totale sostenuta di € 38.401,38, suddivisa come sopra descritto;
3.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-06-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-06-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-06-2018 al 13-07-2018.

Lì 28-06-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO