COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.72 del Reg. Data 06-03-019

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO SU VIA MEDO=
RO  SAVINI DI PROPRIETA' BELLI SIMONE-NOLEGGIO IM=
PALCATURA.-

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   sei del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che :
•	Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 197 del 23/12/2016 è stato affidato in somma urgenza l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio sito su Via Medoro Savini (fg. 43 part.lla 146) alla Ditta Edil Capitani e Giglietti snc di Cingoli su progetto dell’Ing. Renzo Crucianelli di Macerata;
•	con Determinazione dell’Area Tecnica n. 61 del 09/03/2017 sono stati approvati lo stato finale e il relativo certificato di regolare esecuzione;

PRECISATO che per l’intervento di che trattasi si è reso necessario provvedere alla realizzazione di ponteggi sui tre lati liberi dell’edificio, aderenti alle pareti e collegati tra loro mediante catene, poiché la muratura era di cattiva qualità e a causa del sisma si erano innescati dei meccanismi di ribaltamento verso l’esterno su pubblica via;

RICHIAMATI:
•	il Computo metrico estimativo di progetto del 05/12/2016, nel quale alla voce n. 1 è stato riportato l’importo relativo all’allestimento di tali ponteggi, comprensivo di montaggio, smontaggio e nolo per un massimo di soli sei mesi;
•	la nota prot. 7661 del 28/06/2018 dell’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc, con la quale veniva richiesto a questo Comune che fosse loro corrisposto un importo aggiuntivo per il periodo di noleggio dal 30/06/2017 al 31/05/2018, esulante dal Computo di progetto iniziale;
CONSIDERATO che, al fine di stimare la regolarità della richiesta pervenuta e soprattutto gli importi corretti da corrispondere all’Impresa per il nolo di tali ponteggi, è stato indetto un GTS straordinario, alla presenza della Geol. Claudia Filiaggi (in qualità di soggetto delegato dalla Protezione Civile Regione Marche), dell’Ing. dei Vigili del Fuoco Mirko Mattiacci e del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Ginesio, geom. Sergio Marcelli, svolto in data 28/11/2018;

DATO ATTO che in seguito a tale sopralluogo è emerso che possono essere concesse alla Ditta sopra citata somme pari € 10.238,91 per il periodo che va dal 30/06/2017 al 31/05/2018 fino a un massimo di ulteriori € 18.523,65, superati i quali il mantenimento dell’attuale ponteggio diventerebbe più oneroso rispetto all’allestimento del futuro cantiere di riparazione dai danni sisma (vedi in allegato verbale GTS straordinario);

PRECISATO in tal senso che gli importi sopra riportati sono ammissibili a finanziamento dalla Protezione Civile Regione Marche, previo inserimento degli stessi all’interno del sistema di rendicontazione regionale Cohesion WorkPA;

DATO ATTO che con nostra PEC prot. 2284 del 21/02/2019 sono stati regolarmente avvisati di quanto sopra espresso il proprietario dell’edificio in oggetto, sig. Belli Simone, il tecnico incaricato Ing. Renzo Crucianelli di Macerata e l’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc di Cingoli, precisando che a decorrere dal 01/02/2020 le spese di noleggio degli stessi ponteggi non potranno essere riconosciute né dalla Protezione Civile Regione Marche né dal Comune stesso e consigliando pertanto di procedere quanto prima alla redazione del progetto di riparazione per danni sisma;

VISTO che in data 06/03/2019 è pervenuto a questo Ente con prot. n. 2778, il preventivo di spesa redatto dall’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc relativa al nolo dei ponteggi per il periodo che va dal 30/06/2017 al 28/02/2019, pari a complessivi € 18.616,20 (di cui € 16.932,82 imponibile ed € 1.692,38 IVA in ragione del 10%);

RITENUTO tale importo congruo con quanto espresso nel Verbale del GTS straordinario del 28/11/2018;

VISTO il CIG assunto: CIG Z9B2762DF2;

D E T E R M I N A

1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI AFFIDARE all’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc di Cingoli il noleggio dei ponteggi tutt’oggi impiegati nel cantiere di Via Medoro Savini (fg. 43 part.lla 146), in quanto fino alla data del 31/01/2020 lo stesso risulterebbe economicamente più vantaggioso rispetto ad un nuovo allestimento di cantiere per il futuro progetto di riparazione da danni sisma 2016;

3.	DI IMPUTARE complessivi € 28.762,56 (di cui € 10.238,91 per il nolo dal 30/06/2017 al 31/05/2018 ed ulteriori € 18.523,65 previsti a copertura dello stesso fino al 31/01/2020) al cap. 2838-1 del bilancio di previsione 2019, poiché ammissibili a finanziamento della Protezione Civile Regione Marche;

4.	DI RICONOSCERE all’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc di Cingoli somme pari a complessivi € 18.616,20 (di cui € 16.932,82 imponibile ed € 1.692,38 IVA in ragione del 10%) per il periodo di nolo che va dal 30/06/2017 al 28/02/2019;

5.	DI TRASMETTERE formalmente il presente atto anche al proprietario Sig. Belli Simone, al tecnico incaricato Ing. Crucianelli Renzo, per i contenuti espressi quale sollecito alla presentazione del progetto di riparazione danni da sisma ed all’Impresa Edil Capitani e Giglietti snc per ribadire e sottolineare che a decorrere dal 01/02/2020 le spese di noleggio degli stessi ponteggi non potranno essere riconosciute né dalla Protezione Civile Regione Marche né dal Comune di San Ginesio;

6.	DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa sopra citato.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 19-03-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019.

Lì 19-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO