COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.70 del Reg. Data 09-03-018

Oggetto: LAVORI  PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PIAZ=
ZALE ANTISTANTE EREMO DI SAN LIBERATO  REGIMAZIONE
ACQUE  METEORICHE    - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   nove del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

	Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.9.2015, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dell’area limitrofa all’Eremo di San Liberato consistente nella nuova regimazione delle acque meteoriche”, redatto dall’Ing. Paolo Musicanti di Macerata e dal Dr. Geol. Palpacelli Stefano di Treia,  ammontante ad una spesa complessiva di € 110.000,00, suddivisa come meglio descritto nel seguente quadro economico:
A)-importo lavori a base di appalto di cui				€        79.704,77
     € 1.471,07  per  oneri di sicurezza non
     soggetti a ribasso

B) - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) - Spese tecniche per:
       Progettazione esecutiva e DL generale		€     8.271,82
       Coordinamento sicurezza progettazione		€     1.077,26
       Coordinamento sicurezza esecuzione		€     1.442,76
       Contabilità					€     1.525,18
2) – Contr.CNPAIA spese tecniche 4%		€        492,68
3) -  IVA 22% su spese tecniche+CNPAIA		€     2.818,13
4) – IVA 10% sui lavori				€     7.970,48
5) -  Indagine e rilievo geologico (comp.IVA)  	€     2.986,60
6) -  Sondaggi geologici IVA compresa		€     1.810,00
7) – Rilievi e restituzione grafica IVA compresa	€     1.500,00
8) -  Art.92 L.163/2006				€        400,32
       Sommano						€   30.295,23	€         30.295,23
       Spesa complessiva prevista					€       110.000,00
da finanziarsi interamente con fondi regionali, giusto Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo della Regione Marche n.74/DDS del 23.12.2014 avente per oggetto “L.R. 33/2014 – D.G.R. 1362/2013 – DGR n.1387 del 16.12.2014 – Programma interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo”, con il quale veniva fra l’altro assegnata a questo Comune  la somma di € 110.000,00 per messa in sicurezza area limitrofa all’Eremo di San Liberato;
	Precisato che, a seguito di gara ufficiosa, con propria Determina n.39 del 8.3.2016  detti lavori vennero affidati alla Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro, per l’offerto ribasso  del 43,266 %, per la somma netta quindi di € 45.856,18 (comprensivo di € 1.471,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  giusto contratto rep.n.1719  del 28.6.2016 e che gli stessi sono in fase di avanzamento;
	Dato atto che in fase di esecuzione dei lavori si è resa necessaria l’approvazione, con Determina di questo Ufficio n.234 del 27.7.2017 di una perizia di variante riguardante in particolare la realizzazione di una nuova tubazione di deflusso delle acque meteoriche - provenienti dalla nuova vasca di decantazione realizzata con il presente progetto - del diametro pari a mm. 1000 (in sostituzione di quella esistente del diametro di mm. 400 in parte danneggiata) che partendo dalla vasca di decantazione attraverserà tutto il piazzale fino a confluire lungo il versante a valle dello stesso, che verrà riprofilato mediante tecniche di ingegneria naturalistica, nonché  la sistemazione del piazzale con una livellazione del terreno ed eventuale riporto di ghiaietto, redatta in data luglio 2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Musicanti,  con la quale, ferma restando la spesa globale prevista di € 110.000,00 il quadro economico viene modificato come di seguito descritto:
A)-importo lavori a base di contratto di cui				€        50.441,80
     € 1.588,69  per  oneri di sicurezza non
     soggetti a ribasso

B) - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) - Spese tecniche per:
       Progettazione esecutiva e DL generale		€     8.271,82
       Coordinamento sicurezza progettazione		€     1.077,26
       Coordinamento sicurezza esecuzione		€     1.442,76
       Contabilità					€     1.525,18
2) - Contr.CNPAIA spese tecniche 4%		€        492,68
3) - IVA 22% su spese tecniche+CNPAIA		€     2.818,13
4) - IVA 10% sui lavori				€     5.044,18
5) - Imprevisti						€     1.637,35
6) - Lavori in economia IVA compresa		€   30.551,92
7) - Indagine e rilievo geologico (comp.IVA)  	€     2.986,60
8) - Sondaggi geologici IVA compresa		€     1.810,00
9) - Rilievi e restituzione grafica IVA compresa	€     1.500,00
10) -  Art.92 L.163/2006				€        400,32
       Sommano						€   59.558,20	€         59.558,20
       Spesa complessiva prevista					€       110.000,00
con un maggiore importo di lavori rispetto al contratto principale rep.1719/2016, di € 4.585,62, da affidarsi alla medesima Ditta Scavi e Condotte, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con la proroga di gg.45 del termine di ultimazione di lavori,  giusto schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa;
	Accertato che i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati in data 17.1.2018, giusto verbale in pari data;
Visto  lo stato finale dei lavori in data 17.1.2018, sottoscritto senza alcuna riserva dall’impresa appaltatrice,  nonché il certificato di regolare esecuzione degli stessi, predisposto dalla D.L. in data 9.3.2018,  dai quali risulta per  la Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro un  credito residuo a saldo di € 55.485,98, di cui € 50.441,80 per lavori eseguiti  a tutto il 17.1.2018 ed € 5.044,18  per IVA in ragione del 10%;
Viste inoltre le liste relative ai lavori in economia eseguiti nell’ambito delle opere di che trattasi dalla medesima Ditta Scavi e Condotte srl,  ammontanti a complessivi € 31.802,21 che trovano copertura alle voci B5 e 6) del quadro economico di perizia,  di seguito riassunte:
Lavori in economia: 
Lista n.1 (12.12 - 15.12.2017)						€  13.313,03
Lista n.2 (18.12 - 15.20.2017)						€    7.737,36
Lista n.3 (8.1 - 11.1.2018)						€    3.992,16 
Lista n.4 (15.1 - 16.1.2018)						€    3.868,55
Totale lavori								€  28.911,10
IVA in ragione del 10%						€    2.891,11
Totale da fatturare							€  31.802,21
Viste inoltre le sottoelencate fatture pro forma emesse dai tecnici incaricati, relative al saldo delle varie spese tecniche, ammontanti a complessivi € 21.114,43, che trovano copertura alle voci B1-2-3-7-8 e 9) del quadro economico di perizia;
•	Ing. PAOLO MUSICANTI – pro forma del 6.3.2018
Progettazione, direzione,contabilità e sicurezza	esecuzione	€  12.317,02
Contributo previdenziale 4%					€       492,68
IVA 22% su € 12.809,70 =					€     2.818,13
Totale fattura							€   15.627,83
•	Dr. Geol. STEFANO PALPACELLI – pro forma del 7.3.2018
Indagine geologica						€     2.400,00
Contributo previdenziale 2%					€          48,00
IVA 22% su € 2.448,00 =					€        538,60
Totale fattura							€     2.986,60
•	Dott.For.  PAPARELLI LUCA  – pro forma 03  del 7.3.2018
Valutazione incidenza SIC ZPS					€        803,60
Contributo previdenziale 2%					€          16,07
IVA 22% su € 819,67 =						€        180,33
Totale fattura							€     1.000,00
•	Geom. RAFFAELI LORENZO – pro forma 19 del 7.3.2018
Rilievi topografici						€     1.426,67
Contributo previdenziale 5%					€          71,33
Imposta bollo							€            2,00
Totale fattura (esenzione IVA art.1 comma 100 L.244/2007)	€     1.500,00
	Vista inoltre la fattura pro – forma emessa il 8.3.2018 dalla Ditta G.M. Perforazioni di Giacobbi Maurizio di Camerino, relativa ai sondaggi geognostici eseguiti nell’ambito dei lavori di che trattasi, dell’importo di € 663,93, oltre ad € 146,07 per IVA in ragione del 22% (totale € 810,00) che trova copertura alla voce B8) del quadro economico di perizia; 	
	Ritenuto infine, a seguito delle modifiche apportate dal Nuovo Codice dei Contratti, di dover accantonare la somma prevista quale compenso R.U.P. e personale UTC ex art. 92 L.163/06, pari ad € 400,32, nelle more della approvazione dello specifico Regolamento (voce n.B10) quadro economico di variante);	
	Accertata la regolarità ed esattezza dei suddetti atti tecnici e contabili  e ritenuto quindi doveroso provvedere alla relativa approvazione e liquidazione;
D E T E R M I N A
1.	di approvare gli allegati stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dell’area limitrofa all’Eremo di San Liberato consistente nella nuova regimazione delle acque meteoriche, dai quali risulta per la Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro un  credito residuo a saldo di  € 55.485,98, compresa IVA in ragione del 10%;
2.	di liquidare e pagare conseguentemente alla stessa Ditta la somma suddetta a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi, previa presentazione di regolare fattura;
3.	di liquidare e pagare inoltre alla stessa Ditta Scavi e Condotte srl, previa presentazione di regolari fatture, la complessiva somma di € 31.802,21, IVA al 10% compresa, relativa a lavori in economia eseguiti nell’ambito delle opere di che trattasi, giuste  liste delle economie predisposte dalla D.L. e descritte in premessa;
4.	di liquidare e pagare  le sottoelencate fatture pro-forma emesse dai tecnici incaricati, relative al saldo delle varie spese tecniche, ammontanti a complessivi € 21.114,43:
•	Ing. PAOLO MUSICANTI – pro forma del 6.3.2018
Progettazione, direzione,contabilità e sicurezza	esecuzione	€  12.317,02
Contributo previdenziale 4%					€       492,68
IVA 22% su € 12.809,70 =					€     2.818,13
Totale fattura							€   15.627,83
•	Dr. Geol. STEFANO PALPACELLI – pro forma del 7.3.2018
Indagine geologica						€     2.400,00
Contributo previdenziale 2%					€          48,00
IVA 22% su € 2.448,00 =					€        538,60
Totale fattura							€     2.986,60
•	Dott.For.  PAPARELLI LUCA  – pro forma 03  del 7.3.2018
Valutazione incidenza SIC ZPS					€        803,60
Contributo previdenziale 2%					€          16,07
IVA 22% su € 819,67 =						€        180,33
Totale fattura							€     1.000,00
•	Geom. RAFFAELI LORENZO – pro forma 19 del 7.3.2018
Rilievi topografici						€     1.426,67
Contributo previdenziale 5%					€          71,33
Imposta bollo							€            2,00
Totale fattura (esenzione IVA art.1 comma 100 L.244/2007)	€     1.500,00
5.	di liquidare e pagare inoltre alla Ditta  G.M. Perforazioni di Giacobbi Maurizio di Camerino,previa presentazione di regolare fattura, la complessiva somma di € 810,00, IVA compresa, a saldo sondaggi geognostici eseguiti nell’ambito dei lavori di che trattasi;
6.	di accantonare la somma prevista quale compenso R.U.P. e personale UTC ex art. 92 L.163/06, pari ad € 400,32, nelle more della approvazione dello specifico Regolamento;
7.	di imputare la spesa complessiva di € 109.612,54 (comprensiva della suddetta somma) nella parte 2^ uscita del corrente bilancio  al Cap. 2838 / 18 “Spesa per sistemazione Eremo di San Liberato eventi alluvionali nov./dic. 2013”, gestione residui passivi, dove risulta registrato l’impegno di spesa di € 110.000,00 assunto con la Delibera di Giunta Comunale n.74/2015, interamente disponibile;
8.	di richiedere alla Regione Marche l’erogazione della suddetta somma a valere sul contributo di € 110.000,00  dalla stessa Regione concesso per l’esecuzione dei lavori in questione con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo della Regione Marche n.74/DDS del 23.12.2014; 
9.	di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla emissione dei relativi mandati di pagamento, ad erogazione avvenuta, previa presentazione di regolari fatture accettate da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 15-03-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 15-03-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 15-03-2018 al 30-03-2018.

Lì 15-03-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO