COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.183 del Reg. Data 08-06-018

Oggetto: LAVORI  DI  MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICO=
LANTE SITO IN VIA C. BATTISTI E P.ZZA DELLA FORNA=
RINA  DI  PROPRIETA'  DEL SIG. SARDINI FRANCESCO E
ALTRI,  DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   otto del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	Con propria Determinazione n. 50 del 23.02.2018:
o	è stato affidato l’incarico per la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo degli interventi di “Messa in sicurezza dell’edificio pericolante sito in via C. Battisti e p.zza della Fornarina di proprietà del Sig. Sardini Francesco e altri, danneggiato dagli eventi sismici del 2016” all’Ing. Massimo Formica dello studio IngEvo di Ancona (AN);
o	è stata impegnata in via preventiva la somma complessiva di € 2031,80, oneri contributivi e Iva di legge compresi, per le spese professionali con impegno di spesa n. 65, capitolo 2838-1;
-	Con Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2018:
o	è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Messa in sicurezza dell’edificio pericolante sito in via C. Battisti e p.zza della Fornarina di proprietà del Sig. Sardini Francesco e altri, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, redatto dall’Ing. Massimo Formica, dal quale risultava un importo totale dei lavori di Euro 36.347,98 come appresso dettagliato:

A)	Importo lavori						€      31.241,82 
	oneri per la sicurezza					€        9.711,12  
	Importo lavori a base di gara				€      21.530,70

B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
  B1) IVA su lavori 10%					€        3.124,18
  B2) Spese tecniche (5% importo lavori)	 	€        1.562,09
  B3) Contributo previdenziale 4% B2)	 		€             62,48
  B4) IVA 22% su spese tecniche		 		€           357,41
Sommano							€        5.106,16

Spesa complessiva prevista			 	€      36.347,98 

o	è stata impegnata la somma corrispondente alla spesa complessiva come risultante dal quadro tecnico economico e pari a € 36.347,98 con impegno n. 103, capitolo 2838-1;

-	Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 160 del 23.05.2018 detti lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta EDILIZIA AZZACCONI srl di San Ginesio (MC) per l’importo di € 31.220,29 oltre IVA di legge, di cui € 9.711,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che 
o	Successivamente all’avvio dei lavori il direttore dei lavori l’ing. Formica, potendo accedere a tutte le unità degli edifici interessati dai lavori, nonché di alcuni edifici adiacenti e, mediante piattaforma autocarrata dell’impresa esecutrice, potendo ispezionare la copertura e le parti alte in genere, ha ravvisato la necessità di eseguire alcune variazioni sulle modalità operative per la corretta esecuzione dei lavori, e minimi adattamenti del progetto esecutivo allo stato effettivo dei luoghi finalmente ispezionati;
o	per l’approvazione delle stesse è stata predisposta una variante suppletiva finalizzata all’introduzione di alcune modifiche alle modalità operative e di esecuzione delle opere;

VISTI gli elaborati trasmessi dall’Ing. Formica in data 04.06.2018:
-	Relazione Tecnica di Variante e Documentazione fotografica;
-	Quadro economico di variante;
-	Computo metrico di variante ed Elenco Prezzi;
-	Progetto delle strutture: schema generale e particolari esecutivi;

DATO ATTO che l'importo dei lavori a seguito del progetto di variante viene ad essere così modificato:

	LAVORI IN APPALTO
	Importo lavori								€ 35.808,28
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 12.321,44
	Importo lavori soggetto a ribasso					€ 23.486,84
	Deduzione ribasso offerto (0,10%)					-€       23,49

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€ 35.784,79

Importo perizia di variante IVA inclusa                                                    € 39.363,27

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

LAVORI	PROGETTO IN APPALTO	PROGETTO AGGIUDICATO	PERIZIA DI VARIANTE	
Lavori	€   31.241,82	€   31.241,82	€    35.808,28	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€     9.711,12	€     9.711,12	€    12.321,44	
Importo lavori soggetto a ribasso	€   21.530,70	€   21.530,70	€    23.486,84	
Ribasso offerto (- 0,10 %)		      -    €          21,53	      -    €          23,49	
1.	Totale importo lavori	€   31.241,82	€  31.220,29	€    35.784,79	

SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO IN APPALTO	PROGETTO AGGIUDICATO	PERIZIA DI VARIANTE	
Iva 10% su totale importo lavori	€     3.124,18	€     3.122,03	€    3.578,48 	
Spese tecniche	€     1.562,09	€     1.562,09	€    1.790,41	
Contributo previdenziale 4% 	€          62,48	€          62,48	€         71,62	
IVA 22% su spese tecniche	€        357,41	€        357,41	€       409,65  	
Imprevisti e spese su fattura	€     0,00	€            0,00	€           0,00	
Economie da ribasso (IVA compresa)	----	€          23,68	€           0,00   	
2.	Totale somme a disposizione	€     5.106,16	€     5.127,69	€    5.850,16    	
				
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 1) + 2)	€   36.347,98	€   36.347,98	€  41.634,95  	

CONSIDERATO che 
•	il prezzo netto dei lavori aggiuntivi rispetto all’importo contrattuale è stabilito in € 4.564,50 al netto del ribasso d'asta offerto al 0,10%, esclusa l'iva al 10%;
•	in conseguenza delle maggiori opere che si sono rese necessarie, l’onorario per il professionista è stato rimodulato sull’importo dei lavori come da computo metrico estimativo della perizia di variante, per cui le spese tecniche ammontano a € 1.790,41, oltre cassa previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di € 2.271,67;

DATO ATTO che il sig. Sergio Azzacconi titolare della Ditta assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Massimo Formica;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale stipulato secondo l’uso del commercio, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante comporta:
-	un’integrazione dell’impegno di spesa n. 65/2018, capitolo 2838-1, assunto con propria Determinazione n. 50 del 23.02.2018, pari a € 239,87 iva compresa per rimodulazione delle spese tecniche a fronte dell’importo variato dei lavori;
-	un’integrazione dell’impegno di spesa n. 103/2018, capitolo 2838-1, assunto con Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2018, pari a € 3.015,29 iva compresa per aumento dell’importo complessivo dei lavori;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza di edificio pericolante sito in via C. Battisti e p.zza della Fornarina di proprietà del Sig. Sardini Francesco e altri, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, redatta dall’Ing. Massimo Formica in data 20.06.2018;
3.	Di approvare il Quadro Tecnico Economico di Variante, dal quale risulta un importo complessivo dell’appalto di € 41.634,15, suddiviso come sopra descritto;
4.	Di integrare l’impegno di spesa n. 65/2018 assunto con propria Determinazione n. 50 del 23.02.2018, capitolo 2838-1, finanziato con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale Cohesion WorkPA, di una somma pari a € 239,87 iva compresa per rimodulazione delle spese tecniche a fronte dell’importo variato dei lavori;
5.	Di integrare l’impegno di spesa n. 103/2018 assunto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2018, capitolo 2838-1, finanziato con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale Cohesion WorkPA, di una somma pari a € 3.015,29 iva compresa per l’aumento dell’importo complessivo dei lavori;
6.	Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione delle integrazioni dei rispettivi impegni di spesa.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-08-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2018 al 12-09-2018.

Lì 28-08-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO