COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.394 del Reg. Data 14-12-018

Oggetto: SISMA  2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI POR=
ZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO, PRO=
PRIETA'  SIG.RI MARINANGELI E STRAFFI, DANNEGGIATO
A  SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016. APPROVA=

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	Con propria Determinazione n. 153 del 18.05.2018:
o	è stato affidato l’incarico per la progettazione e la direzione lavori degli interventi di “Messa in sicurezza di porzione di fabbricato sito in via Capocastello di proprietà dei Sig.ri Marinangeli e Straffi, danneggiato a seguito del sisma del 30 ottobre 2016” all’Ing. Giorgio Bellesi, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A 475, con studio in Macerata (MC);
o	è stata impegnata in via preventiva la somma complessiva di € 1.268,80, oneri contributivi e Iva di legge compresi, per le spese professionali con impegno di spesa n. 175/2018, capitolo 2838-1;
-	Con Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 04.07.2018:
o	è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Messa in sicurezza di porzione di fabbricato sito in via Capocastello di proprietà dei Sig.ri Marinangeli e Straffi, danneggiato a seguito del sisma del 30 ottobre 2016”, redatto dall’Ing. Bellesi, dal quale risultava un importo totale di quadro economico di Euro 24.000,00 come appresso dettagliato:

Importo lavori						€      19.442,06 
	oneri per la sicurezza					€           777,68  
	Importo lavori a base di gara				€      18.664,38

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1) Imprevisti e spese su fattura			€           991,49

C1) Spese tecniche					€           972,10
C2) Contributo previdenziale 4%	 		€             38,88

D1) IVA 22% su C1+C2		 		€           222,42
D2) IVA 10% sui lavori				€        1.944,21

E) Incentivi funzioni tecniche art. 113 Codice	€           388,84
Sommano						€        4.557,94

Spesa complessiva prevista			 	€      24.000,00 

o	è stata impegnata la somma corrispondente alla spesa complessiva come risultante dal quadro tecnico economico e pari a € 24.000,00 con impegno n. 252/2018, capitolo 2838-1;

-	Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 291 del 19.09.2018 detti lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta PINTO MICHELANGELO di Stigliano (PT) per l’importo di € 13.864,21 oltre IVA di legge, di cui € 777,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che 
o	il direttore dei lavori l’ing. Bellesi, in corso d’opera, ha riscontrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di esecuzione dei lavori, a seguito della verifica di un peggioramento delle condizioni statiche delle strutture da demolire, optando per la demolizione manuale del fabbricato, che necessita pertanto di una serie di lavorazioni diverse non valutate in sede di progetto;
o	per l’approvazione delle stesse modifiche è stata predisposta una variante;

VISTI gli elaborati trasmessi dall’Ing. Bellesi in data 13.12.2018 prot. 13978:
-	Relazione Tecnica di Variante;
-	Quadro economico di variante;
-	Computo metrico di variante;
-	Elaborato grafico illustrativo degli interventi;

DATO ATTO che l'importo dei lavori a seguito del progetto di variante viene ad essere così modificato:

	LAVORI IN APPALTO
	Importo lavori								€ 24.714,18
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€      988,57
	Importo lavori soggetto a ribasso					€ 23.725,61
	Deduzione ribasso offerto (29,885%)				          -€    7.090,40

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€ 17.623,78

Importo perizia di variante IVA inclusa                                                    € 19.386,16

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

	PROGETTO APPROVATO	PROGETTO AGGIUDICATO	PERIZIA DI VARIANTE	
importo lavori	19.442,06 €	19.442,06 €	24.714,18 €	
sicurezza non soggetta a ribasso	777,68 €	777,68 €	988,57 €	
importo lavori soggetto a ribasso	18.664,38 €	18.664,38 €	23.725,61 €	
Ribasso offerto (-29,885%)	0,00 €	5.577,85 €	7.090,40 €	
TOT. IMPORTO LAVORI	19.442,06 €	13.864,21 €	17.623,78 €	
				
Somme a disposizione				
imprevisti +IVA	991,49 €	991,49 €	0,00 €	
economie da ribasso + iva	0,00 €	6.135,64 €	2.551,69 €	
incentivo funzioni tecniche	388,84 €	388,84 €	494,28 €	
spese tecniche 5%	972,10 €	972,10 €	1.235,71 €	
Cnpaia 4%	38,88 €	38,88 €	49,43 €	
iva su lavori 10%	1.944,21 €	1.386,42 €	1.762,38 €	
IVA su spese tecniche 22%	222,42 €	222,42 €	282,73 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	4.557,94 €	10.135,79 €	6.376,22 €	
				
TOTALE APPALTO	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	

CONSIDERATO che 
•	il prezzo netto dei lavori aggiuntivi rispetto all’importo contrattuale è stabilito in € 3.759,57 al netto del ribasso d'asta offerto al 29,885%, esclusa l'iva al 10%;
•	in conseguenza delle maggiori opere che si sono rese necessarie, l’onorario per il professionista è stato rimodulato sull’importo dei lavori come da computo metrico estimativo della perizia di variante, per cui le spese tecniche ammontano a € 1.235,71, oltre cassa previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%;

DATO ATTO che il sig. Michelangelo Pinto titolare della Ditta assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Giorgio Bellesi;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale stipulato secondo l’uso del commercio, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcuna integrazione all’impegno di spesa già assunto;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza di porzione di fabbricato sito in via Capocastello di proprietà dei Sig.ri Marinangeli e Straffi, danneggiato a seguito del sisma del 30 ottobre 2016”, redatta dall’Ing. Giorgio Bellesi in data 10.12.2018, assunta al protocollo al n. 13978 del 13.12.2018;
3.	Di approvare il Quadro Tecnico Economico di Variante, dal quale risulta un importo complessivo dell’appalto di € 24.000,00, suddiviso come sopra descritto;
4.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcuna maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 19-12-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-12-2018 al 03-01-2019.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO