COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.344 del Reg. Data 07-11-018

Oggetto: ESECUZIONE  LAVORI  DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA GAS
METANO  CHE INTERFERISCE CON LE OPERE DI APPRONTA=
MENTO DEL CANTIERE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO.-

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sette del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2018; 
VISTA l’Ordinanza n. 14 in data 16 gennaio 2017 adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Programma Straordinario per la riapertura delle scuole nei Comuni colpiti dal sisma che, all'art.1 lett.a), prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico;
VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 07.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dato l’incarico all’ufficio tecnico per la progettazione ed appalto lavori di demolizione scuole elementare e materna sita in via Roma;
VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 07.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale oltre a quanto sopra, è stata formalizzata la volontà di realizzare in località Tinta un Polo scolastico che ricomprenda le seguenti scuole: scuola primaria “F. Allevi” e dell’infanzia “G. Costantini Istituto Magistrale " A. Gentili" (Via G. Matteotti) ed Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - I.P.S.I.A. " R.Frau";
VISTO che il Nuovo Polo scolastico è stato localizzato sulla stessa area dove insistevano la scuola materna, elementare e la palestra e su altra area adiacente insistente sempre su suolo pubblico di proprietà comunale; 
VISTO che nella zona di ricostruzione del Nuovo Polo Scolastico di Via Roma è stata rilevata la presenza di una condotta principale interrata di gas/metano che interferisce con le opere di approntamento del suddetto cantiere (in particolare con le scale esterne di accesso al nuovo polo scolastico);

DATO ATTO che al fine di completare nel più breve tempo possibile i lavori di sbancamento e preparazione del piano di posa delle fondazioni è necessario spostare l’allaccio e la relativa condotta principale di gas/metano, in altro sito dell’area di che trattasi;

CONSIDERATO che nel giugno 2017, nel corso delle operazioni successive alla demolizione della scuola esistente, era stato richiesto un preventivo alla Ditta “Monti Azzurri Servizi tecnologici” di San Ginesio, la quale aveva fornito un’offerta economica pari a € 3.794,68 (esclusa IVA e tutti i costi relativi agli scavi e ai ripristini necessari);

PRECISATO che, con nota prot. 2270 del 28/02/2018, il Comune di San Ginesio ha provveduto ad inoltrare a mezzo PEC una richiesta di autorizzazione per l’esecuzione dei suddetti lavori all’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione ed al Responsabile del Procedimento geom. Benedetto Renzetti, alla quale, stante l’urgenza di procedere, è seguita una concessione verbale di avvio lavori;

CONSIDERATO che nel marzo 2018 è stato richiesto un nuovo preventivo di spesa per le opere di cui all’oggetto alla Ditta “Monti Azzurri Servizi tecnologici” di San Ginesio, la quale ha presentato un’offerta pari a € 10.883,74 (di cui € 8.921,10 per lavori ed € 1.962,64 per IVA al 22%), comprensiva dei costi relativi agli scavi ed ai ripristini necessari, di cui si allega copia;

VISTO l’imminente avvio delle opere di realizzazione del Nuovo polo scolastico, in attesa di una risposta scritta ufficiale, la Ditta incaricata ha proceduto con urgenza all’esecuzione dei lavori di spostamento della linea di gas/metano suddetta;

RICHIAMATA propria Determinazione n. 108 del 12/04/2018 con la quale sono stati affidati alla Ditta Edilprimavera di San Ginesio, i lavori di spostamento di un cavo di Media Tensione, anch’esso rinvenuto all’interno dell’area di sedime del Nuovo polo scolastico;

DATO ATTO che con nota del Rup geom. Benedetto Renzetti, prot. CGRTS-0006542-P dell’11/05/2018, in attuazione dell’art. 2 comma 4-bis dell’ord. Commissariale 14/2017 è stata valutata l’opportunità di riconoscere le spese sostenute per i lavori di eliminazione delle interferenze dei sopra citati sotto servizi;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel mese di aprile 2018 ma che non è stato possibile predisporre gli atti relativi all’acquisizione dell’impegno di spesa necessario, a causa delle procedure emergenziali post sisma 2016, in cui  l’ufficio tecnico è stato costantemente impegnato;

DATO ATTO che il CIG assegnato per tale intervento è il seguente: ZF8262BAB3;

DETERMINA

1)	DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)	DI IMPUTARE la spesa pari a € 10.883,74 (di cui € 8.921,10 per lavori ed € 1.962,64 per IVA al 22%)  sopra descritta,  al Cap. 2838 art.1 ”Interventi di manutenzione e messa in sicurezza beni patrimoniali – sisma 2016” del corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;
3)	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento geom. Benedetto Renzetti per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico;
4)	DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione alla ditta Monti Azzurri Servizi Tecnologici di San Ginesio, previa presentazione di regolare fattura accettata da parte di questo Ufficio e previa emissione del Decreto di Finanziamento del Commissario Straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’Ord. 14/2017.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 19-12-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-12-2018 al 03-01-2019.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO