COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.85 del Reg. Data 19-03-018

Oggetto: LAVORI DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SI=
TA  IN VIA ROMA. RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOIO
GASOLIO  INTERRATO.  RETTIFICA  ALLE DETERMINE 169
DEL 01/06/2017 E 11 DEL 23/01/2018.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA E RICHIAMATA la Determina n. 169 del 01/06/2017 con la quale, a seguito del rinvenimento in cantiere di una cisterna metallica interrata della capienza di litri 6000, contenente residui di olio combustibile BTZ (utilizzato per l’impianto termico prima della sostituzione a gas metano), è stato approvato il seguente preventivo di spesa per la rimozione e bonifica della stessa:

QUADRO ECONOMICO E STIMA DEI LAVORI (PREVENTIVO DI SPESA)	
DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U.M.	Costo Unitario	Quantità	TOTALE	DITTA	
Supervisione lavori e relazione finale di chiusura cantiere 	corpo	1.200,00	1,00	1.200,00	New Land srl	
Messa in sicurezza temporanea n. 1 serbatoio interrato da 6000 litri contenete BTZ incluso gas free	corpo	1.500,00	1,00	1.500,00	Pavoni Rossano srl	
Trasporto e smaltimento rifiuti liquidi da bonifica cisterna	kg	0,26	4.000,00	1.040,00	Pavoni Rossano srl	
Esecuzione scavo ed estrazione serbatoio (costo stimato di massima)	ore	85,00	8,00	680,00	Baldini Sandro srl	
Consegna cassoni	viaggio	200,00	1,00	200,00	Baldini Sandro srl	
Campionamento ed analisi terreni pareti e fondo scavo	cad	280,00	5,00	1.400,00	New Land srl	
Campionamento ed analisi terre da scavo per smaltimento	cad	250,00	1,00	250,00	New Land srl	
Smaltimento  terreno non pericoloso a recupero	kg	105,00	20,00	2.100,00	da definire	
Smaltimento terreno pericoloso a recupero	kg	125,00	20,00	2.500,00	da definire	
Costo trasporto terre ad impianto 	viaggio	420,00	2,00	840,00	da definire	
Smaltimento serbatoio 	corpo	300,00	1,00	300,00	da definire	
Totale lavori                                                                                                                          12.010,00	
oneri sicurezza 3%                                                                                                                     360,30	
totale lavori                                                                                                                           12.370,30	
IVA sui lavori 22%                                                                                                                 2.721,47	
Spesa complessiva prevista                                                                                                 15.091,77	

CONSIDERATO che, in seguito alle lavorazioni realmente effettuate i costi stimati di cui sopra, sono variati così come segue:
QUADRO ECONOMICO FINALE	
DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U.M.	Costo Unitario	Quantità	TOTALE	DITTA	
Supervisione lavori e relazione finale di chiusura cantiere 	corpo	1.200,00	1,00	1.200,00	New Land srl	
Campionamento ed analisi terreni pareti e fondo scavo	cad	280,00	5,00	1.400,00	New Land srl	
Campionamento ed analisi terre da scavo per smaltimento	cad	250,00	1,00	250,00	New Land srl	
Messa in sicurezza temporanea n. 1 serbatoio interrato da 6000 litri contenete BTZ incluso gas free 	corpo	1.250,00	1,00	1.250,00	Pavoni Rossano srl	
Smaltimento presso terzi rifiuti contenenti oli-sovrapprezzo per presenza BTZ	corpo	250,00	1,00	250,00	Pavoni Rossano srl	
Smaltimento  terreno non pericoloso a recupero	kg	105,00	65,06	6.831,30	Pavoni Rossano srl	
Costo trasporto terre ad impianto 	viaggio	420,00	2,00	840,00	Pavoni Rossano srl	
Trasporto e smaltimento rifiuti liquidi da bonifica cisterna	kg	0,26	5.140,00	1.336,40	Pavoni Rossano srl	
Escavatore cingolato FK245 per sterro cisterna, carico terra su cassoni, rimozione cisterna 	ore
operaio/ore	80,00
30,00	8,00
8,00	640,00
240,00	Baldini Sandro srl	
Noleggio, consegna e ritiro cassoni scarrabili per deposito di materiale oggetto di bonifica	viaggio	250,00	2,00	500,00	Baldini Sandro srl	
Intervento per svuotamento cassoni e carico di autocarri della Ditta Pavoni per trasporto in discarica + ripristino buca di scavo	escavatore/ore
operaio/ore	80,00
30,00	8,00
8,00	640,00
240,00	Baldini Sandro srl	
Totale lavori                                                                                                                         15.617,70	
IVA sui lavori 22%                                                                                                                3.435,90	
Spesa complessiva finale                                                                                                 € 19.053,60	

di cui si evidenziano le variazioni apportate alle spese effettivamente sostenute dall’Impresa Baldini Sandro e dalla Ditta Pavoni Rossano srl;

VISTA E RICHIATA la propria Determinazione n. 11 del 23/01/2018, con la quale era già stato rettificato il quadro economico delle lavorazioni eseguite dall’Impresa Baldini Sandro che ammontano a € 2.757,20 (€ 2.260 per lavori e € 497,20 per IVA al 22%) contro i € 1.073,60 stimati, di cui € 680,00 per l’esecuzione dello scavo e l’estrazione del serbatoio, € 200,00 per la consegna di n. 1 cassone e € 193,60 per IVA al 22%;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 169 del 01/06/2017 veniva approvato il quadro economico ammontante a € 15.091,77, e che con propria Determinazione n. 11 del 23/01/2018 venivano imputati ulteriori € 2.757, per un totale di € 17.848,97;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori le quantità di materiale da smaltire sono state superiori a quelle previste e che pertanto ha fatto seguito un ulteriore aumento di spesa;

ACCERTATO che dal quadro economico finale sopra riportato si evince che la spesa finale sostenute ammonta a € 19.053,60 (di cui € 15.617,70 per lavori ed € 3.435,90 per IVA) e che di conseguenza si rende necessario integrare ai 17.848,97 € stimati ulteriori € 1.204,63 ;

ACCERTATA infine la congruità dei prezzi unitari applicati e ritenuto quindi il quadro economico finale meritevole di approvazione;

D E T E R M I N A
 
1.	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI APPROVARE il quadro economico finale, ammontante ad € 19.053,60, di cui € 15.617,70 per lavori ed € 3.435,90 per IVA al 22% e suddiviso come descritto in narrativa;

3.	DI IMPUTARE la maggiore spesa di  € 1.204,63 nella parte 2° Uscita del corrente bilancio al Cap. 2838 art. 1, dove risulta già registrato l’impegno di spesa di € 272.000, assunto con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2017; 

4.	DI PRENDERE ATTO che, a seguito dell’esecuzione dei lavori di smaltimento e bonifica della cisterna di olio rinvenuta in cantiere, il quadro economico del progetto di demolizione della Scuola elementare e materna sita in Via Roma, viene ad essere così modificato:

5.	DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, precisando che alla liquidazione della spesa conseguente si provvederà dietro presentazione da parte delle Ditte incaricate di specifiche fatture accettate da questo Ufficio.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 06-04-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 06-04-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 06-04-2018 al 21-04-2018.

Lì 06-04-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO