COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.169 del Reg. Data 01-06-017

Oggetto: LAVORI  DEMOLIZIONE  SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA -
RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOIO GASOLIO INTERRA=
TO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   uno del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA e RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 7.2.2017 avente per oggetto “Sisma ricostruzione e Polo Scolastico – incarico all’Ufficio Tecnico per progettazione ed appalto lavori di demolizione scuole elementare e materna site in Via Roma”, con la quale è stato formalmente incaricato l’ufficio tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio Geom. Sergio Marcelli, a provvedere urgentemente ad evadere la pratica di demolizione della scuola materna ed elementare sita in Via Roma al fine di rispettare il termine stabilito dall’art.3 comma 5 dell’Ordinanza del Commissario Errani n. 14/2017  
VISTA e RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n.24 del 28.2.2017  con cui si approva il progetto per la demolizione della scuola materna ed elementare sita in Via Roma, ammontante ad una spesa complessiva di € 272.000,00 suddivisa come appresso specificato:
A)	Importo lavori 				€    236.414,44			€    236.414,44  
	oneri per la sicurezza			€        7.092,43  
	Importo lavori a base d’appalto		€    229.322,01
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
  	B1) IVA su lavori 10%			          	€      23.641,44
	B2) Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase
	di progettazione e direzione			€        7.565,25
	B3) Contributo previdenziale 5% B3)		€           378,26
	B4) IVA 22% su spese tecniche			€        1.747,57
	B5) Imprevisti e lavori economia IVA comp.	€        2.253,04
             Sommano					€      35.585,56		€      35.585,56
             Spesa complessiva prevista						€  272.000,00  

VISTA e RICHIAMATA la propria Determinazione n.110  del 14.4.2017 con la quale, a seguito della procedura negoziata mediante gara informale esperita in data 10.3.2017, detti lavori vennero definitivamente affidati alla Ditta Baldini Sandro di Camerano con l’offerto ribasso del 67,98% sull’importo a base di appalto (al netto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) di € 229.322,01,  per la somma quindi di € 73.428,91, oltre a € 7.092,45 per oneri di sicurezza, per un totale di € 80.521,34 e di conseguenza il quadro economico di progetto viene ad essere così modificato:
A)	Importo lavori 				€      73.428,91			€      80.521,34
	oneri per la sicurezza			€        7.092,43  
	Importo lavori a base di contratto	€      80.521,34
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
  	B1) IVA su lavori 10%			          	€        8.052,13
	B2) Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase
	di progettazione e direzione			€        7.565,25
	B3) Contributo previdenziale 5% B3)		€           378,26
	B4) IVA 22% su spese tecniche			€        1.747,57
	B5) Imprevisti e lavori economia + economia 
               ribasso d’asta IVA comp.			€    173.735,45
             Sommano					€    191.478,66		€    191.478,66
             Spesa complessiva prevista						€    272.000,00  

VISTO il contratto di appalto rep. 1742 stipulato in data 2.5.2017 con la citata Impresa e dato atto che i lavori in questione sono in fase di ultimazione;
DATO ATTO che, durante l’esecuzione dei lavori si è accertata la presenza in cantiere di una cisterna metallica interrata della capienza di litri 6000, contenente residui di olio combustibile BTZ (utilizzato per l’impianto termico prima della sostituzione a gas metano) per cui questo Ufficio, nell’urgenza di dare l’area interessata dalla demolizione disponibile per la ricostruzione del nuovo Polo Scolastico, su conforme parere espresso in merito dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24 agosto 2016 con mail del 19.5.2016, ha contattato nelle vie brevi la Ditta New Land srl di Jesi, particolarmente specializzata in interventi di bonifica ambientale, che tramite il proprio Tecnico Incaricato Ing. Tomassoni Manuel, dopo accurato accertamento diretto sul posto, ha predisposto il seguente preventivo per la rimozione e bonifica: 
Quadro economico e stima dei lavori	 	 	 	 	 	
DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U.M.	Costo Unitario	Quantità	TOTALE	DITTA	
Supervisione lavori e relazione finale di chiusura cantiere 	corpo	1.200,00	1,00	1.200,00	New Land srl	
Messa in sicurezza temporanea n. 1 serbatoio interrato da 6000 litri contenete BTZ incluso gas free	corpo	1.500,00	1,00	1.500,00	Pavoni Rossano srl	
Trasporto e smaltimento rifiuti liquidi da bonifica cisterna	kg	0,26	4.000,00	1.040,00	Pavoni Rossano srl	
Esecuzione scavo ed estrazione serbatoio (costo stimato di massima)	ore	85,00	8,00	680,00	Baldini Sandro srl	
Consegna cassoni	viaggio	200,00	1,00	200,00	Baldini Sandro srl	
Campionamento ed analisi terreni pareti e fondo scavo	cad	280,00	5,00	1.400,00	New Land srl	
Campionamento ed analisi terre da scavo per smaltimento	cad	250,00	1,00	250,00	New Land srl	
Smaltimento  terreno non pericoloso a recupero	kg	105,00	20,00	2.100,00	da definire	
Smaltimento terreno pericoloso a recupero	kg	125,00	20,00	2.500,00	da definire	
Costo trasporto terre ad impianto 	viaggio	420,00	2,00	840,00	da definire	
Smaltimento serbatoio 	corpo	300,00	1,00	300,00	da definire	
Totale lavori	 	 	 	12.010,00	 	
oneri sicurezza 3%	 	 	 	360,30	 	
totale lavori 	 	 	 	12.370,30	 	
IVA sui lavori	 	 	 	2.721,47	 	
Spesa complessiva prevista	 	 	 	15.091,77	 	
ACCERTATA la congruità dei prezzi unitari applicati e ritenuto quindi il preventivo meritevole di approvazione, tenuto conto che le Ditte interessate (indicate nel prospetto) sono in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori;  
PRECISATO che l’intervento di bonifica sarà realizzato nei giorni 5 e 6 giugno p.v., previa comunicazione da inoltrare alla provincia di Macerata ed all’ARPAM per i controlli di competenza;
ACCERTATO che al finanziamento della spesa di € 15.091,77 potrà farsi fronte con le somme a disposizione dell’Amministrazione previste alla voce B5 (Imprevisti e lavori economia + economia ribasso d’asta IVA compresa) del quadro economico progettuale aggiornato a seguito dell’affidamento dei lavori principali, disponibile per € 173.735,66;
D E T E R M I N A
1.	DI RENDERE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	DI PRENDERE ATTO che, a seguito della aggiudicazione dei lavori principali, il quadro economico del  progetto dei lavori di demolizione scuole elementare e materna site in Via Roma approvato con Delibera della Giunta Comunale n.24 del 28.2.2017  viene ad essere così modificato:
1.	Importo lavori 				€      73.428,91			€      80.521,34
	oneri per la sicurezza			€        7.092,43  
	Importo lavori a base di contratto	€      80.521,34
2.	Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
  	B1) IVA su lavori 10%			          	€        8.052,13
	B2) Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase
	di progettazione e direzione			€        7.565,25
	B3) Contributo previdenziale 5% B3)		€           378,26
	B4) IVA 22% su spese tecniche			€        1.747,57
	B5) Imprevisti e lavori economia + economia 
               ribasso d’asta IVA comp.			€    173.735,45
             Sommano					€    191.478,66		€    191.478,66
             Spesa complessiva prevista						€    272.000,00  

3.	DI APPROVARE il preventivo di spesa per la rimozione e bonifica della cisterna metallica interrata della capienza di litri 6000, contenente residui di olio combustibile BTZ rinvenuta in cantiere, predisposto dal Tecnico Incaricato dalla Ditta New Land srl di Jesi, particolarmente specializzata in interventi di bonifica ambientale Ing. Tomassoni Manuel, ammontante ad una spesa complessiva di € 15.091,77, suddivisa come descritto nel preventivo riportato in premessa, con affidamento dei vari lavori alle Ditte specializzate come sopra individuate;
4.	DI PRECISARE che al finanziamento della spesa suddetta si farà fronte con le somme a disposizione dell’Amministrazione previste alla voce B5 (Imprevisti e lavori economia + economia ribasso d’asta IVA compresa) del quadro economico progettuale aggiornato a seguito dell’affidamento dei lavori principali, disponibile per € 173.735,66, con imputazione nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio, al Cap. 2838 art.1, dove risulta registrato l’impegno di spesa di € 272.000,00 assunto con la Delibera della Giunta Comunale n.24 del 28.2.2017, interamente disponibile;
5.	DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, precisando che alla liquidazione della spesa conseguente si provvederà, a lavori eseguiti, dietro presentazione da parte delle Ditte incaricate di specifiche fatture accettate da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 16-06-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 16-06-2017 al 01-07-2017.

Lì 16-06-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO