COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.395 del Reg. Data 14-12-018

Oggetto: SISMA  2016  -  LAVORI  DI  MESSA IN SICUREZZA ALA
CHIOSTRO  INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI FIOLCE.
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 01

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE
-	Con Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 07.08.2018:
o	è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Messa in sicurezza ala est del chiostro interno nel Cimitero comunale di Fiolce”, redatto dall’Ing. Cinzia Scopece, istruttore tecnico direttivo dipendente di questa Amministrazione, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A 3944, dal quale risultava un importo totale di quadro economico di Euro 39.000,00 come appresso dettagliato:

Importo lavori						€      33.673,24 
	oneri per la sicurezza					€        2.334,20  
	Importo lavori a base di gara				€      31.339,04

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
Imprevisti e spese su fattura IVA compresa	€        1.959,43
IVA 10% sui lavori				€        3.367,32
Sommano						€        5.326,76

Spesa complessiva prevista			 	€      39.000,00 

o	è stata impegnata la somma corrispondente alla spesa complessiva come risultante dal quadro tecnico economico e pari a € 39.000,00 con impegno n. 267/2018, capitolo 2838-1;

-	Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 335 del 25.10.2018 detti lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta DINAMICA COSTRUZIONI SNC di Apiro (MC) per l’importo di € 29.818,54 oltre IVA di legge, di cui € 2.334,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che 
o	il direttore dei lavori l’ing. Cinzia Scopece ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche alle lavorazioni previste dal progetto approvato e in particolare sostituire la cinturazione parziale vincolata della cappellina esterna con la sostituzione dello strato di impermeabilizzazione presente sulla copertura della suddetta cappellina privata, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua all’interno della volta affrescata;
o	sulla base dell’effettiva organizzazione del cantiere da parte dell’impresa esecutrice il direttore dei lavori ha valutato l’opportunità di eliminare alcune voci di computo metrico e adottarne altre più idonee;
o	per l’approvazione delle stesse modifiche è stata predisposta una variante;

VISTI gli elaborati prodotti dall’Ing. Scopece in data 12.12.2018:
-	01var Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Tecnico Economico di Variante;
-	02var Computo metrico di variante;
-	03var Elenco Prezzi e Analisi Prezzi;
-	TAV 01_var;
-	TAV 03_var;
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che l'importo dei lavori a seguito del progetto di variante viene ad essere così modificato:

	LAVORI IN APPALTO
	Importo lavori								€  32.733,64
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€    2.189,20
	Importo lavori soggetto a ribasso					€  30.544,44
	Deduzione ribasso offerto (12,300%)				          -€     3.756,97

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€  28.976,67

Importo perizia di variante IVA inclusa                                                    €  31.874,34

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

	PROGETTO APPROVATO	PROGETTO AGGIUDICATO	PERIZIA DI VARIANTE	
importo lavori	33.673,24 €	33.673,24 €	32.733,64 €	
sicurezza non soggetta a ribasso	2.334,20 €	2.334,20 €	2.189,20 €	
importo lavori soggetto a ribasso	31.339,04 €	31.339,04 €	30.544,44 €	
RIBASSO OFFERTO -12,300%	0,00 €	3.854,70 €	3.756,97 €	
TOTALE IMPORTO LAVORI	33.673,24 €	29.818,54 €	28.976,67 €	
				
Somme a disposizione				
imprevisti e spese su fattura con iva	1.959,44 €	1.959,44 €	2.899,04 €	
economie da ribasso	0,00 €	3.854,70 €	3.756,97 €	
economie da ribasso per iva	0,00 €	385,47 €	469,66 €	
iva su lavori	3.367,32 €	2.981,85 €	2.897,67 €	
SOMME A DISP	5.326,76 €	9.181,47 €	8.999,54 €	
				
TOTALE APPALTO	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	

DATO ATTO che il sig. Antonio Iacono titolare della Ditta assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Cinzia Scopece;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale stipulato secondo l’uso del commercio, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcuna integrazione all’impegno di spesa già assunto;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza ala est del chiostro interno nel Cimitero comunale di Fiolce”, redatta dall’Ing. Cinzia Scopece in data 12.12.2018;
3.	Di approvare il Quadro Tecnico Economico di Variante, dal quale risulta un importo complessivo dell’appalto di € 39.000,00, suddiviso come sopra descritto;
4.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 19-12-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 19-12-2018 al 03-01-2019.

Lì 19-12-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO