COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.234 del Reg. Data 27-07-017

Oggetto: LAVORI  PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PIAZ=
ZALE ANTISTANTE EREMO DI SAN LIBERATO  REGIMAZIONE
ACQUE  METEORICHE    - APPROVAZIONE PERIZIA DI VA=
RIANTE E SUPPLETIVA.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventisette del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

	Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.9.2015, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dell’area limitrofa all’Eremo di San Liberato consistente nella nuova regimazione delle acque meteoriche”, redatto dall’Ing. Paolo Musicanti di Macerata e dal Dr. Geol. Palpacelli Stefano di Treia,  ammontante ad una spesa complessiva di € 110.000,00, suddivisa come meglio descritto nel seguente quadro economico:
A)-importo lavori a base di appalto di cui				€        79.704,77
     € 1.471,07  per  oneri di sicurezza non
     soggetti a ribasso

B) - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) - Spese tecniche per:
       Progettazione esecutiva e DL generale		€     8.271,82
       Coordinamento sicurezza progettazione		€     1.077,26
       Coordinamento sicurezza esecuzione		€     1.442,76
       Contabilità					€     1.525,18
2) – Contr.CNPAIA spese tecniche 4%		€        492,68
3) -  IVA 22% su spese tecniche+CNPAIA		€     2.818,13
4) – IVA 10% sui lavori				€     7.970,48
5) -  Indagine e rilievo geologico (comp.IVA)  	€     2.986,60
6) -  Sondaggi geologici IVA compresa		€     1.810,00
7) – Rilievi e restituzione grafica IVA compresa	€     1.500,00
8) -  Art.92 L.163/2006				€        400,32
       Sommano						€   30.295,23	€         30.295,23
       Spesa complessiva prevista					€       110.000,00
da finanziarsi interamente con fondi regionali, giusto Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Difesa del Suolo della Regione Marche n.74/DDS del 23.12.2014 avente per oggetto “L.R. 33/2014 – D.G.R. 1362/2013 – DGR n.1387 del 16.12.2014 – Programma interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo”, con il quale veniva fra l’altro assegnata a questo Comune  la somma di € 110.000,00 per messa in sicurezza area limitrofa all’Eremo di San Liberato;
	Precisato che, a seguito di gara ufficiosa, con propria Determina n.39 del 8.3.2016  detti lavori vennero affidati alla Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro, per l’offerto ribasso  del 43,266 %, per la somma netta quindi di € 45.856,18 (comprensivo di € 1.471,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  giusto contratto rep.n.1719  del 28.6.2016 e che gli stessi sono in fase di avanzamento;
	Dato atto che in fase di esecuzione dei lavori si è resa necessaria la stesura di una perizia di variante riguardante in particolare la realizzazione di una nuova tubazione di deflusso delle acque meteoriche - provenienti dalla nuova vasca di decantazione realizzata con il presente progetto - del diametro pari a mm. 1000 (in sostituzione di quella esistente del diametro di mm. 400 in parte danneggiata) che partendo dalla vasca di decantazione attraverserà tutto il piazzale fino a confluire lungo il versante a valle dello stesso, che verrà riprofilato mediante tecniche di ingegneria naturalistica, nonché  la sistemazione del piazzale con una livellazione del terreno ed eventuale riporto di ghiaietto;
Vista la perizia di variante  dei lavori di che trattasi, redatta in data luglio 2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Musicanti,  con la quale, ferma restando la spesa globale prevista di € 110.000,00 il quadro economico viene modificato come di seguito descritto:
A)-importo lavori a base di contratto di cui				€        50.441,80
     € 1.588,69  per  oneri di sicurezza non
     soggetti a ribasso

B) - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) - Spese tecniche per:
       Progettazione esecutiva e DL generale		€     8.271,82
       Coordinamento sicurezza progettazione		€     1.077,26
       Coordinamento sicurezza esecuzione		€     1.442,76
       Contabilità					€     1.525,18
2) - Contr.CNPAIA spese tecniche 4%		€        492,68
3) - IVA 22% su spese tecniche+CNPAIA		€     2.818,13
4) - IVA 10% sui lavori				€     5.044,18
5) - Imprevisti						€     1.637,35
6) - Lavori in economia IVA compresa		€   30.551,92
7) - Indagine e rilievo geologico (comp.IVA)  	€     2.986,60
8) - Sondaggi geologici IVA compresa		€     1.810,00
9) - Rilievi e restituzione grafica IVA compresa	€     1.500,00
10) -  Art.92 L.163/2006				€        400,32
       Sommano						€   59.558,20	€         59.558,20
       Spesa complessiva prevista					€       110.000,00
con un maggiore importo di lavori rispetto al contratto principale rep.1719/2016, di € 4.585,62, da affidarsi alla medesima Ditta Scavi e Condotte, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa;
Vista la perizia di variante in questione, composta dai sottoelencati allegati:
1-	Relazione tecnica;
2-	Computo metrico estimativo di variante;
3-	Quadro economico di variante e di raffronto;
4-	Planimetria generale di variante di individuazione degli interventi;
5-	Schema atto di sottomissione;
Accertata la regolarità ed esattezza dei suddetti atti tecnici nonché la rispondenza alle norme di cui al D.Lgs.n.50/2016 e ritenuto pertanto doveroso provvedere alla relativa approvazione;
Precisato che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere per questa Amministrazione, ferma restando la spesa globale prevista di € 110.000,00;
D E T E R M I N A
1-di approvare la allegata perizia di variante e suppletiva di pronto intervento e messa in sicurezza del piazzale antistante l’Eremo di San Liberato consistente nella nuova regimazione delle acque meteoriche, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Musicanti  in data luglio 2017, ammontante ad una spesa complessiva di € 110.000,00, suddivisa come descritto in narrativa;
2-di dare atto che, per effetto della approvazione della perizia stessa, l’importo contrattuale viene aumentato dell’importo di  € 4.585,62, da affidarsi alla medesima Ditta Scavi e Condotte srl di Apiro, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa ed allegato alla citata variante;
3-di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, ferma restando la spesa globale prevista di € 110.000,00.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 27-07-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 27-07-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 27-07-2017 al 11-08-2017.

Lì 27-07-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO