COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.56 del Reg. Data 26-02-019

Oggetto: MESSA  IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE MEDIANTE DEMOLI=
ZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO, PRO=
PRIETA'  MARINANGELI  E STRAFFI, DANNEGGIATO DAGLI
EVENTI  SISMICI  DEL  30 OTTOBRE 2016-APPROVAZIONE

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   ventisei del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI E RICHIAMATI gli atti: 

•	Determina n. 153 del 18/05/2018, con la quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i, si è proceduto all’affidamento delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e collaudo dell’intervento di “Messa in sicurezza tramite demolizione di fabbricato sito in Via Capocastello (fg. 43 part. 166)”, all’Ing. Giorgio Bellesi (n. iscr. A 475 di Macerata), preventivando un corrispettivo massimo pari al 5% dell’importo lavori, ovvero a  € 1.268,80 ( di cui € 1.000,00 per servizi, € 40,00 per CNPAIA 4% ed € 228,80 per IVA al 22%) ;

•	Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 04/07/2018, con la quale è stato approvato il quadro economico relativo all’intervento di che trattasi, così suddiviso:

Lavori in appalto	
A1	Lavori a corpo e misura		€ 19.442,06	
A2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€      777,68	
A3	Importo dei lavori a base di gara		€ 18.664,38	
A4	Riduzione lavori a base di gara	0%	€ -	
A5	Importo ridotto lavori a base gara		€ 18.664,38	
A6	Totale lavori	€ 19.442,06	
				
Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e spese su fattura 5% di A6		€      991,49      	
	Tot. somme a disposiz. escluse sp. tecniche	€      991,49	
			
Spese Tecniche	
C1	Spese tecniche, progettaz., direz. lavori 		€      972,10	
C2	CNPAIA    4% spese tecniche		€        38,88	
C3	Tot. Spese tecniche	€   1.010,98 	
				
IVA	
D1	Iva sui lavori    10% di A6		€   1.944,21	
D2	Iva su spese tecniche    22% di C3		€      222,42	
	Tot. IVA	€   2.166,63	
			
E	Accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 al 2%	€      388,84	
	Tot. Somme a disposizione	€   4.557,94	
				
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 24.000,00	

•	Determina n. 291 del 19/09/2018, con la quale è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori alla Ditta Pinto Michelangelo di Stigliano (MT), che ha offerto un ribasso del 29,885% sull’importo a base di gara pari a € 18.664,38 (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), per la somma quindi di € 13.086,53 oltre a € 777,68 per oneri di sicurezza, per un totale di € 13.864,21;

PRECISATO che i lavori sono iniziati in data 05/11/2018, come risulta dal Verbale di Consegna lavori, prot. 12409;

CONSIDERATO che in data 03/12/2019, l’Impresa Esecutrice ha richiesta con propria nota ns. prot. 13613, una proroga di n. 20 giorni della data di ultimazione lavori, in seguito alle difficoltà riscontrate nell’allestimento del cantiere, causate dalla particolare ubicazione del fabbricato; 

VISTO che durante l’esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di intervento, che non hanno comunque comportato una modifica sostanziale nella spesa complessiva prevista inizialmente per l’appalto in oggetto, pari a € 24.000,00:

	PERIZIA DI VARIANTE	
importo lavori	24.714,18 €	
sicurezza non soggetta a ribasso	988,57 €	
importo lavori soggetto a ribasso	23.725,61 €	
Ribasso offerto (-29,885%)	7.090,40 €	
TOT. IMPORTO LAVORI	17.623,78 €	
		
Somme a disposizione		
imprevisti +IVA	0,00 €	
economie da ribasso + iva	2.551,69 €	
incentivo funzioni tecniche	494,28 €	
spese tecniche 5%	1.235,71 €	
Cnpaia 4%	49,43 €	
iva su lavori 10%	1.762,38 €	
IVA su spese tecniche 22%	282,73 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	6.376,22 €	
		
TOTALE APPALTO	24.000,00 €	

DATO ATTO che, in seguito all’ultimazione dei lavori, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. 174 del 07/01/2019, con il quale è stato approvato il quadro economico finale, distinto così come segue:

Lavori stato finale, di cui:		€ 25.989,00		
-	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.039,55		
-	Importo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri)		€ 24.949,45		
Ribasso 	29,885%	€ 7.456,14		
Importo al netto degli oneri per la sicurezza		€ 17.493,31		
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi		€ 1.039,55		
Totale importo lavori di contratto			€ 18.532,86	
				
Economie di ribasso + IVA		€ 0,00      		
IVA sui lavori 	10 %	€ 1.853,29		
Spese tecniche, progettaz., direz. lavori 		€ 1.299,45		
Accantonamento art. 113 Dlgs 50/2016	2%	€ 370,66		
CNPAIA  + IVA su spese tecniche	4% e 22%	€ 349,29		
Totale somme a disposizione per l’amm.ne			€ 3.872,69	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 22.405,55	
ACCERTATO che l’Impresa esecutrice Pinto Michelangelo di Stigliano (MT) ha presentato regolare fattura:

•	n. 1/PA del 08/02/2019, per un importo complessivo pari a € 20.386,15 (di cui € 18.532,86 per lavori ed € 1.853,29 per IVA al 10%);

ACCERTATO che il tecnico incaricato, Ing. Giorgio Bellesi di Macerata, ha presentato regolare fattura:

•	n. 000001-2019-1 del 04/02/2019, per un importo complessivo pari a € 1.648,74 (di cui € 1.299,45 per lavori ed € 349,29 per CNPAIA 4% e IVA al 22%);

CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione si provvederà all’inserimento dello stesso sul portale di rendicontazione speciale regionale Cohesion Work Pa;

VERIFICATO che nel capitolo 2838-1 risultano imputati:

•	€ 24.000,00 con impegno n. 252/2018, relativi al quadro tecnico economico iniziale di progetto, approvato con Delibera di Giunta. n. 68 del 04/07/2018;
•	€ 1.268,00 con impegno n. 175/2018, relativi all’affidamento dell’incarico professionale, approvato con propria Determina n. 153 del 18/05/2018;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva dell’Impresa Pinto Michelangelo di Stigliano (MT) prot. INAIL_15145130 con scadenza in data 14/06/20019 e del tecnico Ing. Giorgio Bellesi, prot. Inarcassa n. 192020 del 25/02/2019;

DETERMINA

1)	DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2)	DI APPROVARE il Certificato di Regolare esecuzione, prot. 174 del 07/01/2019 con il quale è stato approvato il quadro economico finale;

3)	DI LIQUIDARE le fatture intestate

-	all’Impresa Pinto Michelangelo di Stigliano (MT), fattura n. 1/PA del 08/02/2019, per un importo complessivo pari a € 20.386,15 (di cui € 18.532,86 per lavori ed € 1.853,29 per IVA al 10%);
-	al tecnico incaricato Ing. Giorgio Bellesi di Macerata, fattura n. 000001-2019-1 del 04/02/2019, per un importo complessivo pari a € 1.648,74 (di cui € 1.299,45 per lavori ed € 349,29 per CNPAIA 4% e IVA al 22%); 

4)	DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento, previa emanazione del Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 e ad erogazione avvenuta.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 05-03-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-03-2019 al 20-03-2019.

Lì 05-03-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO