COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.204 del Reg. Data 03-07-018

Oggetto: MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  TORRE  CIVICA SITA IN
PIAZZA A. GENTILI - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.
1

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   tre del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE
-	con propria Determinazione n. 105 del 10.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Messa in sicurezza della Torre Civica danneggiata in seguito all’evento sismico del 30/10/2016”, redatto dall’Ing. Giordano Piancatelli di Macerata (MC), dal quale risultava un importo totale dei lavori di Euro 72.139,88 come appresso dettagliato:

A)	Importo lavori					€       59.450,72 
	oneri per la sicurezza				€       23.567,60  
	Importo lavori a base di gara			€       35.883,12

B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
  	Imprevisti					€         2.972,54
  	Spese tecniche				 	€         2.972,54
  	Contributo previdenziale 4% C1)	 	€            118,90
	IVA sui lavori 10%				€         5.945,07
  	IVA 22% su spese tecniche		 	€            680,12
Sommano					€       12.689,17

Spesa complessiva prevista			 €      72.139,88 

-	con propria Determinazione n. 110 del 16.04.2018 detti lavori, a seguito di indagine di mercato estesa a 6 operatori economici, sono stati affidati definitivamente alla Ditta EDILIZIA AZZACCONI S.R.L. di San Ginesio (MC) la quale ha offerto il ribasso maggiore, per l’importo di € 45.035,39 di cui € 23.567,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori nella figura dell’Ing. Piancatelli, sentita l’Amministrazione comunale, ha ritenuto di dover predisporre una perizia di variante suppletiva per consentire l’esecuzione di interventi non differibili in conseguenza di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e per adeguare l’impostazione progettuale ai fini della salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), nonché per l’esecuzione di lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

VISTI gli elaborati relativi alla variante in corso d’opera n. 1 trasmessi dal tecnico e assunti al protocollo del Comune in data 03.07.2018 prot. 7810:
-	Relazione Tecnico-illustrativa, quadro economico di raffronto, documentazione fotografica – Tavola ST 01;
-	Computo metrico di variante n.1 – Tavola ST 03a;
-	Atto di sottomissione;

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede il riutilizzo delle economie da ribasso;

DATO ATTO che, ferma restando la spesa globale prevista, l’importo dei lavori di progetto viene ad essere così modificato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori							€     69.760,97 
oneri per la sicurezza						€     30.245,14
lavori soggetti a ribasso						€     39.515,83
deduzione ribasso offerto (40,173%)				€    -15.874,69 

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€    53.886,28

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

	PROGETTO APPROVATO		PROGETTO AGGIUDICATO: RIMODULAZIONE		PERIZIA DI VARIANTE	
importo lavori	59.450,72 €		59.450,72 €		69.760,97 €	
sicurezza non soggetta a ribasso	23.567,60 €		23.567,60 €		30.245,14 €	
importo lavori soggetto a ribasso	35.883,12 €		35.883,12 €		39.515,83 €	
Ribasso offerto -40,173%	0,00 €		-14.415,33 €		-15.874,70 €	
totale importo lavori	59.450,72 €		45.035,39 €		53.886,27 €	
						
imprevisti con iva	2.972,54 €		2.972,54 €		2.972,54 €	
economie da ribasso	0,00 €		14.415,33 €		5.564,45 €	
economie da ribasso per iva			1.441,53 €		556,44 €	
						
spese tecniche	2.972,54 €		2.972,54 €		2.972,54 €	
Cnpaia 4%	118,90 €		118,90 €		118,90 €	
						
IVA su lavori 10%	5.945,07 €		4.503,54 €		5.388,63 €	
IVA su spese tecniche	680,12 €		680,12 €		680,12 €	
somme a disposizione	12.689,16 €		27.104,49 €		18.253,61 €	
						
TOTALE APPALTO	72.139,88 €		72.139,88 €		72.139,88 €	

CONSIDERATO che il prezzo netto dei lavori aggiuntivi è stabilito in € 8.850,88 al netto del ribasso d’asta offerto al 40,173%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, esclusa l’iva al 10%, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune;

DATO ATTO che il sig. Azzacconi Sergio legale rappresentante della ditta, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Giordano Piancatelli;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma già impegnata con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 105 del 10.04.2018 e pari a € 72.139,88;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “Messa in sicurezza della Torre Civica, danneggiata in seguito all’evento sismico del 30/10/2016”, redatta dall’Ing. Giordano Piancatelli di San Ginesio (MC), con la quale si conferma la spesa totale sostenuta di € 72.139,88, suddivisa come sopra descritto;
3.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 09-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 09-07-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 09-07-2018 al 24-07-2018.

Lì 09-07-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO