COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.120 del Reg. Data 22-07-019

Oggetto: EMERGENZA  SISMA 2016-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI
ALLOGGI  DELLA  CASERMA DEI CARABINIERI - INTEGRA=
ZIONE  AL  CERTIFICATO  DI REGOLARE ESECUZIONE DEL
29/1/2018

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
•	in seguito agli eventi sismici del 2016 si è reso necessario apportare delle modifiche all’edificio di proprietà comunale denominato Caserma dei Carabinieri, poiché per la gestione dell’emergenza gli erano state assegnate nuove unità;
•	i lavori di sistemazione di suddetto edificio sito in Piazza A. Gentili sono iniziati nel novembre 2016 ed ultimati nel dicembre 2017, come risulta da Certificato di regolare esecuzione del 29/1/2018 (acquisito al prot. 3279 del 18/03/2019);
VISTA E RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 61 del 01/03/2019 con la quale è stato approvato il quadro economico finale relativo ai suddetti lavori, distinto così come di seguito indicato:

a.	QUADRO ECONOMICO FINALE	%	Importo	
a.1	Importo Lavori		46.157,94	
a.2	Ribasso offerto	10%	4.615,79	
	Importo lavori al netto del ribasso	 	€ 41.542,15	
				
b.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	 	 	
b.1	Spese tecniche relative alla progettazione	 	€ 2.340,00	
 	Sconto 	25%	€ 585,00	
 	Cassa 	5%	€ 87,75	
 	Iva  	22%	€ 405,41	
 	Totale (b.1)	 	€ 2.248,16	
b.2	Spese per il coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione	 	€ 800,00	
 	Cassa 	4%	€ 32,00	
 	Iva  	22%	€ 183,04	
 	Totale (b.2)	 	€ 1.015,04	
b.3	Imprevisti iva compresa	 	€ 0,00	
b.5	Iva sui lavori	10%	€ 4.154,21	
 	Totale delle somme a disposizione	 	€ 7.417,41	
 	 	 	 	
c.	TOTALE PROGETTO	 	€ 48.959,56 	

DATO ATTO che con Decreto del soggetto attuatore sisma 2016 n. 663 del 28/05/2019 è stato approvato l’importo pari a € 45.853,03 sui complessivi € 48.959,56 derivanti dal quadro economico finale, poiché alcune delle lavorazioni eseguite non rientravano in quelle ammissibili a finanziamento (riparazione e tinteggiatura balaustre);

RICHIAMATO il Certificato di regolare esecuzione, del 29/1/2018 (prot. 3279 del 18/03/2019), con il quale si attestava la data di ultimazione lavori, avvenuta il 20/12/2017 e veniva approvato il quadro economico finale sopra riportato;

PRECISATO che, con Determinazione dell’Area Tecnica-Urbanistica n. 100 del 05/07/2019 veniva richiamata la contabilità di cui al prot. 4474 del 15/04/2019, facente riferimento a delle lavorazioni effettivamente eseguite dall’Impresa Cavaliere Umberto di Sarnano e non comprese nell’originario quadro economico, così descritte: 

1.	Container per macerie e tasse discarica a corpo: 				€ 240,00
2.	Realizzazione impianto di scarico ad innesto per un bagno 
con collegamento allo scarico di fogna 600x2 :			€1.200,00
3.	Punti acqua con scarico per cucine n. 2x280:				€ 560,00
4.	Punti acqua per boiler n. 2x280:						€ 560,00
5.	Fornitura e posa d’intonaco per riprese in bagno (per montaggio		€1.055,60
del nuovo rivestimento) mq 40,6x26
6.	Rubinetti filtro n. 12x7,50:						€ 90,00
7.	Saliscendi doccia:							€ 120,00
8.	Cassette acqua con catis completo a corpo:				€ 400,00
9.	Impianto elettrico a completamento delle lavorazioni già effettuate
presso l’appartamento del comandante:					€ 1.700,00
10.	Verniciatura termosifoni a corpo:					€ 684,36
11.	Verniciatura delle finestre di un appartamento n. 10x120,00:		€ 1.200,00
12.	Fornitura e posa nuova porta:						€ 420,00
13.	Lavorazioni in economia ore 59x25:					€ 1.475,00

Totale lavorazioni eseguite:						€ 9.704,96
IVA su lavori 10%:							€ 970,49

Totale:									€ 10.675,45

DATO ATTO che con medesima Determinazione dell’Area Tecnica-Urbanistica n. 100 del 05/07/2019 a seguito di apposita istruttoria veniva accertata l’effettiva esecuzione dei suddetti lavori la cui contabilità non era stata inserita nel quadro economico finale per mero errore materiale da parte di codesto Ufficio Tecnico e pertanto veniva rettificato il quadro economico finale come segue:

a.	QUADRO ECONOMICO FINALE	%	Importo	
a.1	Importo Lavori		56.941,23	
a.2	Ribasso offerto	10%	5.694,12	
	Importo lavori al netto del ribasso	 	€ 51.247,11	
				
b.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	 	 	
b.1	Spese tecniche relative alla progettazione	 	€ 2.340,00	
 	Sconto 	25%	€ 585,00	
 	Cassa 	5%	€ 87,75	
 	Iva  	22%	€ 405,41	
 	Totale (b.1)	 	€ 2.248,16	
b.2	Spese per il coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione	 	€ 800,00	
 	Cassa 	4%	€ 32,00	
 	Iva  	22%	€ 183,04	
 	Totale (b.2)	 	€ 1.015,04	
b.3	Imprevisti iva compresa	 	€ 0,00	
b.5	Iva sui lavori	10%	€ 5.124,71	
 	Totale delle somme a disposizione	 	€ 8.387,91	
 	 	 	 	
c.	TOTALE PROGETTO	 	€ 59.635,02	

DATO ATTO che con il provvedimento di cui alla Determinazione n. 100 del 5/7/2019 si è inteso pertanto approvare la perizia di variante del progetto indicato;

RITENUTO di dover integrare il Certificato di regolare esecuzione redatto il 29/1/2018 con l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori non verificati con tale certificato;

DETERMINA

-	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-	Di dare atto che la propria Determinazione n. 100 del 5/7/2019, contenente il quadro di raffronto economico,  è da intendersi quale perizia di variante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto dei lavori di sistemazione dell’edificio ubicato in Piazza Gentili e denominato Caserma dei Carabinieri;
-	Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del sottoscritto Responsabile del Servizio, allegato al presente atto e sottoscritto dal rappresentante legale della ditta Cavaliere Umberto di Sarnano, che integra e sostituisce il certificato approvato in data 29/1/2018;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 26-07-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 26-07-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019.

Lì 26-07-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO