COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.288 del Reg. Data 22-09-017

Oggetto: MESSA  IN  SICUREZZA CHIESA COLLEGIATA DANNEGGIATA
DALL'EVENTO  SISMICO  DEL 30.10.2016- APPROVAZIONE
VARIANTE N. 1 DEL 12.09.2017

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   ventidue del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Determina n. 174 del 18.11.2016 è stato approvato il verbale di somma urgenza, nonché gli elaborati progettuali dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Collegiata in Piazza A. Gentili, redatti dall’Ing. Giordano Piancatelli in data 5 novembre 2016 e visionati anche dal Commissario straordinario per l’emergenza Vasco Errani e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile l’Ing. Fabrizio Curcio, i quali hanno verbalmente espresso il loro parere favorevole invitando a procedere con sollecitudine all’avvio dei lavori di messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori danni al bene monumentale di cui all’oggetto del presente atto;

Dagli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Giordano Piancatelli risulta una spesa complessiva di € 250.000,00, suddivisa come appresso indicato:
1)	Importo lavori e fornitura a base di appalto comprensivo		€ 180.101,95
	di € 7.160,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
2)	Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
a)	IVA sui lavori in ragione del 22%				€ 39.622,43
b)	Compenso RUP art.92 – 0,4*2%					€   1.440,82
c)	Spese tecniche progettazione,DL e sicurezza			€ 22.838,40
d)	Spese per prove su materiali					€   1.000,00
e)	Imprevisti								€   4.996,41
      Sommano								€    69.898,05

Spesa complessiva prevista						€ 250.000,00

DATO ATTO che, con Determina n. 174 del 18.11.2016, detti lavori vennero definitivamente affidati, alla Ditta Edilizia Azzacconi srl di San Ginesio, per l’importo di € 169.379,61, di cui € 7160,95 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto pari al 6,2%;
CONSIDERATO che:
o	Durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle lavorazioni differenti, non prevedibili in fase progettuale, coincidenti principalmente con il grave stato di ammaloramento degli elementi in legno delle capriate del tetto, in corrispondenza degli appoggi, che ne richiedono un’immediata messa in sicurezza;
o	per l’approvazione delle stesse è stata predisposta una variante suppletiva finalizzata al miglioramento dell’opera e delle sue funzionalità, nel rispetto anche delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che operano in un contesto caratterizzato da un grave quadro fessurativo del monumento;
o	gli elaborati della variante sono stati consegnati dall’Ing. Giordano Piancatelli in data 22.08.2017;

VISTI gli elaborati trasmessi:
o	ST 01- Relazione tecnico-illustrativa; quadro economico; documentazione fotografica;
o	ST 02- Computo metrico
o	ST 03-Intervento di progetto: pianta, prospetto, sezione;
o	ST 04- Intervento di progetto: particolari costruttivi;
o	Atto di sottomissione;
o	Verbale di concorda mento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede il riutilizzo delle economie da ribasso e l’utilizzo della somma a disposizione alla voce “Imprevisti” del quadro economico per “l’esecuzione di interventi non differibili in conseguenza a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale” ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, coincidenti principalmente con il grave stato di ammaloramento degli elementi in legno delle capriate del tetto in corrispondenza degli appoggi, che ne richiedono un’immediata messa in sicurezza;
DATO che, ferma restando la spesa globale prevista, il quadro economico di progetto viene ad essere così modificato:
1.	Importo dei lavori in variante (compresi oneri di sicurezza) 		€ 193.731,82
2.	Oneri di sicurezza inclusi nel prezzo 					€     7.702,88
3.	Deduzione del ribasso del 6,2% 					€ - 11.533,79

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza) 	€ 182.198,03

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

LAVORI	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
Lavori	€ 180.101,95	€ 193.731,82	
Costo sicurezza inclusa nei prezzi	€ 7.160,95	€ 7.702,88	
Costo sicurezza aggiuntiva	€ 0,00	€ 0,00	
Costo sicurezza totale (non soggetto a ribasso)	€ 7.160,95	€ 7.702,88	
Lavori soggetto a ribasso	€ 172.941,00	€ 186.028,94	
Ribasso offerto (-6,2%)	€ 0,00	-11.533,79	
Totale importo lavori	€ 180.101,95	182.198,03	

SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
D1) IVA al 22% 	€ 39.622,43	€ 40.083,57	
D2a) art. 92 -0,4*2%	€ 1.440,82	€ 0,00	
D3a) Spese tecniche prog, DL e sicurezza	€ 22.838,40	€ 22.838,40	
D4) Spese per prove sui materiali	€ 1000,00	€ 0,00	
D5) Imprevisti	€ 4.996,41	€ 0,00	
D6) Economie da ribasso	€ 0,00	€ 4.880,01	
D7) Economie da ribasso per Iva	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Somme a disposizione	€ 69.898,05	€ 67.801,98	
TOTALE COMPLESSIVO 
PROGETTO (A+B)	          	€ 250.000,00	€ 250.000,00	

CONSIDERATO che il prezzo netto dei lavori aggiuntivi è stabilito in € 12.818,42 al netto del ribasso d’asta al 6,2%, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa l’Iva al 22%, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune;
DATO ATTO che il signor Azzacconi Sergio, in qualità di legale rappresentante dell’impresa, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giordano Piancatello;
CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto, oltre che ai prezzi riportati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara;
	DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, ferma restando la spesa globale prevista di € 250.000,00;

D E T E R M I N A

1.	di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Collegiata in Piazza A. Gentili, redatta dall’Ing. Giordano Piancatelli in data 12.09.2017, con la quale si conferma la spesa totale sostenuta in € 250.000,00, suddivisa come sopra descritto;
3.	di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, ferma restando la spesa globale prevista di € 250.000,00.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 17-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 17-05-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018.

Lì 17-05-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO