COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.245 del Reg. Data 02-08-017

Oggetto: Interventi  di somma urgenza ai sensi dell'art. 7,
comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n.
399  del 10/10/2016 su aziende private per consen=
tire  la continuità delle attività produttive zoo=

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   due del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che a seguito della crisi sismica, avviatasi in data 24 agosto 2016 nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, si sono verificati gravi danni alle strutture delle imprese zootecniche sul territorio comunale, con conseguente rischio per la continuità produttiva, la sofferenza degli animali allevati, che non dispongono di adeguati ricoveri, e la garanzia delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, per la tutela della sicurezza alimentare;

Visto che in data 14/11/2016, prot. 807634, il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile ha richiesto di procedere alla realizzazione degli alloggiamenti agricoli per esigenze abitative rurali e per le stalle e i fienili secondo le regole per la somma urgenza, tenendo apposito incontro al fine di coordinarne gli interventi in data 16 novembre 2016, presso l’E.R.A.P. di Macerata;

Richiamato l’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. lgs. n. 50/2016;

Visti inoltre:
•	il verbale di somma urgenza redatto in data 21.11.2016 a firma del Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale sono stati affidati i lavori in esso indicati all’impresa EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e c. sas, con sede in C.da Santa Croce n. 80/b di San Ginesio (MC), al fine di provvedere, in sostituzione degli edifici e strutture zootecniche utilizzate dal conduttore dell’allevamento del Sig. De Santis Eusebio codice allevamento 046MC098, inagibili e sgombrati a causa del sisma in premessa, alla sistemazione dell’area destinata ad accogliere l’imminente fornitura in locazione di n. 1 modulo MAPRE (modulo abitativo prefabbricato rurale emergenziale) e l’imminente fornitura di n. 2 ricoveri temporanei per 7 bovini e 60 ovini, consistente nel livellamento della superficie, realizzazione di opere fondali e di urbanizzazione (servizi elettrici, idrici e fognatura); 
•	la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta in data 12.10.2016, a firma dei tecnici della Regione Marche, che prevede una stima presunta della spesa pari ad € 31.751,22 oltre IVA di Legge; 
•	l’offerta economica della ditta esecutrice la quale ha dichiarato di eseguire i lavori al prezzo complessivo di Euro 30.322,42, compresi € 3.175,12 per oneri di sicurezza, a seguito del ribasso percentuale del 5,00 % ed esclusa iva; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 30.11.2016 con la quale si è proceduto all’approvazione della perizia e del verbale di somma urgenza per la realizzazione degli interventi in parola;

Dato atto che i lavori sono regolarmente iniziati in data 21.11.2016 ma che, subito dopo l’avvio, si sono riscontrati degli errori progettuali, in particolare sull’intervento di costruzione delle due piazzole per i moduli stalla si è rilevato:
•	ampliamento della superficie di scavo di sbancamento delle due piazzole;
•	le linee degli impianti elettrico ed  idrico, non erano di metri 30 come inizialmente previsto, ma bensì di metri 50 e metri 80 che di conseguenza ha portato ad un aumento delle quantità di scavo, di rinterro nonchè delle tubazioni e dei cavi degli stessi impianto;
•	durante l’esecuzione degli scavi per l’impianto elettrico, è stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici ENEL i quali hanno richiesto lo spostamento del contatore in quanto posto a ridosso di un fabbricato pericolante indicando nel contempo la nuova posizione posta all’imbocco della proprietà del sig. De Santis e quindi si è dovuto procedere con l’esecuzione di un nuovo scavo per metri 85 oltre alla fornitura e posa di cavi e successivo rinterro; 
•	aumento delle quantità di materiale per il rinterro degli scavi e soprattutto per il livellamento delle due piazzole;

Quanto all’intervento relativo alla realizzazione della piazzola per la posa del modulo abitativo MAPRE, allo stesso modo dei moduli per stalle, sono state riscontrate delle mancanze e degli errori di progettazione, consistenti in:
-	mancanza di tutte le opere relative alla fondazione come fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, delle casseformi e della rete elettrosaldata;
-	aumento della superficie per lo scavo a sezione obbligata per la piattaforma per il modulo;
-	diversa lunghezza degli scavi per le linee elettriche, acqua e fognatura, con conseguente aumento delle quantità delle tubazioni, dei cavi e dei rinterri;

Tutte le suddette opere aggiuntive, determinate in € 7.546,39 per i moduli stalle e € 5.630,65 per il modulo abitativo, sono state eseguite perché non previste nel progetto iniziale redatto dalla Regione Marche Servizio Ambiente ed Agricoltura, evidenziando che l’errore è stato comprensibilmente dovuto alla velocità con cui sono stati eseguiti i sopralluoghi e i successivi progetti;

Trattandosi inoltre di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, non ha permesso l’interruzione delle opere per la redazione della perizia di variante, pertanto, comunicati telefonicamente i relativi importi aggiuntivi ai funzionari della Regione Marche, si è deciso di procedere ugualmente apportando gli stessi prezzi e condizioni dell’appalto iniziale e assegnando ulteriori 20 giorni per il termine dei lavori in parola.

Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori avvenuta in data 31.12.2016, il Direttore dei lavori Geom. Sergio Marcelli, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:
•	Certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo  risultante dallo stato finale;
•	Stato finale dei lavori e Quadro Economico Finale, da cui risulta che l’importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice  ammonta ad € 29.397,55 oltre iva di Legge e secondo il seguente quadro tecnico economico finale:
Lavori a base di appalto			
Importo lavori moduli stalle	€ 30.782,78		
Importo lavori modulo abitaz.	€ 10.819,37		
Totale lavori	€ 41.602,15		
Oneri per sicurezza	€ 8.320,43		
Importo lavori a base di gara	€ 33.281,72		
Ribasso  5%	-	€ 1.664,09		
Importo ridotto		€ 31.617,63	
Oneri sicurezza		€ 8.320,43	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 39.938,06	
			
Somme a disposizione			
Iva su lavori   (10%)	€ 3.993,81		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.993,81	
TOTALE PROGETTO		€ 43.931,87	

Accertata la regolarità dei lavori eseguiti si ritiene di dover procedere alla liquidazione del dovuto; 

Dato Atto che:
•	il CIG assegnato, per i lavori di realizzazione di piazzola per modulo abitativo (MAPRE),  è il seguente: ZEE1F9D1F2 ;
•	il CIG assegnato, per i lavori di realizzazione di piazzole per modulo bovini e modulo ovini,  è il seguente: ZCA1F9D20C ;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1)	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2)	Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 05.06.2017, che si allega alla presente determinazione. 

3)	Di liquidare alla Ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e c. sas, con sede in C.da Santa Croce n. 80/b di San Ginesio (MC), previa presentazione di regolare fattura e verifica regolarità contributiva, i seguenti importi da fatturarsi con due diverse note:
•	€ 10.386,60 + € 1.038,66 per IVA in ragione del 10%, per i lavori di realizzazione di piazzole per modulo bovini e modulo ovini;
•	€ 29.551,46 + € 2.955,15 per IVA in ragione del 10%, per i lavori di realizzazione di piazzola per modulo abitativo (MAPRE);

4)	Che per la liquidazione della spesa complessiva di € 43.931,87, si dovrà far fronte nel seguente modo:
•	Per € 33.354,66 con impegno di spesa n. 401 del 31.12.2016, assunto con Delibera di Giunta n. 72 del 30.11.2016;
•	Per € 10.577,21 con impegno di spesa da assumere con il presente atto sul capitolo 2838 art. 1;

5)	Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per l’integrazione dell’impegno di spesa a la successiva emissione del mandato di pagamento.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 31-08-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 31-08-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 31-08-2017 al 15-09-2017.

Lì 31-08-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO