COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.255 del Reg. Data 07-08-018

Oggetto: SISMA  2016  -  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
CHIESA  MADONNA  DELLA  CONSOLAZIONE  IN LOCALITA'
FIOLCE,   DANNEGGIATA  DAGLI  EVENTI  SISMICI  DEL
2016. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   sette del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE 
-	con Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 23.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “messa in sicurezza chiesa Madonna della Consolazione localita’ Fiolce, danneggiata dagli eventi sismici del 2016”, redatto dall’Ing. Andrea Milillo istruttore tecnico presso codesta pubblica amministrazione iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Ancona n.2524 dal quale risultava un importo totale dei lavori di Euro 29.000,00 come appresso dettagliato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori					€      21.898,84 
oneri per la sicurezza				€        6.736,60  
Importo lavori a base d’appalto			€      15.162,24

B)	SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti					€        4.066,64
IVA 10% su lavori 				€        2.189,88
Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 2%		€	437,98
IVA 10% su lavori				€        2.189,88
IVA 10% su imprevisti				€	406,66
       Sommano					€        7.101,16

Importo complessivo progetto iniziale		€    29.000,00

-	Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 191 del 20.06.2018 detti lavori sono stati affidati definitivamente alla Ditta impresa edile Chiappini Germano di San Ginesio (MC) per l’importo di € 20.685,86 di cui € 6736,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che 
o	durante l’esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali, in seguito ad un’evoluzione del quadro fessurativo dell’edificio intervenuta successivamente alla redazione del progetto, al fine di adeguare le opere previste alla reale situazione dei luoghi rilevata in corso d’opera;
o	per l’approvazione delle stesse è stata predisposta una variante suppletiva finalizzata all’esecuzione di opere non differibili in conseguenza dei rinvenimenti imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale;

VISTI gli elaborati trasmessi dall’Ing. Milillo e assunti al protocollo:
-	Relazione Tecnico-illustrativa, 
-	Elaborato Grafico di variante;
-	Elaborato Economico di variante;
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi.

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede il riutilizzo delle economie da ribasso e l’utilizzo della voce “Imprevisti” del quadro economico ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ferma restando la spesa globale prevista, l’importo dei lavori di progetto viene ad essere così modificato:

A)	LAVORI IN APPALTO
Importo lavori							€      27.051,18 
oneri per la sicurezza						€        8.260,20
lavori soggetti a ribasso						€      18.790,98
deduzione ribasso offerto (-8%)					€    -   1503,28 

Importo netto perizia di variante (compresi oneri di sicurezza)		€    25.547,90

CONSIDERATO il quadro economico di raffronto così derivato:

	PROGETTO APPROVATO		PROGETTO AGGIUDICATO: 		PERIZIA DI
VARIANTE n.1	
importo lavori	21.898,84 €		21.898,84 €		27.051,18 €	
sicurezza non soggetta a ribasso	6.736,60 €		6.736,60 €		8.260,20 €	
importo lavori soggetto a ribasso	15.162,24 €		15.162,24 €		18.790,98 €	
Ribasso offerto -8%	0,00 €		-1.212,98 €		-1.503,28 €	
totale importo lavori	21.898,84 €		20.685,86 €		25.547,90 €	
						
imprevisti 	4.066,64 €		4.066,64 €		417,57 €	
economie da ribasso	0,00 €		1.212,98 €		0,00 €	
Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 2%	437,98 €		437,98 €		437,98 €	
IVA 10% su lavori	2.189,88 €		2.068,59 €		2.554,79 €	
IVA 10% su imprevisti	406,66 €		406,66 €		41,76€	
IVA 10% su economie da ribasso	0,00 €		121,30 €		0,00 €	
somme a disposizione	7.101,16 €		8.314,14 €		3.452,10 €	
						
TOTALE APPALTO	29.000,00 €		29.000,00 €		29.000,00 €	

CONSIDERATO che il prezzo netto dei lavori aggiuntivi è stabilito in € 4.862,04 al netto del ribasso d’asta offerto al 8,00%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, esclusa l’iva al 10%, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune;

DATO ATTO che il sig. Chiappini Germano titolare della ditta omonima, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Andrea Milillo;

CONSIDERATO che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale stipulato secondo l’uso del commercio, e agli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto;

DATO ATTO che l’approvazione del nuovo quadro economico di variante non comporta alcun maggior onere per questa Amministrazione, poiché la spesa globale prevista rientra nella somma già impegnata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.05.2018 e pari a € 29.000,00;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la variante al quadro economico del progetto dei lavori di “messa in sicurezza chiesa Madonna della Consolazione località Fiolce, danneggiata dagli eventi sismici del 2016”, redatto dall’Ing. Andrea Milillo, con la quale si conferma la spesa totale sostenuta di € 29.000,00, suddivisa come sopra descritto;
3.	Di dare atto che l’approvazione del quadro economico non comporta alcun maggiore onere per questa Amministrazione.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 09-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 09-10-2018					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 09-10-2018 al 24-10-2018.

Lì 09-10-2018				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO