COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 104 DEL 07-04-2020

Registro Generale n. 173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA

N. 104 DEL 07-04-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DELLA DITTA BATTAGLIA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA ALDO MORO DANNEGGIATA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE S.A.E. - CIG ZB027F64BB.	

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO: 
- che i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre 2016, hanno provocato danni ingenti e diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato del Comune di Pieve Torina;
- nell’ambito della ricostruzione post sisma si è reso necessario il recupero della viabilità delle strade comunali, nello specifico il rifacimento della strada VIA Aldo Moro;
- che dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali si è riscontrato uno stato di degrado pregresso, ulteriormente aggravato a causa delle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli automezzi impegnati per la costruzione delle aree Soluzioni Abitative di Emergenza, ponendo in essere una situazione di pericolo nel transito veicolare;
- che con nota prot.n. 10895 del 11/10/2018 il Comune di Pieve Torina ha trasmesso il progetto per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, tra le quali la strada di via Aldo Moro;
RICHIAMATA l’OCDPC n. 388/2016 che all’articolo 1, comma 1, individua i soggetti attuatori degli interventi urgenti tra cui l’adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state istallate le Soluzioni Abitative di Emergenza; 
RICHIAMATA l’OCDPC n. 394/2016 che all’art. 3, comma 5, e all’articolo 5 conferisce i poteri per la realizzazione degli interventi urgenti tra cui l’adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state istallate le Soluzioni Abitative di Emergenza;
RICHIAMATA l’OCDPC n. 489/2017 che all’articolo 3, comma 1, lett. a, prevede: “I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016 al fine di garantire la realizzazione delle seguenti iniziative: a) l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE)”;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di via Aldo Moro redatto dall’ufficio tecnico, composto dai seguenti elaborati:
-	Relazione tecnico illustrativa;
-	Computo metrico estimativo;
-	Quadro tecnico economico;
-	Documentazione fotografica;
-	Elaborati grafici;
per un costo complessivo dell’intervento pari ad € 38.731,34, così ripartiti: € 33.139,53 per lavori, di cui € 32.145,34 per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 994,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 3.313,95 per IVA su lavori (10%); € 99,42 per prove di laboratorio; € 21,87 per IVA al 22% su prove di laboratorio; € 165,70 per Incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 (2%); € 132,56 per spese tecniche su collaudo finale; € 5,30 per CNPAIA 4% su spese tecniche; € 30,33 per IVA 22% sulle spese tecniche di collaudo e CNPAIA; € 1.656,98 per Imprevisti; € 165,70 per IVA su Imprevisti;
PRESO ATTO della nota del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, soggetto attuatore sisma 2016, prot.n. 1374879 del 13.12.2018, con la quale si autorizzano ai sensi dell’OCDPC n. 489/2017, gli interventi previsti dal progetto elaborato dal Comune di Pieve Torina e si attribuisce la relativa spesa alla misura n. 15 della Contabilità Speciale n. 6023; 
RICHIAMATA la determinazione dell’area Tecnica n. 91 del 09/04/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento degli strati di usura e binder della pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale in via Aldo Moro” all’impresa BATTAGLIA SRL con sede in Via Pio La Torre n. 7 – 62036  Pieve Torina (MC), P.IVA 01738530433, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, con un ribasso pari al 2,50% e cioè con un importo contrattuale di € 32.335,90 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 994,19;
RICHIAMATA la determinazione dell’area Tecnica n. 215 del 02/08/2019 con la quale é stata liquidata la somma di € 30.084,63 oltre iva a 10%, quindi un importo complessivo di € 33.093,09, a favore della ditta Battaglia srl, per i lavori di ripristino dell’asfalto sulla strada comunale via Aldo Moro, come risultante dalla documentazione del 1^ SAL alla data del 09/07/2019;
VISTA ed ESAMINATA la documentazione di Variante redatta dal Direttore dei lavori il 03/04/2020 composta dai seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco prezzi di Variante;
- Quadro di raffronto;
- Stato finale dei lavori;
dalla quale si evince un aumento dell’importo contrattuale, entro il limite del 15%, da € 32.335,90, di cui € 31.341,71 per lavori ed € 994,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 37.183,44, di cui € 36.040,22 per lavori ed € 1.143,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO ed ESAMINATO l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 22 comma 4 del DM 49/2018;
DATO ATTO dalla documentazione sopra menzionata risulta un credito all’impresa pari ad € 7.098,81 oltre iva al 10% e quindi un importo complessivo di € 7.808,69, al netto delle somme liquidate con la determinazione n. 215 del 02/08/2019;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e portati a termine;
DATO ATTO che il CIG relativo ai lavori in questione è il seguente: CIG ZB027F64BB;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto, previa emissione di regolare fattura;
PRESO ATTO che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’articoli 4 del D.Lg. 165/01;
DATO ATTO che l’incremento dell’importo contrattuale, pari ad € 4.847,54, trova copertura tra le economie derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in loc. Casavecchia e in via Le Piane;
RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e della susseguente liquidazione a seguito dell’emissione di regolare fattura;
RITENUTO che la spesa delle opere da realizzarsi è da imputare alla contabilità speciale per l’emergenza tenuta dalla Regione Marche;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;
VISTA l’ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
2) DI APPROVARE la Variante redatta dal Direttore dei lavori il 03/04/2020 composta dai seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo di variante;
- Elenco prezzi di Variante;
- Quadro di raffronto;
- Stato finale dei lavori;
dalla quale si evince un aumento dell’importo contrattuale, entro il limite del 15%, da € 32.335,90, di cui € 31.341,71 per lavori ed € 994,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 37.183,44, di cui € 36.040,22 per lavori ed € 1.143,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3) DI AUTORIZZARE il Direttore dei Lavori all’emissione del relativo Certificato di Pagamento;
4) DI LIQUIDARE per i lavori di rispristino dell’asfalto sulla strada comunale in via Aldo Moro, l’importo di € 7.098,81 oltre iva al 10% e quindi l’importo complessivo di € 7.808,69, a favore della ditta BATTAGLIA SRL p.iva 01738530433, previa emissione di regolare fattura – CIG ZB027F64BB;
5) DI IMPUTARE la spesa di euro 7.808,69 al capitolo 2449/1 del Bilancio 2020 in fase di redazione.
6) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l’emergenza istituita presso la Regione Marche – voce n.15;
7) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to LUCCIO ANNA RITA	

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  07-04-2020 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to MANCINELLI LUANA	

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-04-2020    al 22-04-2020
Lì  07-04-2020

	IL RESP.AREA TECNICA	
	F.to Luccio Anna Rita	

Copia conforme all’originale.
Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	LUCCIO ANNA RITA