COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 13-02-2018

Registro Generale n. 77

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA

N. 58 DEL 13-02-2018

Ufficio: TECNICO

Oggetto: CRISI SISMICA 2016. REALIZZAZIONE FONDAZIONE SCALA DI EMERGENZA E DI LOCALE TECNICO, OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "ISTIT. COMPRENSIVO MONS. PAOLETTI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE FATTURA - OTTOERRE GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	

L'anno  duemiladiciotto addì  tredici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

-Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 10.06.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo inerente il suddetto intervento di realizzazione di opere di fondazione per la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado “Istituto comprensivo Mons. Paoletti”;	

-Richiamata la determina dell’U.T.C. n.176 del 23/06/2017, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in parola, alla Ditta OTTOERRE GROUP SRL UNIPERSONALE con sede a Roma (RM) in Via Brisbane, 42; 

-Considerato che nell’appalto non risultava inserita la fondazione della scala di emergenza e del vano tecnico, oltre che la sistemazione dell’area esterna con relative opere di urbanizzazione, inerenti l'intervento in questione;

-Vista la quantificazione della spesa relativa le opere di completamento sopra specificate, in euro 60.974,49; 

-Vista la disponibilità della ditta OTTOERRE GROUP S.R.L. UNIPERSONALE ad eseguire con urgenza le lavorazioni in questione con lo stesso ribasso offerto per l’appalto originario (18%);

-Vista la fattura n. 3/E/2018 emessa dalla ditta OTTOERRE GROUP S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Roma (RM) e p.iva 12154281005, afferente i lavori sopra descritti, per un importo di euro 50.338,03 oltre iva 10%;   

-Rilevato che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 e s.m.i. della Legge 136/2010, si è provveduto alla richiesta del CIG quale identificativo dell’appalto posto in essere, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

-Visto il CIG acquisito risulta essere 7105842651;

Acclarato che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

D E T E R M I N A 

1)  La premessa è parte integrante della presente determinazione;

2) Di approvare gli atti contabili relativi alla realizzazione della fondazione della scala di emergenza e del vano tecnico, oltre che alla sistemazione dell’area esterna per la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado “Istituto comprensivo Mons. Paoletti”;

3) Di liquidare a favore della Ditta OTTOERRE GROUP SRL UNIPERSONALE, il credito risultante dalla fattura n. 3/E/2018 emessa dalla ditta OTTOERRE GROUP S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Roma (RM) e p.iva 12154281005, afferente i lavori sopra descritti, per un importo di euro 50.338,03 oltre iva 10%; imputandola al Codice n. 01.03-1.03.02.09.008 (ex capitolo 2449/6) del Bilancio 2018;

4) Di rendicontare la spesa alla Regione Marche secondo le indicazioni all’uopo impartite.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to LUCCIO ANNA RITA	

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  19-06-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to MANCINELLI LUANA	

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2018    al 04-07-2018
Lì  19-06-2018

	IL RESP.AREA TECNICA	
	F.to Luccio Anna Rita	

Copia conforme all’originale.
Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	LUCCIO ANNA RITA