COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.  100  DEL 18-10-2019

N. 239 del Registro Generale

OGGETTO: D.G.R. 172/2019 - ANNUALITA' 2019 -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA DELLA STRADA COMUNALE OSTERIA DI CIVITELLA. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di ottobre;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO  il  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi;
VISTA la  legge  15  maggio  1997,  n.  127;

PREMESSO che:
-	che con Deliberazione di G.C. n. 16 del 21/03/2019,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA VIARIA DELLA STRADA COMUNALE OSTERIA DI CIVITELLA”, per un importo complessivo di € 52.819,00 di cui € 40.014,64 per lavori e € 12.804,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

-	che, il Comune di Scheggino, per il progetto di cui sopra, ha avanzato domanda di partecipazione al Bando approvato dalla Regione Umbria con DD. 1915 del 27.02.2019, dalla Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio, Protezione Civile, Infrastrutture e Mobilità;
-	che la domanda di partecipazione, con Determinazione della stessa Regione Umbria, n. 4126 del 06.05.2019, veniva ammessa a finanziamento, per l’annualità 2019, con un contributo di € 47.319,00;
-	che il Comune di Scheggino, per l’esecuzione dell’opera ha assicurato il cofinanziamento con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che con Determinazione n. 56 del 08/07/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta “ORTANA ASFALTI S.R.L.”, con sede in Roma, Via Costantiniana, 14 – C.F.e P.IVA:0057793065, per un importo contrattuale di € 38.018,34 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,77%;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice ed hanno avuto effettivo inizio, sotto riserva di legge, in data 10/07/2019;
  
VISTO il Contratto di Appalto dei lavori sottoscritto in data 22/07/2019;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, a seguito delle esigenze manifestatesi durante il corso dei lavori, si è manifestata la necessità di predisporre una Perizia di variante, nella quale è stata individuata una diversa articolazione di alcune partite di lavoro da eseguire e sono previste opere in aumento, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali né alcun aumento della spesa originaria stanziata per la realizzazione dell’opera stessa, costituita dai seguenti documenti ed elaborati:
-	Relazione Tecnica Illustrativa;
-	Tav. U: Planimetria di dettaglio interventi;
-	Computo Metrico Estimativo
-	Quadro Compartivo tra perizia e progetto approvato;
-	Stima Incidenza Manodopera;
-	Quadro Tecnico Economico;

VISTA ed esaminata la perizia di variante  e suppletiva costituita dal seguente nuovo quadro economico di spesa, distinta in lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione:

            
ACCERTATO che la Perizia di Variante prevede lavori in aumento, finalizzati a risolvere situazioni impreviste ed imprevedibili sopravvenute successivamente all’avvio degli interventi e finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che determinano un incremento dell’importo contrattuale originario di € 1.395,77 oltre I.V.A. pari alla percentuale del 3,67%;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 106 comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e rientra nei limiti fissati dal successivo comma 7 dello stesso art. 106;  

VISTO all’uopo lo schema dell’atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi debitamente sottoscritto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1.	Di approvare, come approva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati, la Perizia di Variante dei lavori di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA VIARIA DELLA STRADA COMUNALE OSTERIA DI CIVITELLA”, per un importo complessivo di € 52.819,00, di cui €  39.414,11  per lavori di perizia (al netto del ribasso contrattuale, compresi costi, oneri di sicurezza e costo della manodopera)  e € 13.404,89, per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro tecnico economico:

e costituita dai seguenti elaborati tecnici depositati presso l’Ufficio Tecnico:
o	 Relazione Tecnica Illustrativa;
o	Tav. U: Planimetria di dettaglio interventi;
o	Computo Metrico Estimativo
o	Quadro Compartivo tra perizia e progetto approvato;
o	Stima Incidenza Manodopera;
o	Quadro Tecnico Economico;

2.	Di dare atto che per effetto della perizia di variante di cui al punto 1., si verifica un maggiore importo contrattuale di € 1.395,77;

3.	Di approvare l’allegato schema dell’atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

4.	Di dare atto che la presente perizia non comporta la necessità di assumere ulteriore impegno di spesa e rientra all’interno dell’impegno assunto con D.D. 56/2019 di € 52.819,00 con imputazione al Capitolo 2661 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   					                                  (F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

□ In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 18-10-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

□ Effettuati, ai sensi dell’Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, 

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
-	sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
-	sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
-	riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l’avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l’emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di  €. ....................... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull’intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì …………..

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

N. 508 DEL REGISTRO
DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 11-11-2019 al 26-11-2019

Dalla Residenza Municipale, lì 11-11-2019
IL RESP. DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa Roberta Isidori
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 11-11-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pamela Virgili