COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.  54  DEL 19-07-2018

N. 146 del Registro Generale

OGGETTO: L.R. N. 46 DEL 16/12/1997 - PIANO INTERVENTI PER L'ANNO 2014 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "CIVITELLA - MONTE SAN VITO" - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI LAVORI.

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di luglio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO  il  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi;
VISTA la  legge  15  maggio  1997,  n.  127;

PREMESSO che:
-	che con Deliberazione di G.C. n. 82 del 15/12/2015,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MONTE SAN VITO”, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 99.905,74 per lavori e € 50.094,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro tecnico economico:

1) IMPORTO DEI LAVORI		  	€	         98.893,94	
di cui:					
-	Incidenza Manodopera	€	12.340,04			
-	Incidenza Sicurezza	€	2.682,99			
-	Lavori soggetti a ribasso	€	83.870,91			
2) ONERI SPECIALE SICUREZZA			€	1.011,80	
IMPOTO COMPLESSIVO LAVORI (1+2)			€	99.905,74	
					
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.E					
IVA 22% su lavori	€	21.979,26			
Spese Tecniche (Prog., D.L., Cont., Sic.) 	€	10.900,00			
Contributi Integrativi 4% su SP. Tecn.	€	436,00			
IVA 22% su spese tecniche e C.P.	€	2.493,92			
Quota Ex art. 18 L. 109/94
Per eventuale adeguamento valori economici il 3%                                                     	€

€  	599,44

3.173,06	
		
Per Validazione Progetto oneri e IVA comp.	€	1.903,20			
Per Spese d’Asta	€	1.000,00			
Per sistemazione pubblica illuminazione a ridosso del centro storico di M. S. Vito IVA compresa	

€	

3.000,00			
Imprevisti	€	4.609,38			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	50.094,26	€	50.094,26	
TOTALE GENERALE			€	150.000,00	

-	che la Regione Umbria con  Determinazione Dirigenziale del Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico della Regione Umbria, n. 6366 del 12 luglio 2016 ha assegnato in via definitiva il contributo di € 120.000,00 stanziato per l’esecuzione dell’opera con D.G.R. 447/2015;

DATO ATTO   altresì:
-	che con Determinazione n. 47 del 15/06/2015 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione esecutiva, definitiva, sicurezza direzione lavori e contabilità dell’Opera alla Società IQUADRO S.R.L. di Spoleto;
-	che con Determinazione n. 89 del 26/11/2015 è stato affidato l’incarico professionale relativo alla validazione del progetto di che trattasi allo Studio SAU di Cascia; 
-	che con Determinazione n. 50 del 18/08/2016, con la quale è stato stabilito che, la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, sarà svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione d’interesse, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
-	che con Determinazione n. 59 del 06/10/2016, è stato dato avvio al procedimento di gara tramite procedura negoziata per l’appalto dei lavori esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
-	che con Determinazione n. 65 del 24/11/2016 sono stati aggiudicati i lavori all’Impresa Gosti srl di Moiano (PG) per un importo netto di appalto di € 72.421,24, determinato applicando il ribasso offerto del 32,77% sull’importo posto a base di gara di € 99.905,74 (€ 12.340,04 per manodopera, € 1.011,80 per costi della sicurezza ed € 2.682,99 per oneri sicurezza);

CONSTATATO che i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice ed hanno avuto effettivo inizio sotto riserva di legge in data 12/01/2017;

VISTO il Contratto di Appalto dei lavori sottoscritto in data 31/05/2017 - Rep. 426 del 31/05/2017;

VISTO:
-	 la Determinazione n. 81 del 07/12/2017 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 06/10/2017 dell’importo lordo di € 58.593,12 e liquidato il 1° Certificato di Pagamento di € 42.400,00 oltre I.V.A. a norma di legge;
-	 la Determinazione n. 32 del 02/05/2018 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 11/09/2017 dell’importo lordo di € 93.424,78 e liquidato il 2° Certificato di Pagamento di € 24.798,23 oltre I.V.A. a norma di legge;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, a seguito delle esigenze manifestatesi durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, ha redatto una Perizia di variante, trasmessa con nota Prot. 3747 del 15/09/2017, nella quale è stata individuata una diversa articolazione di alcune partite di lavoro da eseguire e sono previste opere in aumento, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali né alcun aumento della spesa originaria stanziata per la realizzazione dell’opera stessa, costituita dai seguenti documenti ed elaborati:
-	Elaborato Grafico;
-	Relazione Tecnica;
-	Quadro Economico;
-	Computi Metrici Estimativi: Lavori, Incidenza Manodopera, Incidenza Sicurezza, Costo della Manodopera;

VISTA ed esaminata la perizia di variante  e suppletiva costituita dal seguente nuovo quadro economico di spesa, distinta in lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione:   

1) IMPORTO DEI LAVORI		  	€	         145.086,75	
di cui:					
-	Incidenza Manodopera (a)	€	16.740,99			
-	Incidenza Sicurezza (b)	€	4.352,60			
-	Lavori soggetti a ribasso (c)	€	83.870,91			
-	Ribasso d’asta del 32,77% (d)	€	- 40.632,56			
					
2) ONERI SPECIALE SICUREZZA			€	1.011,80	
IMPORTO TOT. NETTO LAVORI (1+2-(d))			€	105.465,99	
					
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.E					
IVA 22% su lavori	€	23.202,52			
Sp. Tec. (Prog., D.L., Cont., Sic., Val. ecc.) 	€	13.176,34			
Contributi Integrativi 4% su SP. Tecn.	€	527,05			
IVA 22% su spese tecniche e C.P.	€	3.014,75			
Quota Ex art. 18 L. 109/94
Per eventuale adeguamento valori economici il 3%                                                     	€

€  	876,59

0,00	
		
Per Validazione Progetto oneri e IVA comp.	€	1.800,00			
Per Spese d’Asta	€	31,50			
Per sistemazione pubblica illuminazione a ridosso del centro storico di M. S. Vito IVA compresa	

€	

0,00			
Lavori in economia compr. I.V.A.	€	1.905,26			
Imprevisti	€	0,00			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.534,01	€	44.534,01	
TOTALE GENERALE			€	150.000,00	

            
ACCERTATO che la Perizia di Variante prevede lavori in aumento, finalizzati a risolvere situazioni impreviste ed imprevedibili sopravvenute successivamente all’avvio degli interventi e finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che determinano un incremento dell’importo contrattuale originario del 45,63%;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 106 comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e rientra nei limiti fissati dal successivo comma 7 dello stesso art. 106;  

VISTO all’uopo lo schema dell’atto di sottomissione e del verbale dei nuovi prezzi debitamente sottoscritto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover condizionare l’efficacia del presente atto alla superiore approvazione della perizia di variante dal parte del Servizio Infrastrutture per la Mobilità della Regione Umbria;

D E T E R M I N A

1.	Di approvare, come approva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati, la Perizia di Variante dei lavori di “MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MONTE SAN VITO”, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui €  105.465,99  per lavori di perizia (al netto del ribasso contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza e costo della manodopera)  e € 44.534,01, per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro tecnico economico:
	
1) IMPORTO DEI LAVORI		  	€	         145.086,75	
di cui:					
-	Incidenza Manodopera (a)	€	16.740,99			
-	Incidenza Sicurezza (b)	€	4.352,60			
-	Lavori soggetti a ribasso (c)	€	83.870,91			
-	Ribasso d’asta del 32,77% (d)	€	- 40.632,56			
					
2) ONERI SPECIALE SICUREZZA			€	1.011,80	
IMPORTO TOT. NETTO LAVORI (1+2-(d))			€	105.465,99	
					
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.E					
IVA 22% su lavori	€	23.202,52			
Sp. Tec. (Prog., D.L., Cont., Sic., Val. ecc.) 	€	13.176,34			
Contributi Integrativi 4% su SP. Tecn.	€	527,05			
IVA 22% su spese tecniche e C.P.	€	3.014,75			
Quota Ex art. 18 L. 109/94
Per eventuale adeguamento valori economici il 3%                                                     	€

€  	876,59

0,00	
		
Per Validazione Progetto oneri e IVA comp.	€	1.800,00			
Per Spese d’Asta	€	31,50			
Per sistemazione pubblica illuminazione a ridosso del centro storico di M. S. Vito IVA compresa	

€	

0,00			
Lavori in economia compr. I.V.A.	€	1.905,26			
Imprevisti	€	0,00			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.534,01	€	44.534,01	
TOTALE GENERALE			€	150.000,00	

2.	Di dare atto che per effetto della perizia di variante di cui al punto 1., si verifica un maggiore importo contrattuale di € 33.044,75;

3.	Di approvare l’allegato schema dell’atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

4.	Di dare atto che la presente perizia non comporta la necessità di assumere ulteriore impegno di spesa e rientra all’interno del finanziamento assegnato dalla Regione dell’Umbria con D.G.R. 447/2015.

5.	Di trasmettere la presente determinazione unitamente agli elaborati tecnici di variante alle Regione Umbria e di subordinare la realizzazione dei lavori in variante alla determinazione di autorizzazione rilasciata dal Servizio Infrastrutture per la Mobilità della Regione Umbria.

                          Il Responsabile dell’Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   					                                  (F.to Dott. Ing. Pamela Virgili)

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

□ In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-07-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

□ Effettuati, ai sensi dell’Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, 

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
-	sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
-	sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
-	riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l’avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l’emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di  €. ....................... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull’intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, lì …………..

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Pasqua Lena Bianchi

N. 319 DEL REGISTRO
DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018

Dalla Residenza Municipale, lì 19-07-2018
IL RESP. DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa Roberta Isidori
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pamela Virgili