COMUNE DI SMERILLO

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE  NUMERO  61 DEL  13-11-20

OGGETTO: SCUOLA 2019-2020 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno  duemilaventi il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 15:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

  VALLESI ANTONIO 	 SINDACO 	P  	
  SEVERINI TONINO 	VICE SINDACO 	P  	
  IEZZI MASSIMO 	ASSESSORE 	A  	

Presenti n.   2  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GRELLI  DR PIERLUIGI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. VALLESI ANTONIO nella sua qualità di  SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•	con DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. QUALITÀ DELL’ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI Regione Marche n.179/2017 è stato approvava il Bando: POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.1 “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici”, Intervento 13.1.2A “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” 
Considerato che:
•	con il suddetto bando di finanziamento la Regione Marche intende concedere di contributi finalizzati al risparmio energetico relativi a edifici pubblici non residenziali, localizzati nel territorio regionale; si  intende così  favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile negli edifici pubblici non residenziali.
•	I contributi sono concessi per le seguenti tipologie di interventi: 
a)	interventi di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici pubblici esistenti riferiti sia all’involucro edilizio sia agli impianti (installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, impianti di cogenerazione, ecc.) e in ogni caso riguardanti tutte le opere edili finalizzate alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio e volte a conseguire una elevata efficienza energetica e qualità ambientale;
b)	introduzione di sistemi di contabilità energetica per rilevare, monitorare e documentare l’evoluzione dei consumi degli edifici pubblici assicurando l’implementazione del catasto energetico regionale;
Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/04/2018 il Comune di Smerillo ha espresso la chiara volontà di partecipare al bando sopra richiamato attraverso la presentazione di un progetto definitivo sull’immobile ospitante la scuola per l’infanzia “Montefalcone Appennino-Smerillo” sita in frazione San Martino al Faggio, approvando gli elaborati relativi al progetto definitivo, redatti dall’Ing. Conti Massimo;
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2019 nella quale si riporta l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia- Covenant of Mayors for Climate e Energy deliberando:
Ricordato che 
-	con Decreto del Dirigente delle Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n, 107 del 02/08/2019 è stata approvata la relativa graduatoria di merito con concessione di finanziamento per le domande presentate dai beneficiari, in ordine di graduatoria dalla n. 1 al n. 18, nella quale il Comune di Smerillo è alla settima posizione.
-	Con nota Prot. 3442 del 20/08/2019, il Comune di Smerillo comunicava alla Regione Marche, l’accettazione in merito all’assegnazione del contributo oggetto della domanda di finanziamento per il lavori di “incremento dell’efficienza energetica della Scuola dell’Infanzia sita in Smerillo, frazione San Martino al Faggio e di proprietà del Comune di Smerillo”.
-	con Decreto del Dirigente delle Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n, 128 del 03/10/2019 si concedeva il contributo di € 80.000,00 finanziabile al 75% dalla Regione Marche ( € 60.000) e con accollo del comune del 25% pari a € 20.000,00;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55/2019 ad oggetto: INTERVENTI DIVERSI SU SCUOLA DELL'INFANZIA CONTRADA SAN MARTINO AL FAGGIO – PROVVEDIMENTI”
Richiamata la Determina dell’Area Tecnica n. 05 del 10/01/2020 con la quale si affidava tramite trattativa privata diretta sul MEPA n. ordine 1180393, all’Ing. Massimo Conti C.F.: CNTMSM76B19A252Y- con studio in Via San Ruffino, 8 – 63857 – Amandola (FM), P. IVA: 01787000445, iscritto all’Ordine degli Ingegneri delle provincia di Fermo al n. 374, il SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, OLTRE CHE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E VERIFICA FINALE relativamente all’intervento in oggetto per il corrispettivo di € 5.295,97 oltre iva;
Visto che il professionista incaricato Ing. Massimo Conti ha inviato in data 03/04/2020 al protocollo in ingresso n. 1923 la documentazione relativa al progetto esecutivo dell’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO, composta dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale e specialistica impianti
2. Documentazione Fotografica
3. Elenco prezzi
4. Computo metrico estimativo
5. Analisi prezzi
6. Stima incidenza sicurezza generale
7. Stima incidenza manodopera
8. Quadro tecnico economico
9. Elaborati grafici dello stato di fatto
10. Elaborati grafici dello stato di progetto
11. Piano di Manutenzione
12. Capitolato speciale d’appalto
13. Schema di contratto
14. Piano sicurezza e coordinamento, Layout, Gantt, Analisi Rischi
15. Cronoprogramma
16. Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento
17. Attestato di Prestazione Energetica (APE) di progetto con l’intervento previsto
18. Diagnosi energetica
Dato atto del Quadro tecnico economico di seguito riportato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO 	
		
IMPORTO LAVORI A MISURA	53,942,91	
Lavori a base di gara	58.546,630  	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,180  	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,450  	
Importo ribasato	52.942,734  	
Importo lavori post gara	53.942,914  	
		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	26.057,076  	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,660  	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,970  	
Iva spese tecniche10% 	1.165,110  	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,620  	
Economie di gara	4.603,716  	
 	 	
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,0  	
Richiamate:
•	la Delibera di Giunta n. 21 del 03/04/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo” composto dai seguenti sopra elencati con il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
		
IMPORTO LAVORI A MISURA	53,942,91	
Lavori a base di gara	58.546,630  	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,180  	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,450  	
Importo ribasato	52.942,734  	
Importo lavori post gara	53.942,914  	
		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	26.057,076  	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,660  	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,970  	
Iva spese tecniche10% 	1.165,110  	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,620  	
Economie di gara	4.603,716  	
 	 	
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,0  	
per l’importo complessivo di € 80.000,00 finanziato per € 60.000,00 con fondi regionali e cofinanziamento dal comune per € 20.000,00 confermando che il Responsabile del procedimento è P.A. Tonino Severini 
•	la Determina Area Tecnica n. 55/64 del 18/04/2020 con la quale si determinava di avviare una procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 per l’appalto dei lavori di INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO richiedendo a n.3 Ditte qualificate un preventivo di offerta economica migliorativa sull’importo a base di gara di Euro 57.546,45 (oltre IVA al 10%)
•	la Determina Area Tecnica n. 57/71 del 30/04/2020 con la quale si determinava di aggiudicare l’affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 per l’appalto dei lavori di INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO DI SMERILLO per un importo a base d’asta di € 57.546,45 di cui € 1.000,18 quali oneri per la sicurezza ordinaria non soggetti a ribasso alla ditta 
F.LLI BRUNI s.n.c. Di Bruni Mariano e Nazzareno 	Fraz. Villa Serra, 63858  Montefortino	P.iva 00517640447	brunimn@pec.it	
che ha offerto un ribasso del 8 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 54.283,93 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza generale pari a € 1000,18 non soggetti a ribasso - CIG: 8276841942 e di approvare il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO rimodulato in base al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva:
QUADRO TECNICO ECONOMICO 	 	
		
IMPORTO LAVORI A MISURA	53,942,91	
Lavori a base di gara	58.546,630  	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,180  	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,450  	
Importo ribasato	52.942,734  	
Importo lavori post gara	53.942,914  	
		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	26.057,076  	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,660  	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,970  	
Iva spese tecniche 22% 	1.165,110  	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,620  	
Economie di gara	4.603,716  	
		
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,0  	
•	il VERBALE DI PRESA D’ATTO E DI RINVIO CONSEGNA LAVORI di cui all’art. 5 D.M. 49/2018, eseguito tramite conferenza telefonica vista l’emergenza sanitaria e le disposizioni normative attuate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale il direttore dei lavori Ing. Massimo Conti DISPONEVA di rimandare la consegna dei lavori in luogo, al giorno 04/05/2020, (o successivo da concordare) non potendo verificare la corrispondenza tra gli elementi del progetto richiamato e le attuali condizioni e le circostanze locali.
Rilevato che, per sopraggiunte necessità da parte dell’Amministrazione e a seguito del reperimento di nuovi fondi per il miglioramento sismico della scuola si è deciso di migliorare ulteriormente la qualità delle soluzioni adottate nel progetto per l’efficienza energetica.

Vista, quindi, la necessità di apportare delle modifiche NON SOSTANZIALI al progetto in corso d’opera 
Acquisito al protocollo n. 5766 del 06/11/2020 il progetto di variante relativo a INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo” composto dai seguenti elaborati:
•	DG.01_Relazione generale di variante
•	DG.02_Elenco prezzi
•	DG.03_Computo metrico estimativo
•	DG.04_Analisi prezzi
•	DG.05_Stima incidenza sicurezza generale
•	DG.06_Stima incidenza manodopera
•	DG.07_Quadro di raffronto computi metrici
•	DG.08_Quadro tecnico economico
•	DG.09_Piano di Manutenzione dell’opera
•	DG.10_Capitolato speciale d’appalto
•	DG.11_Schema di contratto
•	DG.12_Elaborato tecnico di copertura e allegati
•	DG.13_APE stato variato
•	DG.14_Diagnosi energetica stato variato
•	DG.15_Verifica dei requisiti acustici passivi
•	EG.ARCH.01_Inquadramento urbanistico-territoriale
•	EG.ARCH.02_Rilievo architettonico dello stato di fatto – Piante, prospetti
•	EG.ARCH.03_Rilievo architettonico dello stato di fatto – Sezioni, Viste 3D EG.ARCH.04_Progetto Architettonico – Stato finale
•	EG.IMP.01_Efficientamento energetico ed impiantistico - Cappotto, Schemi impiantistici e Particolari - Stato Variato
Con il seguente Quadro Tecnico Economico di raffronto
QUADRO TECNICO ECONOMICO	DA PROGETTO 	VARIANTE	
 	 	 	
IMPORTO LAVORI A MISURA	 	 	
Lavori a misura da progetto	58.546,63 €	63.136,81 €	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,18 €	1.144,32 €	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,45 €	61.992,49 €	
 	 	 	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	21.453,37 €	16.863,18 €	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,66 €	6.313,68 €	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,97 €	5.295,97 €	
Iva spese tecniche 22 % 	1.165,11 €	1.165,11 €	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,62 €	4.088,42 €	
 	 	 	
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,00 €	80.000,00 €	
Richiamato l’art.106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente dispone:
[…]
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) …omissis…;
b) …omissis…;
c) …omissis…;
d) …omissis…;
e) Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
[…]
Riscontrato, quindi, che la variante in oggetto:
a)	NON è SOSTANZIALE, in quanto non altera la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti come previsto dal comma 4 art.106 e mantiene invariato l’importo progettuale complessivo;
b)	Inoltre RISULTA INFERIORE al 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali, specificato nel quadro economico di variante:
QUADRO TECNICO ECONOMICO	DA PROGETTO	POST GARA
(ribasso 8%)	VARIANTE	VARIANTE POST GARA	
 	 	 	 	 	
IMPORTO LAVORI A MISURA	 	 	 	 	
Lavori a misura da progetto	58.546,63 €	53.942,91 €	63.136,81 €	58.533,09 €	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,18 €	1.000,18 €	1.144,32 €	1.144,32 €	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,45 €	52.942,73 €	61.992,49 €	57.388,77 €	
 	 	 	 	 	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	21.453,37 €	26.057,08 €	16.863,18 €	16.402,81 €	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,66 €	5.394,29 €	6.313,68 €	5.853,31 €	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,97 €	5.295,97 €	5.295,97 €	5.295,97 €	
Iva spese tecniche 22 % 	1.165,11 €	1.165,11 €	1.165,11 €	1.165,11 €	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,62 €	9.137,62 €	4.088,42 €	4.088,42 €	
 Economie di gara	 	5.064,09 €	 	5.064,09 € 	
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Ricordato che sono stati acquisiti i codici 
CUP: J37F18000160006
CIG progettazione: ZBE2B6ED61
CIG lavori: 8276841942
Atteso che il progetto di variante è conforme alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale e risponde alle necessità per le quali è stato redatto, per cui è meritevole di approvazione;
Visto:
-	 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
-	D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
-	il D.Lgs. n. 50/2016; 
-	lo Statuto Comunale; 
Ricordato che:
•	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il biennio 2020/22;
•	con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022;
•	con delibera di Giunta Comunale n 24 del 30.04.2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEFINITIVO”;
Acquisiti i pareri dei Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Considerato che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
DELIBERA
•	di approvare il progetto di variante relativo a INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - “Intervento di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della scuola dell’Infanzia sita in c.da. San Martino al Faggio di Smerillo” composto degli elaborati sopra elencati per l’importo complessivo di € 80.000,00 predisposto dal professionista incaricato Ing. Massimo Conti, con il seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO	DA PROGETTO	VARIANTE	
			
IMPORTO LAVORI A MISURA			
Lavori a misura da progetto	58.546,63 €	63.136,81 €	
di cui Oneri per la sicurezza ordinaria (non assoggettabili a ribasso)	1.000,18 €	1.144,32 €	
Importo Lavori soggetto a ribasso	57.546,45 €	61.992,49 €	
			
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	21.453,37 €	16.863,18 €	
IVA al 10% sui lavori (beni per opere urbanizzazione primaria)	5.854,66 €	6.313,68 €	
Spese Tecniche di progettazione, direzione dei lavori, Sicurezza 	5.295,97 €	5.295,97 €	
Iva spese tecniche 22 % 	1.165,11 €	1.165,11 €	
Imprevisti e arrotondamenti (comprese eventuali spese di espletamento gara)	9.137,62 €	4.088,42 €	
			
TOTALE GENERALE APPALTO	80.000,00 €	80.000,00 €	
•	di dare atto che rimane invariato l’importo progettuale complessivo
•	di dare atto che al finanziamento dell’intera somma progettuale si procederà:
•	Con i fondi di cui al DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE n. 128 	per un importo di € 60.000,00
•	Compartecipazione comunale 		per un importo di € 20.000,00

•	di dare atto che la spesa conseguente trova copertura al cap. 2662/2 del bilancio 2020-22

•	di confermare il Responsabile dell’Area Tecnica P.A. Tonino Severini quale Responsabile del procedimento

•	di demandare al RUP ogni conseguente adempimento

•	di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge.

COMUNE DI SMERILLO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 	SCUOLA  2019-2020  -  INTERVENTO  DI MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA  SITA IN FRAZ. SAN MARTINO AL FAGGIO
DI  SMERILLO - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESE=

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di area esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 61 in Data 13-11-20 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole
Smerillo, lì 06-11-2020
      				      
					  Il Responsabile dell’Area Interessata
					  SEVERINI TONINO

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole
Smerillo, lì 06-11-2020
					
					 Il Responsabile dell’Area Interessata
					GRELLI  DR PIERLUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate: 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 
VALLESI ANTONIO                                     	 GRELLI  DR PIERLUIGI

=========================================================================

DeIla presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE          
                                                     GRELLI  DR PIERLUIGI

========================================================================
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 13-11-2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE          
                                                     GRELLI  DR PIERLUIGI     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SMERILLO

E' copia analogica conforme all'originale informatico.
Dalla Residenza municipale, li	
Il Segretario Comunale
GRELLI  DR PIERLUIGI