C O P I A 
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  37   Del  31-07-2019

Oggetto:	RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PER PANTANETO, INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 107 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

   CECOLI PIETRO	SINDACO	P	
BOLDRINI GAIA	ASSESSORE	P	
PAOLETTI SANTE	ASSESSORE	P	

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S	

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-07-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to CECOLI PIETRO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-07-2019	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria della strada comunale per Pantaneto”, da realizzare con i contributi di cui all’art. 1 comma 107 della Legge 145/2018 assegnati a questa Amministrazione Comunale con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10/01/2019, che comporta una spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 31.310,68 per lavori ed euro 8.689,32 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
•	con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 33 del 13/05/2019 i lavori di cui sopra sono stati affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla società EDILASFALTI s.r.l., con sede in C.da Carbone n.4 - 62032 Camerino (MC), per un importo contrattuale di euro 28.729,11 (di cui euro 27.789,79 per lavori ed euro 939,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), corrispondente ad un ribasso percentuale del 8,50%, oltre IVA in misura del 22% pari ad euro 6.513,45, per un importo complessivo pari ad euro 35.049,51;
•	in data 14/05/2019 hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria strada comunale per Pantaneto;

Considerato che durante il corso dei lavori in seguito a circostanze impreviste e imprevedibili, si sono riscontrate nuove esigenze nell’esecuzione dei lavori, dove è emersa la necessità di modificare alcuni aspetti progettuali ed eseguire alcuni lavori complementari;

Ritenuto opportuno rimodulare il quadro tecnico economico in base alle nuove esigenze verificatesi, recuperando per la realizzazione delle stesse, le somme derivanti dal ribasso offerto sull’importo dei lavori dalla ditta incaricata, utilizzando gli importi afferenti dalle lavorazioni non più eseguite e le somme destinate agli imprevisti, rientrando comunque nel finanziamento concesso;

Visto la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico predisposto dal progettista e D.L. dall’arch. Veronica Rasponi, che risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI	
Importo lavori da progetto di variante	35.285,55 €	
Incidenza della sicurezza (3% dell’importo dei lavori)	1.058,57 €	
Importo soggetto al ribasso del 8,50%	34.226,98 €	
Importo ribassato del 8,50%	2.909,29 €	
TOTALE LAVORI	32.376,26 €	

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori (22%)	7.122,78 €	
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	500,97 €	
Imprevisti Iva compresa	0,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.623,75 €	

TOTALE PROGETTO	40.000,00 €	

Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento come da quadro economico rimodulato coincide con quello del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/04/2019 e con l’importo del contributo concesso, pari ad euro 40.000,00;

Rilevato che l’importo stimato dei lavori desumibile dal Quadro Economico si discosta in eccesso rispetto a quello del progetto originario dell’12,69%, per cui ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. questa Stazione Appaltante può imporne all'appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, alle medesime condizioni previste nel contratto originario, assumendo per gli stessi un ribasso percentuale del 8,50%;

Visto l'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dall'art. 35, b) il 15% del valore iniziale del contratto, senza che la modifica alteri la natura complessiva del contratto;

Dato atto che con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/04/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto Pietro Cecoli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, e, come supporto al RUP l’arch. Veronica Rasponi dipendente dell’ufficio tecnico comunale; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’assestamento e rimodulazione del quadro economico relativo ai lavori suddetti, in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione;

Visti:
•	il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
•	il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
•	il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
•	la Legge 145/2018; 
•	il decreto del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019;
•	lo Statuto comunale vigente;
•	il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,  

DELIBERA

1)	la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)	Approvare la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria strada comunale per Pantaneto” predisposto dall’arch. Veronica Rasponi che risulta così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO ED AGGIORNATO	
IMPORTO LAVORI	
Importo lavori da progetto di variante	35.285,55 €	
Incidenza della sicurezza (3% dell’importo dei lavori)	1.058,57 €	
Importo soggetto al ribasso del 8,50%	34.226,98 €	
Importo ribassato del 8,50%	2.909,29 €	
TOTALE LAVORI	32.376,26 €	

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori (22%)	7.122,78 €	
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	500,97 €	
Imprevisti Iva compresa	0,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.623,75 €	

TOTALE PROGETTO	40.000,00 €	

e i relativi elaborati progettuali appresso indicati che contestualmente approvano:

A.	Relazione Tecnica Descrittiva
B.	Elenco Prezzi Unitari 
C.	Computo Metrico agg.
D.	Quadro Tecnico Economico agg.

3)	Dare atto che l’assestamento e rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di “manutenzione straordinaria strada comunale per Pantaneto” è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

4)	Dare atto che in data 22/07/2019 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi a norma dell'art. 8 c. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

5)	Dare atto che la spesa complessiva relativa a tale investimento trova copertura nei contributi di cui all’art. 1 comma 107 della Legge 145/2018 assegnati a questa Amministrazione Comunale con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10/01/2019 e che la medesima trova imputazione all’intervento 09.02-2.02.01.09.00, ex cap. 2842/2 del Bilancio 2019, gestione competenza, che presenta la sufficiente disponibilità.

6)	Demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli affidamenti e tutto quanto attiene la definizione e conclusione dell’appalto. 

Inoltre, ravvisati gli estremi di necessità e urgenza, con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,  

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente						Il Segretario Comunale
CECOLI PIETRO				f.to Montaruli dott. Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata affissa  all’Albo Pretorio di questo comune dal giorno 27-09-2019 al giorno 12-10-2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 27-09-2019
	
Il Responsabile del Servizio      
f.to CECOLI PIETRO

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal 31-07-2019
X	essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 27-09-2019    
Il Segretario Comunale      
F.to Montaruli dott. Angelo

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li 27-09-2019
Il Segretario Comunale     
Montaruli dott. Angelo